11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
대구종합유통단지 녹색보행가로조성	2,480	1,498	982	0	2014	2011	100
북구청사 리모델링	15,270	0	707	14,563	2016	2014	19
안경산업 토탈 비즈니스센터건립	19,800	4,490	4,187	11,123	2015	2011	90
산격1동 신청사 건립	3,580	1,400	0	2,180	2015	2011	49
대구 능금시장 아케이드설치사업(1차)	1,300	357	943	0	2015	2011	100
북구 산격로 대학로 주변보행 환경 개선사업	10,900	74	1,242	9,584	2016	2012	50
어린이 주부 도서관 건립(대현동)	2,000	0	50	1,950	2015	2012	80
관음 제2공영주차장 조성사업	2,530	38	1,372	1,120	2015	2012	60
북구 대불스포츠 센터 건립	14,500	7,950	5,275	1,275	2015	2009/ 2013 (재심사)	80%
팔달동 청구 장미아파트 남편 교량건설	4,500	5	495	4,000	2016	2013	30
복현동 우성하이츠~성보학교 간 도로건설	2,400	0	200	2,200	2016	2014	20

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

대구종합유통단지 녹색보행가로조성

담당자

건설과 김이석(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 『2013세계에너지총회』『2015세계물포럼』등 대규모 국제행사를 앞두고 도시활력을 창조할 수 있는 『녹색 보행도로』를 조성하여 신규고객 창출을 통한 종합유통단지 활성화에 기여하고, 유통단지를 찾는 국내외 방문객 및 시민, 인근 산업단지 근로자들에게 휴식공간 제공.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ～ 2014년

○ 위 치 : 국제행사장(엑스코) 주변도로

○ 규 모 : 보행공간 조성(B=15~25m, L=2,069m)

- 단지의 특수성을 고려한 보행포장 개선, 보행쉼터조성

특색있는 LED 가로등개체 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,480	1,498	982	-	-
국 비	1,200	1,196	4	-	-
시 도 비	1,280	302	978	-	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.  3. 26. : 기본계획 및 실시설계완료

○ 2013.  5. 13. ~ 10. 29. : 1차공사 시행

○ 2014.  1. 20. ~  6. 18. : 2차공사 시행

사업명

북구청사 리모델링사업

담당자

재무과 최지영(☎665-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설의 노후화로 긴급한 보수보강 필요, 건물의 안전성 확보 시급

○ 사무공간 부족 및 장애인 편의시설 등 법정시설 미설치로 불편초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 09. ~ 2016. 07.

○ 위 치 : 북구 옥산로 65 (침산동)

○ 규 모 : 연면적 12,657㎡(지하1층/지상5층, 리모델링11,257㎡/증축1,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	15,270		707	12,940	1,623
국 비	698			698
시 도 비	260			260
시군구비	1,498		707	791
지 방 채	10,000			8,377	1,623
민간자본
기타(기금)	2,814			2,814

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

○ ‘13. 10.  7 : 리모델링 사업계획 시행

○ ‘14.  9. 16 : 건축공사 일상감사 및 계약심사

○ ‘14. 12. 23 : 건축공사 계약 (㈜태주종합건설)

※ 전기공사-㈜홍원전력(‘14.12.23), 기계설비공사-㈜도경이엔지(‘15.01.12),

소방공사-㈜흥신건설(’15.01.27), 정보통신공사(‘15.01.27)

○  ‘14. 12. 31 : 공사 착공

○  ‘15.  3. 10 : 임시가설청사 준공

□ 향후계획

○ ’15. 03. ~ ’15. 12. : 민원실 상부 증축공사

○ ’15. 12. ~ ’16.  6. : 본관동 리모델링공사

○ ’16. 07. : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

안경산업 토탈비즈니스센터 건립

담당자

경제진흥과 이충기(☎665-2645)

□ 사업목적 및 필요성

○ 안경산업 생산환경 개선과 인프라를 확충하여 선진국형 제조·유통기반을       구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 9. ~  2015. 12.

○ 위 치 : 북구 노원동3가 20-12번지

○ 규 모 : 지하1층, 지상7층, 연면적 9,957.61㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  19,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	19,800	4,490	4,187	11,123
국 비	9,900	327	2,747	6,826
시 도 비	5,900	163	1,440	4,297
시군구비	4,000	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90 %)

○ 2014. 1. 20. : 공사착공

○ 2014. 07. 11 : 공사기간 변경(매립폐기물 및 지반보강)

□ 향후계획

○ 2015. 7. : 위수탁 협약 체결

○ 2015. 7. 26. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 당초 공사 준공 예정인 2015.4.14.에서 매립폐기물 및 지반보강 공사로 75일이, 기계설비공사 설계변경으로 인한 일상감사 소요로 28일이 증가되어 2015. 7. 26. 준공예정임

사업명

산격1동 신청사 건립

담당자

재무과 최지영(☎665-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건립한 지 30여년이 경과한 건물로써 천정 누수 등 노후화로 이용주민의 불편 초래

○ 지역주민의 오랜 숙원사업을 해결하여 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 12. ~ 2015. 09.

○ 위 치 : 북구 연암로36길 6 (산격동)

○ 규 모 : 지상3층(연면적 938.8㎡, 대지면적 1,231㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,580	1,400	55	2,125
국 비
시 도 비
시군구비	1,980	1,400		580
지 방 채	600			600
민간자본
기 타	1,000		55	945

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

○  ’10. 12. ~ ’14. 03. : 신축계획 수립, 부지매입

○  ’14. 04. ~ ’14. 12. : 기본 및 실시설계

○  ’15. 02. : 가시설(흙막이) 및 토목공사

○  ’15. 03. : 기초 및 1층 골조공사

○  ’15. 04. : 2층 골조공사

○  ’15. 05. : 3층 골조공사

○  ’15. 06. : 지붕층 골조공사

□ 향후계획

○  ’15. 07. ~  ’15. 09. : 마감공사 및 부대토목(조경)공사

○  ’15. 09. : 공사준공

사업명

대구능금시장아케이드설치사업(1차)

담당자

경제진흥과 이명호(☎665-2654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적하고 편리한 쇼핑공간 조성으로 시장활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1 ～ 2015. 2

○ 위    치 : 칠성동1가250-1번지 일원

○ 사업규모 : 아케이드 설치 A=1,620㎡ 및 부대공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15년연도	‘15연도 이후
계	1,300	357	943
국 비	780	214	565
시 도 비	195	54	142
시군구비	195	54	142
지 방 채
민간자본	130	35	94
기 타

□ 추진상황(100%)

○ 설계용역 완료

○ 사업착공(2013.8)

○ 사업완료(2015.2)

□ 향후계획

○ 시설물 유지관리

사업명

북구 산격로·대학로 주변 보행환경 개선사업

담당자

교통과 최재화(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산격로·대학로 주변 도로의 보행환경을 전면적으로 개선하여 젊고 활기 넘치는 정주 공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 10. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 산격로·대학로 일원

○ 규 모 : 보행환경 개선(L=5.2km), 공영주차장 조성(2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	10,900	74	1,242	9,584	-
국 비	2,800	37	776	1,987	-
시 도 비	5,450	37	429	4,984	-
시군구비	2,650	-	37	2,613	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 산격로·체육관로 보행환경 개선사업 준공

○ 대학로 주변 보행환경 개선사업, 산격3동 무지개공영주차장 건립공사 착공

○ 산격4동 공영주차장 조성공사 설계 용역 착수

□ 향후계획

○ 대학로 주변 보행환경 개선사업 및 산격3동 무지개공영주차장 건립공사 준공(2015. 11. ~ 12.)

○ 산격4동 공영주차장 조성공사 준공(2016. 12.)

사업명

어린이주부도서관 건립(대현동)

담당자

평생학습과 조현경(☎665-2712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민들의 지식정보 접근성을 높이기 위해 부족한 도서관 인프라 확충

○ 주민들에게 다양한 지식과 정보 제공, 문화서비스 접근 기회 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2011년 ~ 2015년

○ 위    치 : 대구광역시 북구 대현남로 43(대현동)

○ 규    모 : 지상 3층, 건축연면적 835.31㎡(부지면적 703.1㎡)

○ 주요시설 : 자료실, 문화강좌실, 사무실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,000	50	669	1,281	0
국 비	800	20	267	513	0
시 도 비	600	15	201	384	0
시군구비	600	15	201	384	0
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 건립 기본계획 수립 : 2011년 11월

○ 재정 투․융자 심사: 2012년 2월

○ 대현동 어린이․주부도서관 건립 시행계획 수립 : 2013년 6월

○ 도서관 연접부지 매입, 등기 : 2013년 5월 ∼ 9월

○ 건축설계 공모 : 2013년 7월

○ 건축설계 용역 및 대구시 디자인협의 : 2013년 10월 ∼ 2014년 5월

○ 건축공사 입찰 공고 : 2014년 5월

○ 공사 계약 및 착공 : 2014년 6월(착공일 : 2014. 6. 23.)

□ 향후계획

○ 공사 완료 : 2015년 3월(완료일 : 2015. 3. 21.)

○ 개    관 : 2015년 8월

사업명

북구 대불스포츠센터 건립

담당자

문화체육과 류상수(☎665-2794)

□ 사업목적 및 필요성

○ 각종 생활체육 대회의 원활한 개최 및 편의 도모를 위해 생활체육과

전문체육 기능을 동시에 수행하는 다목적 스포츠센터의 건립이 필요

○ 기존 체육관은 단순 경기용인데 반해, 여가와 문화․체육활동이 연계된

주민 친화형 다목적 스포츠센터의 조기 건립이 시급함

○ 최신형 다목적 스포츠센터를 구축함으로 구민에게 양질의 체육서비스를 제공하고

생활체육활동을 통하여 구민의 여가를 선용하고 활력 있고 건강한 삶 유도

□ 사업개요

○ 위    치 : 대구광역시 북구 유통단지로 8길 56(산격동)

○ 사업기간 : 2009. 7월 ～ 2015. 8월

○ 사 업 비 : 145억원(부지매입비 55억원, 건축비 90억원)

○ 사업규모 : 부지면적 3,504㎡, 건축연면적 3,310㎡(지하 1층, 지상 3층)

○ 주요시설 : 경기장, 관람석(140석), 편의시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도
계	14,500	7,950	5,275	1,275
국 비	2,700	950	1,300	450
시 도 비	3,150	500	2,650	-
시군구비	8,650	6,500	1,325	825
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 부지 매입완료(2011년 10월)

○ 실시설계용역 및 공용건축물 협의 완료(2012년 8월)

○ 다목적스포츠센터 건립 변경계획 수립(2013년 5월)

○ 대구시 지방재정 투․융자심사 재심사 승인(2013년 10월)

○ 문화체육관광부, 다목적스포츠센터 건립 변경계획 승인(2013년 10월)

○ 건축공사(1차) 및 감리용역 계약 및 착공(2014년 1월)

○ 건축공사(1차) 준공 및 2․3차 건축공사 착공(2015년)

□ 향후계획

○ 총공사 준공(착공일로부터 560일 소요) (2015년 8월 예정)

○ 대불스포츠센터 운영 및 관리 민간위탁 추진(2015년 9월)

○ 대불스포츠센터 시범운영(2015년 10월～11월)

○ 대불스포츠센터 개관(2015년 12월 예정)

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원, ㎡)

구 분		당초계획 (2009.7.21)		변경계획 (2013.5.6)		비 고
사업기간		2009. 7 ~ 2012. 3		2009. 7 ~ 2014. 12
대지면적		3,210㎡ (4필지)		3,504㎡ (6필지→합병)		2필지 추가
건축면적		1,350㎡		1,780㎡
연 면 적		2,700㎡		3,310㎡
규 모		지하 1, 지상 2		지하 1, 지상 3
층별 개요	지하1층(㎡)	470	체력단련실 사무실/기계실	391	지하주차장 전기실/기계실
	지상1층(㎡)	1,350	실내경기장/본부석 편의시설/로비	1,115	제1경기장/사무실 편의시설/로비	댄스스포츠 탁구장(5)
	지상2층(㎡)	880	관람석(500명) 방송실	1,467	제2경기장 방송실/편의시설	농구장(1) 배드민턴(9)
	지상3층(㎡)			337	관람석(140명) 공조실
사업비	계	10,000		14,500		설계용역결과 반영
	부지매입비	5,000		5,500		구비
	공 사 비	4,600		8,530		국 : 시 : 구 →27 : 31.5 : 31.5
	설계,감리비등	400		470

※ 재원확보현황(건축비)

(단위 : 백만원)

구 분	총건축비	2012년까지	2013년	2014년		2015년	비고
				당초	추경
계	14,500	6,500	1,450	2,550	2,725	1,275
국 비	2,700	500	450	1,300	-	450
시 비	3,150	500	0	1,125	1,525	0
구 비	8,650	5,500	1,000	125	1,200	825

사업명

팔달동 청구장미아파트 남편 교량건설

담당자

건설과 정용국(☎665-2884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동주택, 학교시설 입지등 주변 여건 변화에 따른 교통량 증가로  학생통학

및 차량 통행 등 주민생활 불편 초래

○ 팔거천 횡단교량을 건설하여 주민생활불편을 해소하고 지역개발 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013. 9. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 북구 팔달동 청구장미아파트 남편~청구2001아파트 북편

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=150m(교량부 80m, 도로접속부 70m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,500백만원                                  (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	4,500	5	92	403	4,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,500	5	92	403	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2013.  6. : 특별교부세 500백만원 확보

○ 2014.  8. : 실시설계용역 완료

○ 2014. 11. : 실시계획고시 및 보상열람공고

□ 향후계획

○ 2015.  2. : 보상협의

○ 2015.  6. : 지장물철거

○ 2016. 12. : 공사완료(사업완료를 위해 잔여사업비 일괄확보 필요)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경                                             (단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계	3,500	4,500
교량건설	3,073	3,990	도로승고 앵커구조물, 교량가시설 추가등(증917)
토지보상	313	400	‘14년 공시지가적용(증87)
실시설계	104	100
부 대 비	10	10

사업명

복현동 우성하이츠～성보학교간 도로건설

담당자

건설과 김이석(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동구와 연결된 도로로 동구 구간은 도로개설이 되어 있으나 우리 구 구간의 미개설로 인한 도로단절로 주민통행불편이 있어 이를 해소

□ 사업개요

○ 기 간 :  2014. 1. ~ 2016. 12.

○ 위 치 : 북구 복현2동주민센터 ~ 성보학교간

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=630m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14년도	‘15년도	‘16년도 이후
계	2,400	-	44	156	2,200
국 비
시 도 비
시군구비	2,400	-	44	156	2,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2013. 12. : 특별교부금 200백만원 확보

○ 2014.  8. : 실시계획고시

○ 2014. 10. : 보상열람공고

○ 2014. 12. : 보상협의

□ 향후계획

○ 2015.  7. : 지장물철거

○ 2016. 12. : 공사완료(사업완료를 위해 잔여사업비 일괄확보 필요)

11-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
산격1동 청사신축	3,580	600	0	0	1,980	1,000	600	49
북구청사 리모델링	15,270	10,000	698	260	1,498	2,814	10,000	19

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

산격1동 청사 신축

담당자

재무과 최지영(☎665-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건립한 지 30여년이 경과한 건물로써 천정 누수 등 노후화로 이용주민의 불편 초래

○ 지역주민의 오랜 숙원사업을 해결하여 주민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 12. ~ 2015. 09.

○ 위 치 : 북구 연암로36길 6 (산격동)

○ 규 모 : 지상3층(연면적 938.8㎡, 대지면적 1,231㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,580	1,400	655	1,525
지 방 채	600		600
국 비
시 도 비
시군구비	1,980	1,400		580
기타(특교세)	1,000		55	945

※ 집행액 : 지방채발행액 포함,  향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

○  ’10. 12. ~ ’14. 03. : 신축계획 수립, 부지매입

○  ’14. 04. ~ ’14. 12. : 기본 및 실시설계

○  ’15. 02. : 가시설(흙막이) 및 토목공사

○  ’15. 03. : 기초 및 1층 골조공사

○  ’15. 04. : 2층 골조공사

○  ’15. 05. : 3층 골조공사

○  ’15. 06. : 지붕층 골조공사

□ 향후계획

○  ’15. 07. ~  ’15. 09. : 마감공사 및 부대토목(조경)공사

○  ’15. 09. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

북구청사 리모델링사업

담당자

재무과 최지영(☎665-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설의 노후화로 긴급한 보수보강 필요, 건물의 안전성 확보 시급

○ 사무공간 부족 및 장애인 편의시설 등 법정시설 미설치로 불편초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 09. ~ 2016. 07.

○ 위 치 : 북구 옥산로 65 (침산동)

○ 규 모 : 연면적 12,657㎡(지하1층/지상5층, 리모델링11,257㎡/증축1,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,270백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	15,270		707	12,940
지 방 채	10,000			8,377	1,623
국 비	698			698
시 도 비	260			260
시군구비	1,498		707	791
기 타	2,814			2,814

※ 집행액 : 지방채발행액 포함,  향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)

○ ‘13. 10.  7 : 리모델링 사업계획 시행

○ ‘14.  9. 16 : 건축공사 일상감사 및 계약심사

○ ‘14. 12. 23 : 건축공사 계약 (㈜태주종합건설)

※ 전기공사-㈜홍원전력(‘14.12.23), 기계설비공사-㈜도경이엔지(‘15.01.12),

소방공사-㈜흥신건설(’15.01.27), 정보통신공사(‘15.01.27)

○  ‘14. 12. 31 : 공사 착공

○  ‘15.  3. 10 : 임시가설청사 준공

□ 향후계획

○ ’15. 03. ~ ’15. 12. : 민원실 상부 증축공사

○ ’15. 12. ~ ’16.  6. : 본관동 리모델링공사

○ ’16. 07. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

11-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘14년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.