관음 제2공영주차장 조성 공사

	목 적
관음동 단독주택지의 주차난 해소를 위하여 공영주자창 조성 및 거주자우선주차제를 확대 시행함으로써 주차편의를 도모하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 관음동 184-13번지 외 11필지

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2015. 8월

❍ 사업내용 : 주차장 조성 A=1,447㎡, 주차면수 44면

❍ 사 업 비 : 2,530백만원(시․구비 각50%)

Ⅱ		추진상황

❍ 2012. 07. 25. : 관음 제2공영주차장 조성계획 수립

❍ 2012. 09. 21. : 관음 제2공영주차장 조성사업 일상감사

❍ 2012. 10. 30. : 관음 제2공영주차장 조성사업 투․융자심사

❍ 2013. 05. 13. ~ 12. 09. : 주차장 기본 및 실시설계 용역

❍ 2013. 12. 20. : 도시관리계획 결정 및 지형도면 작성 고시

❍ 2014. 01. 20. ~ 02. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 열람공고

❍ 2014. 02. 24. ~ 03. 11. : 보상계획 열람공고

❍ 2014. 05. 21. ~ 2015. 05. 08. : 손실보상 협의(1~3차)

❍ 2014. 11월 : 일상감사 및 계약심사

❍ 2015. 5월 ~ 2015. 8월 : 주차장 조성 공사

Ⅲ		향후 추진계획

❍ 2015. 8. 30. : 주차장 준공

Ⅳ		기대효과

❍ 단독주택지 및 재래시장 주변 주차난 해소

❍ 불법 주 ․ 정차 감소로 교통소통 원활

Ⅴ		관련사진

<위 치 도>

관음 제2

공영주차장

거주자우선주차제

확대 실시 구역

<항공사진>

관음 제2

공영주차장