산격1동 청사 신축

	목 적
건립한 지 30여년이 경과한 건물로써 천정 누수 등 노후화로 이용주민의 불편을 초래하여 지역주민의 오랜 숙원사업인 청사 신축을 통해 주민의 삶의 질을 향상하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 연암로36길 6 (산격동)

❍ 총사업비 : 3,580백만원

❍ 사업내용

-  지상3층(연면적 938.8㎡, 대지면적 1,231㎡)

❍ 사업기간  : 2010. 12. ~ 2015. 09.

Ⅱ		추진상황

❍  ’10. 12. ~ ’14. 03. : 신축계획 수립, 부지매입

❍  ’14. 04. ~ ’14. 12. : 기본 및 실시설계

❍  ’15. 02. : 가시설(흙막이) 및 토목공사

❍  ’15. 03. : 기초 및 1층 골조공사

❍  ’15. 04. : 2층 골조공사

❍  ’15. 05. : 3층 골조공사

❍  ’15. 06. : 지붕층 골조공사

Ⅲ		기대효과

❍ 청사에 대한 안정성 확보

❍ 동 방문 이용자들의 편의 제고와 미관개선효과 및 주민 삶의질 향상

Ⅳ		관련사진

※위치도 및 현장사진

※조감도