복현장미공원 공영주차장 조성사업

	목 적
복현1동 단독주택 및 다가구주택 지역의 주차난 해소를 위하여 주민들이 건의한 장미공원 지하에 공영주차장을 조성하여 주차환경을 개선하고자 함

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 복현동 439-1번지(복현장미공원)

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2017. 6월

❍ 사업내용 : 주차장 조성 A=1,657.9㎡(지하2층, 주차면수 97면)

❍ 사 업 비 : 4,000백만원

Ⅱ		추진상황

❍ 2014. 10. 06. : 장미공원 지하 공영주차장 조성계획 수립

❍ 2015. 04. 13. : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2015. 07. 02. : 사업변경계획 수립(지하1층→지하2층)

❍ 2015. 09. 15. : 도시계획위원회 심의

❍ 2015. 09. 30. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

❍ 2015. 10. 28. : 市 경관 심의

❍ 2015. 12. 14. ~ 2016. 05. 11. : 장애물 없는 생활환경 예비인증 심의

❍ 2016. 04. 15. : 주민설명회 개최

❍ 2016. 07. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

❍ 2016. 07. 13. ~ : 일상감사 및 계약심사

Ⅲ		향후 추진계획

❍ 2016. 8. ~ 2017. 6. : 공사 시행

Ⅳ		기대효과

❍ 복현1동 장미공원 부지를 활용(토지의 기능 제고와 합리적 이용 도모)하여 주택가의         주차공간을 확보하고, 친환경적이며 놀이‧편의시설을 확충한 공원으로 재조성

Ⅴ		관련사진

<위치도>

장미공원(A=1,657.9㎡)

<항공사진>