금호강(무태~검단동) 생태하천 조성사업

	목 적
금호강으로 유입되는 동화천 하류부(금호강 배수위 영향구간 포함) 구간에 친수생태하천을 조성하여 지역주민들에게 휴양공간 및 생태학습장을 제공하고자 함

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 동변동 일원(금호강~동화천)

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2017. 12월

❍ 사업내용 : 하천환경정비 1식, 낙차보 개선 4개소

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비50%, 시비30%, 구비20%)

Ⅱ		추진상황

❍ 2014. 12. : 2015년 국고보조사업 예산 확정 내시(환경부)

⇒ 총사업비 40억원(국비 20, 시비 12, 구비 8)

❍ 2015.  7. : 2015년 1회 추가경정예산 반영 32억원(국비20, 시비12)

❍ 2015. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수(완료예정일 2016. 8.)

❍ 2015. 12. : 2015년 2회 추가경정예산 반영 8억원(구비)

❍ 2016.  3. : 부산지방국토관리청과 금호강 내 생태하천사업 가능 협의

=> 금호강은 정비가 완료된 하천으로 추가 공사 및 시설물 설치 불가하여   동화천으로 하천정비 추진

❍ 2016.  5. : 실시설계 중간보고

❍ 2016.  6. : 지방환경청 기술검토 의뢰(구 → 지방환경청)

Ⅳ		기대효과

❍ 국가하천 하천구역 내부의 생태적 관리를 통한 녹색공간 및 주민쉼터 조성

Ⅴ		관련사진

동변교

동화교

하천환경정비

낙차보 개체

낙차보 개체

낙차보 개체