북구청사 리모델링 사업

	목 적
구의 상징이라 할 수 있는 청사 건물 시설의 노후화와 사무공간 부족 및 장애인 편의시설 등 법정시설 미설치로 많은 불편을 초래하여 긴급한 보수보강 및 건물의 안전성 확보가 시급하여 리모델링 사업을 하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 옥산로 65 (침산동)

❍ 총사업비 : 15,270백만원

❍ 사업내용

-  연면적 12,657㎡(지하1층/지상5층, 리모델링11,257㎡/증축1,400㎡)

❍ 사업기간  : 2012. 09. ~ 2016. 07.

Ⅱ		추진상황

❍ ‘13. 10.  7 : 리모델링 사업계획 시행

❍ ‘14.  9. 16 : 건축공사 일상감사 및 계약심사

❍ ‘14. 12. 23 : 건축공사 계약 (㈜태주종합건설)

※ 전기공사-㈜홍원전력(‘14.12.23), 기계설비공사-㈜도경이엔지(‘15.01.12),

소방공사-㈜흥신건설(’15.01.27), 정보통신공사(‘15.01.27)

❍  ‘14. 12. 31 : 공사 착공

❍  ‘15.  3. 10 : 임시가설청사 준공

❍  ‘15.  3. ~ ’15. 12. : 민원실 상부 증축공사

❍  ‘15. 12. ~ ’16.  6. : 본관동 리모델링 공사

Ⅲ		향후계획

❍  ‘16.  7. ~ ’16.  8. : 임시청사 철거 및 별관주차장 포장공사

❍  ‘16.  7. ~ ’16. 10. : 민방위 교육장 및 동편별관 리모델링 공사

❍  ‘16.  9. ~ ’16. 10. : 본관동 주차장 공사 및 공사 준공

Ⅳ		기대효과

❍ 건물의 안정성 확보

❍ 사무공간 확장을 통한 직원 능률 향상과 각종 편의시설 설치를 통한        주민편의 제고

Ⅳ		관련사진

현 청 사 (전)	조 감 도 (후)