109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
북구청사 리모델링	15,371	13,647	1,724	-	2016	2013	100
산격로․대학로 주변 보행 환경 개선사업	11,500	5,719	5,056	725	2017	2012	85
복현동 장미공원 지하주차장 조성사업	4,200	34	441	3,725	2017	2014	70
금호강(무태~검단동) 생태하천 복원사업	4,000	4,000	-	-	2017	2015	10
도시철도 동호동 차량기지 인근 교통 불편 해소사업	2,100	630	670	800	2017	2016	60
연암서당골 여행(餘幸)	6,182	214	812	5,156	2018	2014	32
운암지 주변 주차장 조성	2,500	-	1,611	889	2017	2015	70
라스타트 칠성 별별상상여행	6,000	-	36	5,964	2019	2015	5
칠성종합시장 고객문화센터 조성	4,000	-	15	3,985	2018	2015	80
구암동고분군 일원 관광테마파크 조성	2,000	-	-	2,000	2017	2016	20

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2016년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

북구청사 리모델링 사업

담당자

재무과 박상수(☎665-4473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설 노후화로 긴급한 보수보강 필요, 건물 안정성 확보 시급

○ 사무공간 부족 및 장애인 편의시설 등 법정시설 미설치로 불편 초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 9 ~ 2016. 10

○ 위 치 : 대구광역시 북구 옥산로 65(침산동)

○ 규 모 : 연면적 12,657㎡(지하1/지상5, 리모델링 11,257㎡ / 증축1,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,371백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,371	13,647	1,724	0	0
국 비	698	698	0
시 도 비	260	260	0
시군구비	1,498	1,498
지 방 채	8,640	8,377	263
특별교부세	600	600	0
특별교부금	3,600	2,139	1,461
기타(기금)	75	75	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.10. 7 : 리모델링사업 시행계획

○ 2014.12.23 : 건축공사 계약 [(주)태주종합건설]

○ 2014.12.31 : 착공

○ 2016.10.10 : 준공

□ 향후계획

○ 수시․정기 하자검사 및 관리

□ 사업변경 내역

○ 광장 수목 및 부대시설 정비 등으로 101백만원 추가 소요

사업명

산격로∙대학로 주변 보행환경 개선사업

담당자

교통과 김성훈(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산격로∙대학로 주변 도로의 보행환경과 주차환경을 전면적으로 개선하여 젊고 활기 넘치는 정주 공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 10. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 산격로∙대학로 일원

○ 규 모 : 보행환경 개선(L=5.2km) 및 공영주차장 조성(2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	11,500	5,719	5,056	725	0
국 비	2,800	1,469	1,331	0	-
시 도 비	5,734	2,860	2,512	362	-
시군구비	2,966	1,390	1,213	363	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 산격로∙체육관로 보행환경 개선사업 및 대학로 주변 보행환경 개선사업 준공

○ 산격3동 무지개공영주차장 건립사업 준공

○ 산격4동 공영주차장 조성사업 공사 중

□ 향후계획

○ 산격4동 공영주차장 조성사업 준공(2017. 12월)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2012. 10. ~ 2017. 6. (변경) 2012. 10. ~ 2017. 12.

사업명

복현동 장미공원 지하주차장 조성사업

담당자

교통과 김성훈(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복현동 단독주택 밀집지역 주차난 해소를 위하여 공영주차장을 조성하여  주차편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 복현동 439-1번지

○ 규 모 : 주차장 조성 A=1,447㎡(주차면수 44면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,200	34	441	3,725	0
국 비	1,500	17	441	1,042	-
시 도 비	1,350	9	0	1,341	-
시군구비	1,350	8	0	1,342	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 실시설계 : 2015. 4. 13. ~ 2016. 10. 11.

○ 공사시행 : 2016. 11. 21. ~ 2017. 9. 17.

□ 향후계획

○ 복현장미공원 공영주차장 건립공사 준공(2017. 9월)

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2015. 1. ~ 2016. 12.  (변경) 2015. 1. ~ 2017. 9.

(당초) 사업비 : 4,000백만원 (변경) 사업비 : 4,200백만원

사업명

금호강(무태~검단동)생태하천 복원사업

담당자

건설과 박경미(☎665-2612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강으로 유입되는 동화천 하류부(금호강 배수위 영향구간 포함)구간에       친수생태하천을 조성하여 지역주민들에게 휴양공간 및 생태학습장을 제공하고       생태적 관리를 통한 녹색공간 창출을 목적으로 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 북구 동·서변동 일원

○ 규 모 : 하천환경정비 0.2km, 자연형여울 3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,000	4,000	-	-	-
국 비	2,000	2,000	-	-	-
시 도 비	1,200	1,200	-	-	-
시군구비	800	800	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사시행, 10%)

○ 2014. 12. : 2015년 국고보조사업 예산 확정 내시(환경부)

→ 총사업비 40억원(국비20, 시비12, 구비8)

○ 2015.  7. : 2015년 1회 추가경정예산 반영 32억원(국비20, 시비12)

○ 2015. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2015. 12. : 2015년 2회 추가경정예산 반영 8억원(구비)

○ 2016. 11. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2016. 12. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2017. 12. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 낙차보개서 4개소 → 자연형여울 3개소(하천기본계획에 따른 변경)

사업명

도시철도 동호동 차량기지 인근

교통불편 해소사업

담당자

건설과 서정현(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 마을과 연결되는 도로망이 구안국도와 호국로에 치우쳐 있어 주민

통행이 불편하고 도시철도 3호선 건설에 따른 동호마을 주민의 도시철도

3호선 이용편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015. 01. ∼ 2017. 12.

○ 위 치 : 북구 동호동 동호마을∼차량기지 간

○ 규 모 : 도로건설 B=8~10m, L=361m(1구간 199m, 2구간 162m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,100	630	670	800
국 비
시 도 비
시군구비	2,100	630	670	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60%)

○ 2014. 12. 30. : 특별교부금 교부(500백만원)

○ 2015.  1. 29. ∼ 3. 29. : 실시설계용역

○ 2015.  3. 24. : 특별교부금 교부(800백만원)

○ 2015.  4. 30. ∼ 6. 22. : 실시계획열람공고 및 실시계획고시

○ 2016.  1. 20. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

○ 2016.  5. 25. : 區 지방재정투자심사

○ 2016. 10. 26. : 1구간 공사착공(B=10m, L=199m)

○ 2016. 12. 21. : 특별교부금 교부(800백만원)

□ 향후계획

○ ´17. 4.  7. : 2구간 공사착공

○ ´17. 4. 21. : 1구간 공사준공

○ ´17. 10. 3. : 2구간 공사준공(예정, L=162m)

사업명

연암서당골 여행(餘幸)

담당자

도시재생과 김정진(☎665-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 이전에 따른 도심 공동화 현상을 방지하고 지역 활력 증대를 도모 하여, 여유와 정이 넘치는 건강한 도시 문화마을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

○ 위 치 : 산격1,4동 일원(연암공원로 주변) ※ 붙임 사업위치도 참조

○ 규모/내용 : 사업면적:0.3㎢, 둘레길이:3.2㎞ / 연암갤러리 사업 외 9건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,182백만원(국비3,091 시비1,545.5 구비1,545.5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,182	214	812	2,540	2,616
국 비	3,091	107	406	1,270	1,308
시 도 비	1,545.5	53.5	203	635	654
시군구비	1,545.5	53.5	203	635	654
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31.8%)

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2015. 11. 27.

○ 연암 인문마당 조성공사 착공 및 완료 : 2015. 12 ~ 2016. 9.

○ 제일 경로당 외 1개소 리모델링 착공 및 완료 : 2016. 2 ~ 2016. 6.

○ 마을안길 가꾸기 조성공사 : 2016. 5 ~ 2016. 7.

○ 마을텃밭 조성공사 : 2016. 5. ~2016. 6.

○ 연암체험마을 조성공사 : 2016. 8 ~ 2017. 2.

○ 제비수다방 조성공사 : 2016. 11 ~ 2017. 5.

○ 보안등 설치공사 : 2016. 12 ~ 2017. 1.

○ 쌈지쉼터 조성공사 : 2016. 12. ~ 2017. 4.

○ 생활안전 CCTV 설치공사 : 2017. 3 ~ 2017. 5.

○ 구암서원 앞 볼라드 설치공사 : 2017. 6.

○ 연암마을목공소 리모델링 공사 : 2017. 7. ~ 진행중

□ 향후계획

○ 연암길 갤러리 조성, 연암마을 안길 가꾸기, 공용주차장 조성, 구암서원 진입로 조성 및 주민역량강화 프로그램운영(공방 등 협동기업)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 : 6,000백만원 / 변경 : 6,182백만원

○ 변경내용 : 연암갤러리 사업 외 9건의 단위사업 내 세부내역 조정(※붙임 변경내역 참조)

사업명

운암지 주변 주차장 조성공사

담당자

도시행정과 이백우(☎665-2814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역에 공영주차장을 조성하여 지역 주민들의 생활불편을 해소하고 함지산 및 운암지 수변공원 방문객에게 주차편의를 제공하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 북구 구암동 415-2번지 일원

○ 규 모 : 공영주차장 A=6,599㎡(약 140면), 진입도로 B=6m, L=110m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,500	-	1,611	889	-
국 비	2,250	-	1,450	800	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	250	-	161	89	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2016. 8.  1. : 도시관리계획(시설 : 주차장) 결정 및 지형도면 고시

○ 2017. 1. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

○ 2017. 7. 10. : 보상완료

□ 향후계획

○ 2017년 12월 : 공영주차장 조성공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 : (당초) 2,500백만원 (변경) 3,008백만원

사업명

라스타트 칠성 별별 상상여행

담당자

도시재생과 김정진(☎665-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구 도심과 단절된 경부고속철로변의 환경개선과 주민역량강화를 통해 참신하고 재미있는 도시길을 만들어 특색 있는 마을 만들기 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년(4년간)

○ 위 치 : 칠성동 일원(경부고속철도 도심구간 주변)

○ 규모/내용 : 사업면적0.33㎢ 길이1.9㎞ / 칠성테마거리 조성 외 9건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원(국비3,000 시비1,500 구비1,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	6,000	-	36	1,728	4,236
국 비	3,000	-	18	864	2,118
시 도 비	1,500	-	9	432	1,059
시군구비	1,500	-	9	432	1,059
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4.8%)

○ 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2016. 5. 24.

○ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2017. 5. 16.

□ 향후계획

○ 역후공원 복합화 공사(칠성산업문화관 조성, 옥외전시공단 조성), 별별수다방 조성(경로당 2개소 리모델링), 월남촌 리모델링(공동화장실 등), 칠성테마거리 조성, 칠성커뮤니티센터 조성, 주민역량 강화사업 등

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

칠성종합시장 고객문화센터 조성

담당자

도시재생과 김연창 (☎665-2657)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠성종합시장 내 상인과 고객 간 소통과 상인회 자생을 위한 복합문화공간 뿐 아니라, 대규모 상권의 종합적 통제를 위한 컨트롤 타워 역할을 수행할 거점공간 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. 1.∼2018.12. (‘16년도 전통시장 시설현대화사업)

○ 위    치 : 대구광역시 북구 칠성동1가 150-2 (백악관 건물)

○ 규    모 : 건물 1, 2층 임차 후 리모델링(A=2,877.18㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원 (국비 2,400, 시비 1,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,000	0	15	3,200	785
국 비	2,400	0	9	1,920	471
시 도 비	1,600	0	6	1,280	314
시군구비	0	0	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

○ 집행내역 : 감정평가수수료(15백만원), 전세금(3,200백만원)

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2016. 3.∼12.       건물임대차 계약 관련 협의 (10차례)

○ 2016. 9.∼2017. 3.   시설배치 용역 (대구전통시장진흥재단)

○ 2016.11.14.∼12.12.  감정평가 실시 (중앙감정평가법인 외 1개소)

○ 2017. 1.13.         임대차 계약 체결

○ 2017. 1.19.         전세권설정 등기 완료

○ 2017. 3. 8.         시설배치 용역 최종보고회

○ 2017. 3.18.         우수사례 견학 (완주로컬푸드직매장 외 5개소)

□ 향후계획

○ 2017. 7.∼ 8.       1층 마켓 입주업체 모집 및 계약

○ 2017. 9.∼11.       실시설계

○ 2017.12.∼2018. 3.   착공 및 준공

사업명

구암동고분군 관광테마파크 조성

(누리길 조성)

담당자

관광자원개발과 이원익

(☎665-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유산적 가치가 뛰어난 구암동 고분군 일원 누리길 사업을 통해 국가

사적 지정을 위한 1단계 사업을 실시코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8 ~ 2017. 12

○ 위 치 : 대구 북구 구암동 함지산 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000			2,000
국 비	1,000			1,000
시 도 비	500			500
시군구비	500			500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 용역 : 2016. 11 ~ 2017. 2

○ 市 계약심사 : 2017. 4 ~ 현재

□ 향후계획

○ 입찰 및 업체 선정 : 2017. 8월

○ 공사 착공 및 준공 : 2017. 8. ~ 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘16년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
북구청사 리모델링	15,371	8,640	698	260	1,498	4,275	10,000	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2016년에 추진한 사업

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

북구청사 리모델링사업

담당자

재무과 박상수(☎665-4473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시설 노후화로 긴급한 보수보강 필요, 건물 안정성 확보 시급

○ 사무공간 부족 및 장애인 편의시설 등 법정시설 미설치로 불편 초래

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 9 ~ 2016. 10

○ 위 치 : 대구광역시 북구 옥산로 65(침산동)

○ 규 모 : 연면적 12,657㎡(지하1/지상5, 리모델링 11,257㎡ / 증축1,400㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,371백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	15,371	13,647	1,724	0	0
국 비	698	698	0
시 도 비	260	260	0
시군구비	1,498	1,498
지 방 채	8,640	8,377	263
특별교부세	600	600	0
특별교부금	3,600	2,139	1,461
기타(기금)	75	75	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013.10. 7 : 리모델링사업 시행계획

○ 2014.12.23 : 건축공사 계약 [(주)태주종합건설]

○ 2014.12.31 : 착공

○ 2016.10.10 : 준공

□ 향후계획

○ 수시․정기 하자검사 및 관리

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 광장 수목 및 부대시설 정비 등으로 101백만원 추가 소요

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.