산격4동 공영주차장 조성 사업

	목 적
「대학주변 보행환경 개선사업」의 일환이며 산격4동 주택가의 주차난 해소를 위하여 공영주차장을 조성, 주차환경을 개선하고자 함

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 산격로19길 6 외 15필지

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2017. 12월

❍ 사업내용 : 주차장 조성 A=1,804.3㎡, 주차면수 63면

❍ 사 업 비 : 4,380백만원(국비 9%, 시비 50%, 구비 41%)

Ⅱ		추진상황

❍ 2015. 03. 30. ~ 09. 25. : 실시설계 용역

❍ 2015. 09. 15. : 도시계획위원회 심의(원안가결)

❍ 2015. 11. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

❍ 2015. 11. 17. / 11. 24. : 1, 2차 주민설명회

❍ 2015. 12. 31. : 보상결정 및 협의 시작

❍ 2016. 09. 26. : 지방토지수용위원회 수용재결

❍ 2016. 10. 27. : 중앙토지수용위원회 이의신청서 전달(3건)

❍ 2017. 03. 16. : 보상금 재감정 실시

❍ 2017. 07. 11. : 공사 착공

Ⅲ		향후 추진계획

❍ 2017. 12. 07. : 공사 준공

Ⅳ		기대효과

❍ 단독주택 및 상가지역 주변 주차난 해소

❍ 불법 주 ․ 정차 감소로 교통소통 원활

Ⅴ		관련사진

<위 치 도>

산격4동

공영주차장

<항공사진>

산격4동

공영주차장