운암지 주변 주차장 조성 사업

	목 적
운암지 주변에 공영주차장을 조성하여 지역 주민들의 생활불편을 해소하고 함지산 및 운암지 수변공원 방문객에게 주차편의를 제공하기 위함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 구암동 415-2번지 일원(운암지 수변공원 주변)

❍ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2017. 12월

❍ 사업내용 : 공영주차장 조성 A=6,599㎡, 주차면수 140면 내외

❍ 사 업 비 : 3,008백만원(국비 75%, 시비 - %, 구비 25%)

Ⅱ		추진상황

❍ 2015. 03. 17. : 2016년 개발제한구역 주민지원사업계획서 제출

❍ 2015. 10. 01. : 사업대상지 선정(국토교통부)

❍ 2016. 04. 26. : 도시관리계획(안) 열람공고 및 관계부서 협의

❍ 2016. 07. 05. : 주민설명회 개최

❍ 2016. 08. 01. : 도시관리계획(주차장) 결정 및 지형도면 고시

❍ 2016. 09. 20. : 보상계획 열람 공고

❍ 2016. 12. 30. : 보상결정

❍ 2017. 01. 02. ~ 07. 18. : 토지 및 지장물 보상 시행

❍ 2017. 01. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 작성 고시

❍ 2017.  8월   : 주차장 조성공사 발주

Ⅲ		향후 추진계획

❍ 2017. 12월 : 주차장 조성공사 완료

Ⅳ		기대효과

❍ 운암지 인근 주거지역 주차난 해소 및 지역 주민 생활불편 완화

❍ 함지산 및 운암지 수변공원 방문객 주차편의 제공

Ⅴ		관련사진

<위 치 도>

주차장 조성

A=6,599㎡

도로 개설

B=6m, L=110m

<항공사진>