공원유원지 환경개선 사업

	목 적
구민 요구에 부응하는 체계적․계획적 공원 조성사업을 통해 도시 미관 증진 및 지속 가능한 도시발전을 추구하고, 쾌적하고 안전한 공원환경 조성으로 주민이 만족하는 녹색 휴식공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 기    간 : 2016. 1. 〜 2017. 5.

❍ 위    치 : 말산공원 외 14개소

❍ 사업내용 : 어린이공원 리모델링, 바닥교체, 시설물 정비 등

❍ 총사업비 : 1,749백만원(전액 시비)

Ⅱ		추진상황

❍현장조사 및 자료수집 : 2016. 1월

❍실시설계용역 : 2016. 1월 ～ 4월(금정공원)

❍앵무새공원 외 공원시설물 수리 완료 : 2016. 2. 29

❍생활권공원 시범사업 선정 : 2016. 3. 11(말산공원)

❍대천공원 외 6개소 어린이놀이터 바닥재 개체 완료 : 2016. 4. 7

❍공원조성계획 변경 고시 : 2016. 4. 11(해바라기공원 외 2개소)

❍칠곡운암역 앞 광장 정비사업 준공 : 2016. 5. 10

❍금정공원 정비공사 착공 : 2016. 6. 1

❍해바라기공원 정비공사 착공 : 2016. 6. 14

❍금정공원 정비공사 준공 : 2016. 8. 29

❍해바라기공원 정비공사 준공 : 2016. 9. 11

❍공원조성계획 변경 열람공고 : 2016. 9. 20 ∼ 10. 10(말산공원)

❍공원조성계획 변경 고시 : 2016. 10. 31(말산공원)

❍말산공원 재조성사업 착공 : 2017. 2. 16

❍말산공원 재조성사업 준공 : 2017. 5. 26

Ⅲ		기대효과

❍ 노후공원 재조성을 통한 이용 효율 제고 및 경관개선

❍ 단조로운 평면적‧획일적 조성패턴을 벗어나 권역별 테마공원 조성

❍ 구민 요구에 부응한 공원정비 사업 시행으로 행정 신뢰도 증대

❍ 안전하고 보다 쾌적한 공원시설 정비로 공원 환경개선

Ⅴ		관련사진

< 현장사진 >

<말산공원 착공 전>

<말산공원 준공 후>

< 현장사진 >

<금정공원 착공 전>

<금정공원 준공 후>

< 현장사진 >

<해바라기공원 착공 전>

<해바라기공원 준공 후>