연암 서당골 餘․幸 사업

	목 적
도청 이전에 따른 도심 공동화 현상을 방지하고 지역 활력증대를 도모 하고, 여유와 정이 넘치는 건강한 도시 문화마을 조성 하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 산격1·4동 일원(사업면적0.3㎢, 둘레길이3.2㎞)

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

❍ 사업내용

- 연암 길 갤러리 사업(B=10m, L=950m), 연암마을 안길 가꾸기 사업(L=795m)

- 공용주차장(1,208㎡), 쌈지쉼터(104㎡), 연암 인문마당 조성(516㎡),

- 연암체험마당 조성(1,812㎡), 구암서원 진입로 가꾸기(2,500㎡)

- 연암 교류센터 조성, 제비 수다방(3개소), 주민역량강화 프로그램 사업 등

❍ 총사업비 : 61.82억원(국비 30.91억원, 시비 15.455억원, 구비 15.455억원)

※ 2016년 사업비 : 1,924백만원(국비 962백만원, 시비 481백만원, 구비 481백만원)

Ⅱ		추진상황

❍ 기본 및 실시설계용역 입찰공고 : 2015. 3. 27. ∼ 4. 3.(7일간)

❍ 기본 및 실시설계용역 착수 : 2015. 4. 24.

❍ 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 개최 : 2015. 5. 26.

❍ 연암 서당골 여·행 주민 설명회 개최(1차) : 2015. 6. 25.

❍ 연암 서당골 여·행 주민 반상회 개최 : 2015. 7. 29.

❍ 연암 서당골 여·행 주민 설명회 개최(2차) : 2015. 8. 25.

❍ 연암 서당골 여·행 중간 보고회 개최 : 2015. 9. 23.

❍ 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2015. 11. 28.

❍ 연암 인문마당 조성공사 착공 및 완료 : 2015. 12 ~ 2016. 9.

❍ 제일 경로당 외 1개소 리모델링 착공 및 완료 : 2016. 2 ~ 2016. 6.

❍ 마을안길 가꾸기 조성 : 2016. 5 ~ 2016. 7.

❍ 마을텃밭 조성공사 : 2016. 5. ~2016. 6.

❍ 연암체험마을 조성공사 : 2016. 8 ~ 2017. 2.

❍ 제비수다방 조성공사 : 2016. 11 ~ 2017. 5.

❍ 보안등 설치공사 : 2016. 12 ~ 2017. 1.

❍ 쌈지쉼터 조성공사 : 2016. 12. ~ 2017. 4.

❍ 생활안전 CCTV 설치공사 : 2017. 3 ~ 2017. 5.

❍ 구암서원 앞 볼라드 설치공사 : 2017. 6.

❍ 연암마을목공소 리모델링 공사 : 2017. 7. ~ 진행 중

Ⅲ		사업변경 신청 및 승인

❍ 사업변경계획 변경신청 및 승인 : 신청2017. 3. 3.  승인2017. 3. 7.

❍ 총사업비 : 당초 : 6,000백만원 / 변경 : 6,182백만원

❍ 변경내용 : 연암 길 갤러리 사업 외 9건의 단위사업 내 세부내역 조정

Ⅳ		향후 추진계획

❍ 연암마을 안길 가꾸기 : 2017. 10월중

❍ 공용주차장 조성 : 2017. 10 ~ 11월중

❍ 구암서원 진입로 조성 : 2018년

❍ 연암길 갤러리 사업 : 2018년

❍ 주민역량 강화사업 등 프로그램 사업 운영 : 사업기간 중 지속운영

Ⅴ		기대효과

❍ 도심 공동화 해소와 주거환경개선 등으로 도시활력 증진

❍ 주민참여사업 수행으로 소통·교류 확대와 주민역량강화

❍ 추진사업이 마중물 역할을 하여 지속적인 지역발전 유도

Ⅵ		관련사진

연암 서당골 餘․幸 사업 위치도 및 주요 사업내용