109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
기능복합형 북구청소년 문화의 집 건립	8,224	-	-	8,224	2020	2017	9
금호강(무태~검단동) 생태하천 복원사업	4,000	172	3,828	-	2017	2015	100
도시철도 동호동 차량기지 인근 교통불편 해소사업	2,100	1,300	800	-	2017	2016	100
산격로․대학로 주변 보행 환경 개선사업	11,500	10,774	726	-	2017	2012	100
복현동 장미공원 지하주차장 조성사업	4,200	475	3,725	-	2017	2014	100
칠곡3지구 문화 예술거리 조성사업	3,000	-	-	3,000	2019	2017	10
옥산로 테마거리 조성	3,700	-	-	3,700	2021	2017	5
보훈회관 및 노인 종합복지관 건립	5,065	-	74	149	2019	2016	65
2017 금호강 바람소리길 축제	1,085	515	280	290	계속	2017	100
연암 서당골 여행(餘幸)	6,182	1,026	2,540	2,616	2018	2014	72
라스타트 칠성 별별상상여행	6,128	204	1,560	1,136	2019	2015	30
칠성종합시장 고객문화센터 조성	4000	15	3,240	745	2018	2015	90
운암지 주변 주차장 조성공사	3,008	125	2,014	869	2018	2015	85
옻골문화공원 조성사업	5,000	-	1,650	3,350	2019	2017	33

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

기능복합형 북구청소년문화의 집 건립

담당자

평생교육과 김수정(☎665-2185)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 읍내동 주민센터를 청소년 문화의 집과 기능복합형 청사로 신축하여       양질의 대주민 서비스를 제공하고, 청소년 활동의 적극적인 진흥과 건전한       육성 등 다양한 행정수요에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3. ~ 2020. 7.

○ 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561(現읍내동주민센터청사 철거 후 신축)

○ 규 모 : 부지 1,666㎡, 연면적 2,982㎡(지하1층, 지상5층)

➥ 청소년 문화의 집 : 2,099㎡,  주민센터 등 : 883㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,224백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,224		500	2,750	4,974
국 비	5,064			1,500	3,564
시 도 비
시군구비	2,160		500	1,250	410
지 방 채	1,000				1,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

○ 설계용역 : 기본설계 단계

□ 향후계획

○ 2018. 6. ~ 2018. 10.  : BF(장애물 없는 생활환경) 인증 등

○ 2019. 1. ~ 2019. 2. : 2차 문화재 시굴조사

○ 2019. 3. : 설계용역 완료 예정

○ 2019. 4. : 공사 입찰 및 착공

○ 2020. 7. : 공사 준공 ※ 공사기간 : 16개월 정도

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

금호강(무태~검단동)생태하천 복원사업

담당자

건설과 박경미(☎665-2612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강으로 유입되는 동화천 하류부(금호강 배수위 영향구간 포함)구간에 친수생태하천을 조성하여 지역주민들에게 휴양공간 및 생태학습장을 제공하고 생태적 관리를 통한 녹색공간 창출을 목적으로 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2017년

○ 위 치 : 북구 동·서변동 일원

○ 규 모 : 하천환경정비 0.2km, 자연형여울 3개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	172	3,828
국 비	2,000	94	1,906	“해 당	없 음”
시 도 비	1,200	56	1,144
시군구비	800	22	778
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료, 100%)

○ 2014. 12. : 2015년 국고보조사업 예산 확정 내시(환경부)

→총사업비 40억원(국비20, 시비12, 구비8)

○ 2015.  7. : 2015년 1회 추가경정예산 반영 32억원(국비20, 시비12)

○ 2015. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2015. 12. : 2015년 2회 추가경정예산 반영 8억원(구비)

○ 2016. 11. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2016. 12. : 공사착공

○ 2017. 11. : 공사준공

사업명

도시철도 동호동 차량기지 인근

교통불편 해소사업

담당자

건설과 서정현(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현재 마을과 연결되는 도로망이 구안국도와 호국로에 치우쳐 있어 주민

통행이 불편하고 도시철도 3호선 건설에 따른 동호마을 주민의 도시철도

3호선 이용편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015. 01. ∼ 2017. 10.

○ 위 치 : 북구 동호동 동호마을∼차량기지간

○ 규 모 : 도로건설 B=8~10m, L=361m(1구간 199m, 2구간 162m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2018년 이후
계	2,100	1,300	800
국 비
시 도 비
시군구비	2,100	1,300	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  공사완료, 100%)

○ 2014. 12. 30. : 특별교부금 교부(500백만원)

○ 2015.  1. 29. ∼ 3. 29. : 실시설계용역

○ 2015.  3. 24. : 특별교부금 교부(800백만원)

○ 2015.  4. 30. ∼ 6. 22. : 실시계획열람공고 및 실시계획고시

○ 2016.  1. 20. : 도시관리계획 결정(변경) 고시

○ 2016.  5. 25. : 區 지방재정투자심사

○ 2016. 10. 26. : 1구간 공사착공(B=10m, L=199m)

○ 2016. 12. 21. : 특별교부금 교부(800백만원)

○ ´17. 4.  7. : 2구간 공사착공

○ ´17. 4. 21. : 1구간 공사준공

○ ´17. 10. 3. : 2구간 공사준공(L=162m)

사업명

산격로∙대학로 주변 보행환경 개선사업

담당자

교통과 김성훈(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산격로∙대학로 주변 도로의 보행환경과 주차환경을 전면적으로 개선하여 젊고 활기 넘치는 정주 공간을 조성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 10. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 산격로∙대학로 일원

○ 규 모 : 보행환경 개선(L=5.2km) 및 공영주차장 조성(2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	11,500	10,774	726
국 비	2,800	2,800	0
시 도 비	5,750	5,387	363
시군구비	2,950	2,587	363
지 방 채	0	0	0
민간자본	0	0	0
기 타	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 산격로∙체육관로 보행환경 개선사업 및 대학로 주변 보행환경 개선사업 준공

○ 산격3동 무지개공영주차장 건립사업 준공

○ 산격4동 공영주차장 조성사업 준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2012. 10. ~ 2017. 6. (변경) 2012. 10. ~ 2017. 12.

사업명

복현동 장미공원 지하주차장 조성사업

담당자

교통과 김성훈(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복현동 단독주택 밀집지역 주차난 해소를 위하여 공영주차장을 조성하여  주차편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 복현동 439-1번지

○ 규 모 : 주차장 조성 A=1,447㎡(주차면수 44면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,200	475	3,725	0	0
국 비	1,500	439	1,061	0	-
시 도 비	1,350	18	1,332	0	-
시군구비	1,350	18	1,332	0	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 : 2015. 4. 13. ~ 2016. 10. 11.

○ 공사시행 : 2016. 11. 21. ~ 2017. 9. 17. (준공)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : (당초) 2015. 1. ~ 2016. 12.  (변경) 2015. 1. ~ 2017. 9.

(당초) 사업비 : 4,000백만원 (변경) 사업비 : 4,200백만원

사업명

칠곡3지구 문화예술거리 조성사업

담당자

관광자원개발과

이원익(☎665-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로

조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여

○ 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용

도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

○ 대구광역시 최초, 전국 24번째 주민주도 경관협정 거리조성 추진 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로

○ 규 모 : B=12m, L=720m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000			3,000
국 비	1,000			1,000
시 도 비	1,000			1,000
시군구비	1,000			1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 : 2016. 11. ~ 2017. 1월

○ 문화예술거리 조성 주민설명회 개최 : 2017. 9. 12.

□ 향후계획

○ 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 4월 ~ 10월

○ 사업시행 : 2018. 11월 ~ 2019. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옥산로 테마거리 조성

담당자

관광자원개발과

이기진(☎665-2332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도3호선 및 삼성창조캠퍼스 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로 및 호암로 일대를 명품거리로 조성.

○ 근대산업역사, 미래산업비전, 문화예술 공연, 스포츠 등 지역을 대표하는 테마에 맞는 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화 함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년(예정)

○ 위 치 : 옥산로~호암로 (북구청네거리~삼성창조캠퍼스)

○ 규 모 : B=30m, L=1.3Km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,700			150	3,550
국 비
시 도 비	3,550				3,550
시군구비	150			150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 옥산로 테마거리 조성사업 계획 수립 : 2016. 8. 11.

○ 옥산로 테마거리 기본구상 연구용역 : 2017. 2. 10 ~ 2017. 7. 14.

□ 향후계획

○ 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 4월 ~ 11월

○ 단계별 사업시행 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

보훈회관 및 노인종합복지관 건립

담당자

주민행복과 류해담(☎665-2514)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보훈단체 사무실 환경이 열악하며 여러 곳에 분산되어 있어 업무의 효율성       제고를 위한 공간 제공 필요

○ (사)대한노인회 북구지회 기존건물의 노후화로 인해 어르신들이 활용할       공간이 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 7. ~ 2019. 10.

○ 위 치 : 북구 칠성남로 26길 27(칠성동2가)

○ 규 모 : 연면적 1,978.19㎡(지하1층, 지상5층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,065백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,065
국 비	500				500
시 도 비
시군구비	3,965		74	149	3,742
지 방 채
민간자본
기 타	600				600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65 %)

○ 2016. 7. : 보훈회관 및 노인종합복지관 건립 기본계획

○ 2017. 7. : 설계용역 착수

○ 2018. 6. ~ 7. : 공사 및 감리 계약

□ 향후계획

○ 2019. 10. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2017 금호강 바람소리길 축제

담당자

문화체육과 최정미(☎665-2174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들에게 문화향유 기회 제공과 금호강의 역사·문화·생태적 가치를 제고하는 축제의 장을 열고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9~10월

○ 위 치 : 금호강 산격대교 일원 ~ 노곡교

○ 규 모 : 참여인원 80,000명 정도 / 총사업비 : 280,000천원 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,375	515	280	290	290
국 비
시 도 비
시군구비	1,375	515	280	290	290
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 매년 추진계획에 의거 적정 추진완료

□ 향후계획

○ 2018년 금호강 바람소리길 축제 예정

- 기간/장소 : 2018. 10. 6.(토) ~ 10. 7.(일)/산격대교 일원

- 주최/주관 : (재)행복북구문화재단

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

연암서당골 여행(餘幸)

담당자

도시재생과 김정진(☎665-4432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 이전에 따른 도심 공동화 현상을 방지하고 지역 활력 증대를 도모하고, 여유와 정이 넘치는 건강한 도시 문화마을 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2018.(4년간)

○ 위 치 : 산격1,4동 일원(연암공원로 주변) ※ 붙임 사업위치도 참조

○ 규모/내용 : 사업면적:0.3㎢, 둘레길이:3.2㎞ / 연암갤러리 사업 외 9건

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 6,182백만원(국비3,091 시비1,545.5 구비1,545.5)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,182	1,026	2,540	2,616	-
국 비	3,091	513	1,270	1,308	-
시 도 비	1,545.5	256.5	635	654	-
시군구비	1,545.5	256.5	635	654	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71.8%)

○ 도활사업 국토부 공모신청 및 확정 : '15. 05. ~ 09.

○ 기본계획 수립(방침) : '15. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역 : '16. 7. ~ '16. 12.

○ 국토부 사업변경 신청 및 승인 : '17. 5.

○ 역후공원 옥외전시 공간 조성완료 : '17. 7. ~ '17. 10.

○ 월남촌 리모델링 공사완료 : '17. 8. ~ '17. 11.

○ 칠성1가 경로당 리모델링 공사완료 : '17. 11. ~ '18. 2.

○ 마을안심여건(보안등 55개소설치)개선 : '18. 2. ~ '18. 3.

○ 마을안심여건(생활안전 CCTV 32개소설치)개선 : '18. 2. ~ '18. 5.

○ 북성경로당 신축공사 기본 및 실시설계 용역 : '18. 2. ~ '18. 6.

○ 마을안심여건(생활안전 스토리지 구매․설치)개선 : '18. 4. ~ '18. 5.

○ 국토교통부 사업변경신청 및 승인 : '18. 5.

○ 칠성유래공원 재 조성공사 실시설계 용역 : '18. 3. ~ '18. 5.

○ 칠성테마 거리조성(꽃 거리조성)공사 설계 및 발주 : '18. 4. ~ '18. 6.

○ 마을커뮤니티센터(공방) 조성 부지매입 추진 : '18. 5. ~ '18. 10.

○ 주민역량강화사업 등 프로그램사업 추진 : '16. 5. ~ 현재까지 지속추진

□ 향후계획

○ 연암 길 갤러리 사업, 마을안길 벽화 조성사업, 공용주차장 조성, 구암서원 진입로정비, 마을커뮤니티센터 리모델링 및 주민역량강화 프로그램사업(협동조합 설립 및 운영)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 : 6,000백만원 / 변경 : 6,182백만원

○ 변경내용 : 단위사업 내 세부사업내역 및 예산조정

사업명

라스타트 칠성 별별 상상여행

담당자

도시재생과 박종윤(☎665-4434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구 도심과 단절된 경부고속철로변의 환경개선과 주민역량강화를 통해
참신하고 재미있는 도시길을 만들어 특색 있는 마을 만들기 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2019.(4년간)

○ 위 치 : 칠성동 일원(경부고속철도 도심구간 주변) ※ 붙임 사업위치도 참조

○ 규모/내용 : 사업면적0.33㎢ 길이1.9㎞ / 칠성테마거리 조성 외 9건

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 6,128백만원(국비3,064 시비1,532 구비1,532)

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,128	204	1,560	1,136	3,228
국 비	3,064	102	780	568	1614
시 도 비	1,532	51	390	284	807
시군구비	1,532	51	390	284	807
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 도활사업 국토부 공모신청 및 확정 : '15. 5. ~ 9.

○ 기본계획 수립(방침) : '15. 11.

○ 기본 및 실시설계 용역 : '16. 7. ~ '16. 12.

○ 국토부 사업변경 신청 및 승인 : '17. 5.

○ 역후공원 옥외전시 공간 조성완료 : '17. 7. ~ '17. 10.

○ 월남촌 리모델링 공사완료 : '17. 8. ~ '17. 11.

○ 칠성1가 경로당 리모델링 공사완료 : '17. 11. ~ '18. 2.

○ 마을안심여건(보안등 55개소설치)개선 : '18. 2. ~ '18. 3.

○ 마을안심여건(생활안전 CCTV 32개소설치)개선 : '18. 2. ~ '18. 5.

○ 북성경로당 신축공사 기본 및 실시설계 용역 : '18. 2. ~ '18. 6.

○ 마을안심여건(생활안전 스토리지 구매․설치)개선 : '18. 4. ~ '18. 5.

○ 국토교통부 사업변경신청 및 승인 : '18. 5.

○ 칠성유래공원 재 조성공사 실시설계 용역 : '18. 3. ~ '18. 5.

○ 칠성테마 거리조성(꽃 거리조성)공사 설계 및 발주 : '18. 4. ~ '18. 6.

○ 마을커뮤니티센터(공방) 조성 부지매입 추진 : '18. 5. ~ '18. 10.

○ 주민역량강화사업 등 프로그램사업 추진 : '16. 5. ~ 현재까지 지속추진

□ 향후계획

○ 칠성 산업문화관 조성(북구 보훈회관 통합신축), 경로당 1개소 신축, 칠성유래공원조성, 마을커뮤니티센터(공방)부지매입, 칠성 테마거리(근대문화산업거리)조성 및 주민역량 강화사업 등 프로그램사업 지속추진

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 : 6,000백만원 / 변경 : 6,128백만원

○ 변경내용 : 단위사업 내 세부사업내역 및 예산조정(※붙임 변경내역 참조)

사업명

칠성종합시장 고객문화센터 조성

담당자

도시재생과 김연창(☎665-2657)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서문시장과 더불어 대구 양대 거점시장인 칠성종합시장 내 상인과 고객간 소통과 상인회 자생을 위한 복합문화공간을 조성하여 시장 분위기 제고

○ 대규모 상권의 종합적 통제를 위한 컨트롤 타워 역할을 수행할 거점공간 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. 1.∼2018.12. (‘16년도 전통시장 시설현대화사업)

○ 위    치 : 대구광역시 북구 칠성동1가 150-2 (백악관 건물)

○ 규    모 : 건물 1, 2층 임차 후 리모델링(A=2,877.18㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원 (국비 2,400, 시비 1,600)(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	15	3,240	745	0
국 비	2,400	9	1,944	447	0
시 도 비	1,600	6	1,296	298	0
시군구비	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2016. 3. ~ 12.     : 건물임대차 계약 관련 협의 (10차례)

○ 2016. 9. ~ 2017. 3. :  시설배치 용역 (대구전통시장진흥재단)

○ 2016. 11. ~ 12.    : 감정평가 실시 (중앙감정평가법인 외 1개소)

○ 2017. 1. 13.      : 임대차 계약 체결

○ 2017. 1. 19.      : 전세권설정 등기 완료

○ 2017. 3.  8.      : 시설배치 용역 완료 (최종보고회)

○ 2017. 4. ~ 10.    : 상인연합회 협의 및 종합계획 수립

○ 2017. 9. ~ 2018. 2. : 1층부 입주업체 공개모집 (3차례)

○ 2017. 10. ~ 11.   : 2층부 리모델링 실시설계 용역

○ 2017. 12. ~ 2018. 6. :  2층부 리모델링 공사

○ 2018. 5. 3.       : 상인연합회와의 위수탁협약 체결

□ 향후계획

○ 2018. 7. ~ 9.    : 1층부 공동판매장 리모델링, 사업변경 승인

○ 2018. 10.        :  2층부 환경개선 및 집기비품 구입

○ 2018. 11.        :  1, 2층 동시개장 (준공식)

□ 사업변경 내역

○ 변경사업비 : 77,488천원 (2017년도 미이월 집행잔액 활용)

○ 사업내용 : 복합커뮤니티센터 2층부 환경개선 및 집기비품 구입

사업명

운암지 주변 주차장 조성공사

담당자

도시행정과 이백우(☎665-2814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역에 공영주차장을 조성하여 지역 주민들의 생활불편을 해소하고 함지산 및 운암지 수변공원 방문객에게 주차편의를 제공하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 11.

○ 위 치 : 북구 구암동 415-2번지 일원(운암지 수변공원 주변)

○ 규 모 : 공영주차장 A=6,599㎡(약 140면), 진입도로 B=6m, L=42m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,008백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,008	125	2,014	869
국 비	2,250	113	1,801	336
시 도 비
시군구비	758	12	213	533
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 2016.  8. 1. : 도시계획시설(주차장) 결정 및 지형도면 고시

○ 2017.  1. 4. ~ 7. 18 : 토지 및 지장물 보상 시행

○ 2017. 10. 24. : 주차장 조성공사 착공

□ 향후계획

○ 2018. 11월 : 주차장 조성공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옻골문화공원 조성사업

담당자

공원녹지과 남기용(☎665-2865)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화공원을 조성함으로써 직‧간접 고용창출 및 지역주민들의 문화예술 함양과 구민화합, 야외 여가체험의 기회로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 03 ~ 2019. 12

○ 위 치 : 대구광역시 북구 구암동 6번지 일원

○ 규 모 : 인조잔디구장(6,732㎡), 관리사무실 신축 1동(500㎡)

주차장 확장(38대 ⟶ 57대), 야외무대 2,494㎡

피크닉장(5,597㎡), 자연체험장(756㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000		1,650	2,000	1,350
국 비	350		350
시 도 비
시군구비	4,650		1,300	2,000	1,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 2017. 6. 30 도시관리계획변경 결정 및 지형도면고시

○ 2017. 9. ~ 12. 인조잔디구장 조성완료(1단계 사업)

□ 향후계획

○ 2단계 사업 시행(주차장, 관리사무소, 야외무대)

○ 3단계 사업 시행(피크닉장, 자연체험장)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.