라 스타트 칠성,“별별 상상”餘․幸 사업

	목 적
대구 도심과 단절된 경부고속철로변의 환경개선과 주민역량강화를 통해 참신하고 재미있는 도시길을 만들어 특색 있는 마을 만들기를 추진하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 칠성동 경부고속철도변 일원(사업면적0.33㎢, 길이1.9㎞)

❍ 사업기간 : 2016. ~ 2019.(4년간)

❍ 사업내용

- 칠성테마 거리조성(근대산업문화, 프리마켓, 꽃 거리 및 김춘삼․모태기업 안내물 등)

- 역후공원 복합화 사업(칠성 산업문화관 조성, 옥외전시 공간조성 등)

- 칠성유래공원 재 조성(1개소), 월남촌 리모델링(공동화장실 개축1개소)

- 별별수다방(경로당1개소 리모델링, 1개소 신축) / 마을커뮤니티센터(공방193.1㎡) 조성

- 골목길 이미지개선(지붕 및 담장 정비 60개소 및 주차공간조성 등)

- 마을안심여건 개선(보안등55개소, CCTV32개소, 볼라드설치 등)

- 주민역량강화 프로그램사업(주민역량강화사업, 교양․인문․문화 체험프로그램, 사회경제조직 교육 및 지원 프리마켓 활성화교육 및 지원 등)

❍ 총사업비 : 61.28억원(국비 30.64억원, 시비 15.32억원, 구비 15.32억원)

※ 2017년 사업비 : 1,560백만원(국비 780백만원, 시비 390백만원, 구비 390백만원)

Ⅱ		추진상황

❍ 도활사업 국토부 공모신청 및 확정 : '15. 5. ~ 9.

❍ 기본계획 수립(방침) : '15. 11.

❍ 기본 및 실시설계 용역 : '16. 7. ~ '16. 12.

❍ 국토부 사업변경 신청 및 승인 : '17. 5.

❍ 역후공원 옥외전시 공간 조성완료 : '17. 7. ~ '17. 10.

❍ 월남촌 리모델링 공사완료 : '17. 8. ~ '17. 11.

❍ 칠성1가 경로당 리모델링 공사완료 : '17. 11. ~ '18. 2.

❍ 마을안심여건(보안등 55개소설치)개선 : '18. 2. ~ '18. 3.

❍ 마을안심여건(생활안전 CCTV 32개소설치)개선 : '18. 2. ~ '18. 5.

❍ 북성경로당 신축공사 기본 및 실시설계 용역 : '18. 2. ~ '18. 6.

❍ 마을안심여건(생활안전 스토리지 구매․설치)개선 : '18. 4. ~ '18. 5.

❍ 국토교통부 사업변경신청 및 승인 : '18. 5.

❍ 칠성유래공원 재 조성공사 실시설계 용역 : '18. 3. ~ '18. 5.

❍ 칠성테마 거리조성(꽃 거리조성)공사 설계 및 발주 : '18. 4. ~ '18. 6.

❍ 마을커뮤니티센터(공방) 조성 부지매입 추진 : '18. 5. ~ '18. 10.

❍ 주민역량강화사업 등 프로그램사업 추진 : '16. 5. ~ 현재까지 지속추진

※ 프로그램사업 : 칠성동이야기 찾기 사업, 별별상상CI제작사업, 주민워크숍, 주민참여벽화조성, 협의체회의, 주민회의, 한마당마을잔치, 주민현장견학 등

Ⅲ		사업변경 신청 및 승인

❍ 사업변경계획 변경신청 및 승인 : 2018. 5. 14.

❍ 총사업비 : 당초 : 6,000백만원 / 변경 : 6,128백만원

❍ 변경내용 : 단위사업 내 세부사업내용 및 투자예산 통합․조정

Ⅳ		향후 추진계획

❍ 칠성 산업문화관 조성(북구 보훈회관 통합신축) : 2018. 6. ~ 2019. 10.

❍ 별별수다방 조성(경로당 1개소 신축) : 2018. 하반기 발주예정

❍ 칠성유래공원 재 조성 : 2018. 하반기 발주예정

❍ 마을커뮤니티센터(공방) 부지매입 추진 : 2018. 5. ~ 추진 중

❍ 칠성 테마거리(근대문화산업거리) : 2018. 하반기 발주예정

❍ 주민역량 강화사업 등 프로그램 사업 운영 : 사업기간 중 지속운영

Ⅴ		기대효과

❍ 도심 공동화 해소와 주거환경개선 등으로 도시활력 증진

❍ 주민참여사업 수행으로 소통·교류 확대와 주민역량강화

❍ 추진사업이 마중물 역할을 하여 지속적인 지역발전 유도

Ⅵ		관련사진

라 스타트 칠성,“별별 상상”餘․幸 사업 위치도 및 주요 사업내용

8. 주민역량강화 프로그램사업_통합추진

칠성1가경로당

(리모델링)

북성경로당

(철거후신축)