기능복합형 북구청소년 문화의 집 건립

	목 적
기존 노후된 청사 부지를 활용하여 기능복합형 청소년 문화의 집을 건립하여 청소년문화공간 마련 및 행정 최일선인 주민센터의 서비스 향상 기여

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 북구 칠곡중앙대로 561(現읍내동주민센터청사 철거 후 신축)

❍ 총사업비 : 82.24억원(문화의 집 : 57.57억원, 동주민센터 : 24.67억원)

- 문화의 집 건립재원 국비: 50.64억원, 구비: 6.93억원

❍ 규    모 : 부지 1,666㎡, 연면적 2,982㎡(지하1층, 지상5층)

- 시설별 연면적 : 청소년 문화의 집 2,099㎡ / 동주민센터 등 883㎡

❍ 사업기간 : 2017. 3. ~ 2020. 7.

Ⅱ		추진상황

❍ ’17. 3. 10. : 기능복합형 북구청소년문화의 집 신축 기본계획 수립

❍ ’17. 4. 19. : 市 지방재정투자심사

❍ ’17. 10.   : 청소년 수요조사, 북구 청소년문화의 집 건립심의위원회 구성 및 개최

❍ ’18. 1.     : 일상감사․계약심사 및 설계공모

❍ ’18. 4. 19. : 심사위원회 개최 및 당선작 결정

❍ ’18. 5.     : 설계용역 착수

Ⅲ		향후계획

❍ ’19. 3. : 설계용역 완료 예정

❍ ’19. 4. : 공사 입찰 및 착공

❍ ’20. 7. : 공사 준공 ※ 공사기간 : 16개월 정도

Ⅳ		기대효과

❍ 청소년 활동의 적극적인 진흥과 건전한 육성 등 다양한 행정수요에 대응

❍ 주민들에게 고품질의 행정서비스 제공 및 대민서비스 업무능률 향상

Ⅴ		위치도