재난안전 영상전광판 설치사업

	목 적
신속한 재난상황 전파 및 대응요령 홍보를 위해 재난취약지역 및 유동인구 가 많은 지역에 재난영상 전광판을 설치하여 재난 피해를 예방코자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 사 업 명 : 재난안전 영상전광판 설치사업

❍ 위    치 : 칠곡네거리, 동변교네거리(2개소)

❍ 규    격 : 재난전광판(5.7m × 4.3m, 양면), H=14.3m(전광판 포함)

❍ 사업기간 : 2017. 2월 ～ 2017. 7월

❍ 사 업 비 : 428백만원(구비 367, 시비 61)

❍ 예산과목 :

- 도시안전과, 자연재난관리, 자연재해 예방, 재난예경보 설치, 401-01(시설비)

- 도시안전과, 자연재난관리, 치수및재해대책(재난관리기금), 재해재난대비사업, 401-01(시설비)

Ⅱ		추진상황

❍ 재난안전 특별교부세 교부결정 : 2016. 12. 29.

❍ 재난전광판 설치관련기관(부서) 협의 : 2017. 2. 13. ~ 2017. 2. 28.

❍ 시 재난관리기금 지원 통보 : 2017. 2. 27.

❍ 재난전광판 설치 추진계획 수립 : 2017. 2. 28

❍ 설치사업 비교검토 및 감사  : 2017. 2. 28. ~ 2017. 3. 10.

❍ 재난전광판 설치 착공 : 2017. 4. 11.

❍ 재난전광판 설치 준공 : 2017. 6. 15.

❍ 재난전광판 인터넷 연결 및 시험운영 : 2017. 6. 15. ~ 2017. 6. 30.

❍ 재난전광판 정상운영 : 2017. 7. 1.

Ⅲ		설치효과

❍ 기상상황 및 재난현황 실시간 전파, 재난정보 사각지대 해소

❍ 재해관련 홍보 및 각종 국가시책 구정안내로 주민서비스 제공

Ⅳ		관련사진

칠곡 네거리(읍내동 1342번지 인근)

동변교 네거리(서변동 1786번지 인근)