연암 서당골 餘․幸 사업

	목 적
도청 이전에 따른 도심 공동화 현상을 방지하고 지역 활력증대를 도모하고, 여유와 정이 넘치는 건강한 도시 문화마을을 조성하고자 함.

Ⅰ		사업개요

❍ 위    치 : 산격1·4동 일원(사업면적0.3㎢, 둘레길이3.2㎞)

❍ 사업기간 : 2015. ~ 2018.(4년간)

❍ 사업내용

- 연암 길 갤러리 사업(B=10m, L=950m), 연암마을 안길 가꾸기 사업(L=795m)

- 공용주차장(1,208㎡), 쌈지쉼터(104㎡), 연암 인문마당 조성(516㎡)

- 연암체험마당 조성(1,812㎡), 구암서원 진입로 가꾸기(2,500㎡)

- 연암 교류센터 조성, 제비 수다방(3개소), 주민역량강화 프로그램 사업 등

❍ 총사업비 : 61.82억원(국비 30.91억원, 시비 15.455억원, 구비 15.455억원)

※ 2017년 사업비 : 1,430백만원(국비 715백만원, 시비 357.5백만원, 구비 357.5백만원)

Ⅱ		추진상황

❍ 도활사업 국토부 공모신청 및 확정 : '14. 4. ~ 8.

❍ 기본 및 실시설계 용역 : '15. 4. ~ 11.

❍ 연암 인문마당 조성 : '15. 12. ~ '16. 9.

❍ 산격1동 경로당 외 1개소 리모델링 : '16. 2. ~ 6.

❍ 마을텃밭 조성 : '16. 2. ~ 6.

❍ 체험마당, 제비 수다방 조성 : '16. 8. ~ '17. 5.

❍ 마을 보안등 설치 : '16. 11. ~ '17. 1.

❍ 쌈지쉼터 조성 : '16. 11. ~ '17. 4.

❍ 생활안전 CCTV 설치 : '17. 1. ~ 6.

❍ 국토교통부 사업변경신청 승인 : '17. 3.

❍ 구암서원 앞 볼라드 설치 : '17. 6.

❍ 마을목공소 및 카페 기자재 구매설치 : '17. 8. ~ '17. 11.

❍ 연암마을 안길 조성공사 : '17.  12.. ~ '18. 5.

❍ 생활안전 CCTV추가 설치공사 : '17. 12. ~ '18. 2. 26.

❍ 연암마을 이역소 조성공사 : '18. 1. ~ '18. 2.

❍ 연암 인문마당 울타리 구입․설치 : '18. 3.

❍ 구암서원 진입로 및 연암 길 갤러리 사업 보완설계 용역 : '18. 4. 10. ~ 5. 29.

❍ 국토교통부 사업변경신청 및 승인 : '18. 5.

❍ 연암 서당골 협동조합 설립 신고․수리 : '17. 6.

❍ 연암 서당골 마을안길 벽화조성사업 : '18. 4. ~'18. 10.

❍ 연암 서당골 공용주차장 조성공사 : '18. 5.~ '18. 7.

❍ 마을커뮤니티센터 리모델링 실시설계 용역 : '18. 6.~ '18. 7.

❍ 주민역량강화사업 등 프로그램사업 추진 : '15. 4. ~ 현재까지 지속추진

※ 프로그램사업 : 영화마당운영, 생활목공강좌, SNS교육, 주민참여벽화조성, 주민참여골목정원조성, 마을이야기찿기사업, 문패만들기, 공방교육, 바리스타교육, 협동조합관련교육, 협의체회의, 주민회의, 한마당마을잔치, 현장견학 등

Ⅲ		사업변경 신청 및 승인

❍ 사업변경계획 변경신청 및 승인 : 2018. 5. 14.

❍ 변경내용 : 단위사업 내 세부사업내용 및 투자예산 조정

Ⅳ		향후 추진계획

❍ 연암마을 안길 벽화조성사업 : 2018. 4. ~ 추진 중

❍ 공용주차장 조성 : 2018. 5. ~ 추진 중

❍ 구암서원 진입로 정비 : 2018. 하반기 발주예정

❍ 마을커뮤니티센터 리모델링 : 2018. 하반기 발주예정

❍ 연암 길 갤러리 사업 : 2018. 하반기 발주예정

❍ 주민역량 강화사업 등 프로그램 사업 운영 : 사업기간 중 지속운영

Ⅴ		기대효과

❍ 도심 공동화 해소와 주거환경개선 등으로 도시활력 증진

❍ 주민참여사업 수행으로 소통·교류 확대와 주민역량강화

❍ 추진사업이 마중물 역할을 하여 지속적인 지역발전 유도

Ⅵ		관련사진

연암 서당골 餘․幸 사업 위치도 및 주요 사업내용