109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
관문동 행정복지센터 금호분소 신축	3,420	-	146	677	2,597	2022	2018	4%
기능복합형 북구청소년 문화의집 건립	8,224	255	109	5,796	2,064	2021	2017	4%
CCTV 자가통신망 구축	2,800	0	0	1,500	1,300	2020	2018	5%
칠곡3지구 문화예술거리 조성	3,000	0	0	3,000	0	2020	2017	37%
구암동고분군 일원 관광테마파크 조성	1,461	20	1,441	0	0	2018	2016	100%
대구능금시장 아케이드 설치사업(3차)	2,000	0	0	2,000	0	2019	2017	10%
칠성종합시장 고객문화센터 조성	2,000	0	0	2,000	0	2019	2017	10%
라스타트 칠성 별별상상여행	6,120	522	1,546	2,232	1,820	2020	2015	34%
연암 서당골 여행(餘幸)	6,182	2,285	1,131	1,600	1,166	2020	2014	55%
보훈회관 및 노인종합복지관 건립	5,065	75	754	4,236	0	2019	2017	23.5%
2018 금호강 바람소리길 축제	1,579	795	204	290	290	계속	2018	100%
옻골 문화공원 조성	5,000	1,650	0	1,000	2,350	2020	2017	33%
서리지 수변생태공원 조성사업	13,204	9,146	2,458	0	1,600	2020	2016	90%
운암지 주변 주차장 조성공사	3,007	2,139	868	0	0	2018	2015	100%
옥산로 테마거리 조성	3,637	77	77	760	2,800	2021	2017	16%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

관문동행정복지센터 금호분소 신축

담당자

재무과 곽정관(☎665-4474)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호지구 개발에 따른 대량의 인구유입으로 지구 내 금호분소 청사를

신축하여 주민편의와 양질의 행정서비스를 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10월 ~ 2022. 10월

○ 위 치 : 사수동 907

○ 규 모 : 지상 2층, 대지 1,313.3㎡(397평), 연면적 660㎡(200평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,420		146	677	2,597
국 비
시 도 비
시군구비	2,920		146	677	2,097
지 방 채	500				500
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  4%)

○ 부지매입 계약 및 1,2차 중도금 지급

□ 향후계획

○ 부지매입                      : 2018. 10월 ～ 2020. 11월

○ 시행계획 수립 및 신축 추진  : 2020. 11월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

기능복합(읍내동행정복지센터포함)북구청소년문화의집건립

담당자

재무과 곽정관(☎665-4474)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 대주민 서비스 제공 및 청소년 활동의 적극적인 진흥과 건전한 육성 등

다양한 행정수요에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3월 ~ 2020. 10월

○ 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561

○ 규 모 : 지상 5층, 대지 1,666㎡(504평), 연면적 2,979㎡(901평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,224백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,224	255	109	5,796	2,064
국 비			60	2,940	2,064
시 도 비
시군구비		255	49	2,856
지 방 채
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  4%)

○ 2017. 3.       : 신축계획 수립

○ 2017. 4.       : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2017. 5.       : 공유재산관리계획 승인

○ 2017. 5.       : 용역과제심의위원회 승인

○ 2017. 9.        : 시행계획 수립

○ 2018. 1. ~ 4.  : 설계공모 및 입상작 선정

○ 2018. 5.       : 기본 및 실시설계 용역

○ 2018. 10. ~ 2018. 12. : 장애물없는 생활환경(BF) 인증 수행

□ 향후계획

○ 2019.  1. ~ 2019. 2.  : 2차 문화재시굴조사

○ 2019.  3. ~ 2019. 4.  : 문화재정밀발굴조사

○ 2019.  5. ~ 2019. 6.  : 市 감사실 계약심사

○ 2019. 7             : 착공

○ 2020. 10            : 완공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

CCTV자가통신망 구축

담당자

정보통신과 이재호(☎665-4482)

□ 사업목적 및 필요성

○ CCTV자가통신망 구축비용 대비 임대회선비용의 손익분석을 통한 구재정       절감 방안 및 대책수립

○ 구민을 대상으로 하는 CCTV부가서비스 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 9월 ～  2020년 12월

○ 위 치 : 대구광역시 남구 대명로 217 외 북구관내 CCTV설치장소 1,000여개소

○ 규 모

- 광케이블 포설 : 약 120km, 전송장비 : 1,006식

- 네트워크 및 보안장비 : 5식, 센터운영장비 : 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,800	0	0	1,500	1,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,800	0	0	1,500	1,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ CCTV자가망 구축 실시설계 용역 추진 중

□ 향후계획

○ CCTV자가통신망 구축 책임감리용역 시행(1, 2차 별도시행)

○ CCTV자가통신망 구축사업 시행(1, 2차 별도시행)

사업명

칠곡3지구 문화예술거리 조성사업

담당자

관광자원개발과

이원익(☎665-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로

조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여

○ 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용

도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

○ 대구광역시 최초, 전국 24번째 주민주도 경관협정 거리조성 추진 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로

○ 규 모 : B=12m, L=720m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000				3,000
특 교 세	1,000				1,000
시 도 비
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 : 2016. 11. ~ 2017. 1월

○ 문화예술거리 조성 주민설명회 개최 : 2017. 9. 12.

○ 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 4월 ~ 10월

□ 향후계획

○ 사업시행 : 2019. 1월 ~ 2020. 1월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

구암동고분군 일원 관광테마파크조성사업

담당자

관광자원개발과

최한태(☎665-2354)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유산적 가치가 뛰어난 구암동고분군・팔거산성 일원을 관광자원화하여       시민들이 즐겨찾는 역사문화공간으로 조성하여, 여가와 휴식을 즐길 수       있는 힐링의 장소로 거듭나게 하고 주민들의 삶의 질을 향상시키고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 구암동 산77번지, 349번지 및 노곡동 산1-1번지 일원

○ 규 모 : 누리길 조성공사 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		20	1,441
국 비	1,000		10	721
시 도 비	500		5	360
시군구비	500		5	360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 실시설계 용역 : 2016. 11월 ~ 2017. 2월

○ 구암동 고분군 누리길 조성공사 추진 : 2017. 11월 ~ 2018. 4월

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

칠곡3지구 문화예술거리 조성사업

담당자

관광자원개발과

이원익(☎665-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로

조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여

○ 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용

도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

○ 대구광역시 최초, 전국 24번째 주민주도 경관협정 거리조성 추진 사업

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로

○ 규 모 : B=12m, L=720m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000				3,000
특 교 세	1,000				1,000
시 도 비
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 : 2016. 11. ~ 2017. 1월

○ 문화예술거리 조성 주민설명회 개최 : 2017. 9. 12.

○ 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 4월 ~ 10월

□ 향후계획

○ 사업시행 : 2019. 1월 ~ 2020. 1월

사업명

대구능금시장 아케이드 설치사업(3차)

담당자

민생경제과 김기현(☎665-3182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구지역 청과 및 야채류 대표 도·소매시장인 대구능금시장에 아케이드를 설치하여 악천후에 구애받지 않는 편리하고 쾌적한 쇼핑환경을 제공함으로써 전통시장 매출 신장 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ∼ 2019.12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 칠성남로41길 21

○ 규 모 : 아케이드(A=1053.5㎡) 설치 건축 및 부대공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	0	0	2,000	0
국 비	1,200	0	0	1,200	0
시 도 비	300	0	0	300	0
시군구비	300	0	0	300	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	200	0	0	200	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘18. 1. ∼  8.   사업관련 상인회 협의 등

○ ‘18. 9.          실시설계용역 착수

○ ‘19. 4. ∼  6.   일상감사(區) 및 계약심사(市)

○ ‘19. 6.          실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ ‘19. 7. ∼ 12.   공사 착공 및 준공

사업명

칠성종합시장 고객문화센터 조성

담당자

민생경제과 서성화(☎665-2652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서문시장과 더불어 대구 양대 거점시장인 칠성종합시장 내 상인과 고객 간 소통과 상인회 자생을 위한 복합문화공간을 조성하여 시장 분위기 제고

○ 대규모 상권의 종합적 통제를 위한 컨트롤 타워 역할을 수행할 거점공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ∼ 2018.12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 칠성동1가 150-2 (백악관 건물)

○ 규 모 : 건물 1, 2층 임차 후 2층부 리모델링 (A=1,349㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000	3,251	749	0	0
국 비	2,400	1,951	449	0	0
시 도 비	1,600	1,300	300	0	0
시군구비	0	0	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016. 3. ~ 12.       : 건물임대차 계약 관련 협의 (10차례)

○ 2016. 9. ~ 2017. 3.  : 시설배치 용역 (대구전통시장진흥재단)

○ 2016.11. ~ 12.       : 감정평가 실시 (중앙감정평가법인 외 1개소)

○ 2017. 1. 13.         : 임대차 계약 체결

○ 2017. 1. 19.         : 전세권설정 등기 완료

○ 2017. 3. 8.          : 시설배치 용역 완료 (최종보고회)

○ 2017. 4. ~ 10.       : 상인연합회 협의 및 종합계획 수립

○ 2017. 9. ~ 2018. 2.  : 1층부 입주업체 공개모집 (3차례)

○ 2017.10. ~ 11.       : 2층부 리모델링 실시설계 용역 (거화건축사사무소)

○ 2017.12. ~ 2018. 6.  : 2층부 리모델링 공사

○ 2018. 5. 3.          : 상인연합회와의 위수탁협약 체결

○ 2018. 7. ~  9.      : 1층부 공동판매장 리모델링(시설비 연합회등 부담)

○ 2018. 8. ~  9.      : 사업변경 요청 및 승인(’17년도 미이월 잔액 활용)

○ 2018.10. ~ 12.      : 잔액 활용 사업(홍보 및 안내시설 설치 등) 완료

○ 2019. 7. 3.         : 2층부 사용승인(용도변경허가)

□ 향후계획 : 사업완료

□ 사업변경 내역 : ‘17년도 미이월 집행잔액 활용사업 변경

○ 사업기간 : 2018.10. ~ 12.

○ 사 업 비 : 99,676천원

○ 사업위치 : 상   동

○ 사업내용 : 복합커뮤니티센터 환경개선(홍보 및 안내시설 설치 등)

사업명

라 스타트 칠성 별별 상상 여행

담당자

도시재생과 박철현(☎665-4434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 이전에 따른 도심 공동화 현상을 방지하고 지역 활력증대를 도모하고,         여유와 정이 넘치는 건강한 도시 문화마을을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2016

○ 위 치 : 산격 1·4동 일원(사업면적0.3㎢, 둘레길이 3.2km)

○ 규 모 : 연암 길 갤러리 사업 외 9개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,120	522	1,546	2,232	1,820
국 비	3,060	261	773	1,116	910
시 도 비	1,530	130.5	386.5	558	455
시군구비	1,530	130.5	386.5	558	455
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 칠성유래공원, 꽃 거리, 방범cctv, 보안등 설치

○ 공동화장실, 경로당, 옥외전식 공간 조성 완료

□ 향후계획

○ 커뮤니티센터(공방) 신축 및 장비 구축

○ 근대산업문화거리 및 칠성산업 문화관 조성

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 6,000백만원 → 변경 후 6,120백만원

※ 지역균형발전위원회 사업평가에 따라 120백만원 인센티브 반영

사업명

연암서당골 여행

담당자

도시재생과 박철현(☎665-4434)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도청 이전에 따른 도심 공동화 현상을 방지하고 지역 활력증대를 도모하고,         여유와 정이 넘치는 건강한 도시 문화마을을 조성하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020

○ 위 치 : 산격 1·4동 일원(사업면적0.3㎢, 둘레길이 3.2km)

○ 규 모 : 연암 길 갤러리 사업 외 9개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,182	2,285	1,131	1,600	1,166
국 비	3,091	1,142	565.5	800	583
시 도 비	1,545.5	571.5	282.75	400	291.5
시군구비	1,545.5	571.5	282.75	400	291.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 공용주차장, 쌈지쉼터, 텃밭 조성 완료

○ 연암 인문마당 및 체험마당 조성, 제비 수다방(주민쉼터) 조성 완료

□ 향후계획

○ 연암 길 갤러리 사업 및 마을안길 가꾸기 사업 추진

○ 마을카페 및 복합문화공간 조성

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 당초 6,000백만원 → 변경 후 6,182백만원

※ 지역균형발전위원회 사업평가에 따라 182백만원 인센티브 반영

사업명

북구 보훈회관 및 노인종합복지관 건립공사

담당자

복지정책과 배상운(☎665-2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호국정신을 함양할 수 있는 공간 활용

○ 어르신들의 복지증진과 이용편의를 위한 공간 제공

○ 칠성산업문화관 건립으로 재생사업의 거점 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017.2 ~ 2019.10

○ 위 치 : 칠성남로 26길27(칠성동)

○ 규 모 : 연면적1,700㎡,(지하1,지상5) 대지면적502㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,065백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,065	75	754	4,236
국 비	500		136	364
시 도 비
시군구비	4,565	75	618	3,872
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23.5%)

❍ 2018. 6. 27 : 공사 착공

❍ 2018. 8. 14 : 기공식

❍ 2019. 1월초 : 터파기 철근배근

❍ 2019. 10. : 공사 준공 예정

□ 향후계획

○ 2019. 10 준공검사

사업명

2018 금호강 바람소리길 축제

담당자

문화예술과 이효영 ☎665-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들에게 문화향유 기회 제공과 금호강의 역사·문화·생태적

가치를 제고하는 축제의 장을 열고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.10.6.(토).~10.7.(금)

○ 위 치 : 금호강 산격대교 일원/어울아트센터

○ 규 모 : 참여인원 80,000명 정도 / 총사업비 : 290,000천원 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,579	795	204	290	290
시군구비	1,579	795	204	290	290

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100%)

○매년 추진계획에 의거 적정 추진완료

□ 향후계획

○ 2019년 금호강 바람소리길 축제 예정

- 기간/장소 : 2019. 9. 28.(토) ~ 9. 29.(일)/산격대교 일원

- 주최/주관 : (재)행복북구문화재단

사업명

옻골문화공원 조성사업

담당자

공원녹지과 남기용(☎665-2865)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화공원을 조성함으로써 직‧간접 고용창출 및 지역주민들의 문화예술 함양과 구민화합, 야외 여가체험의 기회로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 구암동 6번지 일원

○ 규 모 : 인조잔디구장(6,732㎡), 관리사무실 신축 1동(500㎡)

주차장 확장(38대 ⟶ 57대), 야외무대 2,494㎡

피크닉장(5,597㎡), 자연체험장(756㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	1,650		1,000	2,350
국 비	350	350
시 도 비
시군구비	4,650	1,300		1,000	2,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 33%)

○ 2017. 6. 30 도시관리계획변경 결정 및 지형도면고시

○ 2017. 9. ~ 12. 인조잔디구장 조성완료(1단계 사업)

□ 향후계획

○ 2단계 사업 시행(주차장, 관리사무소, 야외무대)

○ 3단계 사업 시행(피크닉장, 자연체험장)

사업명

서리지 수변생태공원 조성사업

담당자

공원녹지과 김정욱(☎665-2864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도 3호선의 개통과 더불어 서리지 일원에 도심 친수공간을 조성하여

시민들에게 힐링공간을 제공하고, 친환경적 생태공간으로 조성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015 ~ 2020년

○ 위 치 : 동호동 73번지 일원(서리지 주변)

○ 규 모 : 수변생태공원 조성(A=89,673㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,204백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,204	9,146	2,458	0	1,600
국 비	2,751	1,322	1,029	0	400
시 도 비	4,250	2,821	1,029	0	400
시군구비	6,203	5,003	400	0	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2015.  7. : 도시관리계획(공공공지) 결정 고시

○ 2015.  8. ~ 2016. 6. : 실시설계 용역 시행

○ 2016. 12. ~ 2017. 8. : 보상완료(토지 등 소유권 이전완료)

○ 2018.  1. ~ 2019. 5. : 1단계 공사 시행

□ 향후계획

○ 2020. 12 : 2단계 공사 준공(편의시설 설치 및 초화 식재)

사업명

운암지 주변 주차장 조성공사

담당자

도시행정과

김상효(☎665-2814)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역에 공영주차장을 조성하여 지역 주민들의 생활불편을 해소       하고 함지산 및 운암지 수변공원 방문객에게 주차편의를 제공하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 1. ~ 2018. 11.

○ 위 치 : 북구 구암동 415-2번지 일원(운암지 수변공원 주변)

○ 규 모 : 공영주차장 A=6,599㎡(140면), 진입도로 B=6m, L=42m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,007백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,007	2,138	869	-	-
국 비	2,250	1,913	337	-	-
시 도 비
시군구비	757	225	532	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  8. 1. : 도시계획시설(주차장) 결정 및 지형도면 고시

○ 2017.  1. 4. ~ 7. 18 : 토지 및 지장물 보상 시행

○ 2017. 10. 24. : 주차장 조성공사 착공

○ 2018.  9. 22. : 주차장 조성공사 준공

○ 2018. 11. 30. : 도시계획시설사업 공사 완료 공고

□ 향후계획

○ 해당 없음

사업명

옥산로 테마거리 조성

담당자

도시행정과

류해담(☎665-2332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도3호선 및 삼성창조캠퍼스 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로 및 호암로 일대를 명품거리로 조성.

○ 우리구 근대산업역사에 대한 스토리텔링과 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화 함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2021년(예정)

○ 위 치 : 옥산로~호암로 (북구청네거리~삼성창조캠퍼스)

○ 규 모 : L=1.6Km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,637백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,637		77	760	2,800
국 비
시 도 비	3,500			700	2,800
시군구비	137		77	60
지 방 채
민간자본
기 타

※ 지중화사업(1,250백만원) 별도

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  16%)

○ 옥산로 테마거리 조성사업 계획 수립 : 2016. 8. 11

○ 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2018. 4. ~ 2019. 10.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : 2019. 12월

○ 공사 준공 : 2021. 12월

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.