109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
라 스타트 칠성 별별상상여행	6,120	2,900	3,220	328	0	2020	2015	89
보훈회관 및 노인종합복지관 건립	4,959	829	2,111	2,019	0
기능복합형 북구청소년 문화의 집 건립	8,224	364	720	7,140	0	2020	2017	13
옻골 문화공원 조성	5,000	1,650	1,000	2,350	0	2020	2017	55
칠곡 3지구 문화예술거리 조성	3,000	98	2,695	207	0
옥산로 테마거리 조성	3,650	0	850	1,000	1,800
2019 금호강 바람소리길 축제	1,955	1,085	290	290	290	계속	2019	100
능금시장 아케이드 설치사업(3차)	2,000	0	0	87	1,913	2020	2017	60
북구 화물자동차 공영차고지 조성	30,000	63	202	369	29,365	2022	2017년	20
관문동 행정복지센터 금호분소 신축	3,420	146	677	678	1,919	2022	2018	24
CCTV 자가통신망 구축	4,440	0	440	1,500	2,500	2021	2019	10
칠성 종합시장 상권활성화	8,000	0	1,855	2,243	3,902	2023	2018	23
산격동 20번지선 도로 건설	4,200	2,900	2,900	1,300	0	2021	2019	70
운암지 생태문화공간 조성	3,200	393	1,541	1,100	100	2021	2019	61
복현동 이룸고교 진입도로 건설	4,500	1,500	500	3,000	0	2021	2019	30
피란민촌의 재탄생, 어울림마을 복현	71,561		1,334	6,345	63,882	2023		25
조야동 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	5,100	0	0	2,700	2400	미정	2019	0

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

라 스타트 칠성, “별별상상” 여행 사업

담당자

도시재생과 박철현

(☎665-4432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구 도심과 단절된 경부고속철로변의 환경개선과 주민역량강화를 통해 참신하고        재미있는 도시길을 만들어 특색 있는 마을 만들기를 추진하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2020.(5년간)

○ 위 치 : 칠성동 경부고속철도변 일원(사업면적0.33㎢, 길이1.9㎞)

○ 규 모 : 칠성테마거리 외 7개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,120만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	6,120	2,900	3,220
국 비	3,060	1,450	1,610
시 도 비	1,530	725	805
시군구비	1,530	725	805

※ 국토부 승인된 사업계획 예산(6,128백만원)중 8백만원은 2020년 편성됨

□ 추진상황

구 분		예산	세부사업내용	공정률	추진상황
계		6,128
1	칠성 테마거리 조성	2,340	○ 근대산업문화거리(600m) (태평지하도 ~ 대구역 지하도)	100%	- 19. 12. 완료
			○ 꽃거리정비(370m)	100%	- ‘18. 7월 완료
			○ 칠성이야기길 (600m) (대구역 지하도 ~ 칠성 지하도)	50%	- ‘20. 8월 완료 예정
			○ 별빛산책길 (300m) (칠성 지하도 ~ 동인 지하도)	30%	- ‘20. 8월 완료 예정
2	역후공원 복합화	1,040	○ 별별상상이야기관 조성 (보훈회관 4층사용, 면적145.22㎡)	100%	- ‘20. 4월 완료
			○ 옥외전시 공간조성	100%	- ‘18. 11월 완료
3	칠성유래 공원조성	330	○ 칠성유래공원 재조성	100%	- ‘18. 11월 완료

구 분		예산	세부사업내용	공정률	추진상황
4	별별수다방 / 커뮤니티센터 조성	1,126	○ 칠성1가 경로당 리모델링 (위치 : 칠성동1가 18-171, 면적 : 199㎡)	100%	- ‘18. 3월 완료
			○ 북성경로당 신축 (위치 : 칠성동2가 245-26, 면적 : 42.84㎡)	100%	- ‘19. 2월 완료
			○ 커뮤니티센터(공방)조성 칠성1가 3681-18외 2필지 (2층, 연면적 137㎡)	65%	- ‘20. 8월 완료 예정
5	골목길 이미지개선	352	○ 골목길 정비	100%	- ‘19. 12월 완료
			○ 포켓쉼터 조성	100%	- ‘20. 5월 완료
6	월남촌 리모델링	40	○ 공동화장실 개축 등 (위치 : 칠성동1가 18-143, 면적 : 11.1㎡)	100%	- ‘17. 11월 완료
7	마을안심 여건개선	500	○ 방법CCTV 설치(30개소)	100%	- ‘18. 5월 완료
			○ 보안등 설치(55개소)	100%	- ‘18. 3월 완료
8	주민역량강화 프로그램 운영	400	○ 주민역량강화사업	80%	- ‘20. 12월 완료 예정
			○ 교양·인문·문화·체험프로그램
			○ 사회·경제조직 교육 지원 등

□ 향후계획

○ ‘20. 8. 칠성테마거리 조성사업 및 커뮤니티센터(공방) 조성

○ ’20. 12. 주민역량강화 프로그램 완료

□ 사업변경 내역

구분	연번	당초계획						변 경 계 획
		세 부 사업명	합계	국비	지 방 비			세 부 사업명	합계	국비	지 방 비
					소계	시비	구비				소계	시비	구비
		합 계	6,000	3,000	3,000	1,500	1,500	합 계	6,128	3,064	3,064	1,532	1,532
물리적 사업	1	칠성테마거리 조성	2,340	1,170	1,170	585	585	칠성테마거리 조성	2,340	1,170	1,170	585	585
	2	역후공원 복합화	1,040	520	520	260	260	역후공원 복합화	1,040	520	520	260	260
	3	칠성유래공원 조성	160	80	80	40	40	칠성유래공원 조성	330	165	165	82.5	82.5
	4	별별수다방/커뮤니티센터(공방) 조성	768	384	384	192	192	별별수다방/커뮤니티센터(공방) 조성	1,126	563	563	281.5	281.5
	5	골목길 이미지 개선	352	176	176	88	88	골목길 이미지 개선	352	176	176	88	88
	6	월남촌(공동화장실) 리모델링	120	60	60	30	30	월남촌(공동화장실) 리모델링	40	20	20	10	10
	7	마을 안심여건 개선	500	250	250	125	125	마을 안심여건 개선	500	250	250	125	125
	8	주민역량강화 및 일자리 창출	300	150	150	75	75	주민 역량강화 프로그램 사업	400	200	200	100	100
프로 그램 사업	9	별별상상 체험축제	360	180	180	90	90
	10	숨은별 찿기 프로그램	60	30	30	15	15

사업명

북구 보훈회관 및 노인종합복지관 건립공사

담당자

복지정책과 배상운

(☎665-2513)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호국정신을 함양할 수 있는 공간 활용

○ 어르신들의 복지증진과 이용편의를 위한 공간 제공

○ 칠성산업문화관 건립으로 재생사업의 거점 기반 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2017.2 ~ 2020.3

○ 위 치 : 칠성남로 26길 27(칠성동)

○ 규 모 : 연면적 1,987㎡(지하 1층, 지상 5층), 대지면적 502㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,959백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,959	829	2,111	2,019
국 비	500	136	364	-
시 도 비				-
시군구비	4,459	693	1,747	2,019
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 6. 27. : 공사 착공

○ 2018. 8. 14. : 기공식

○ 2019. 1월초 : 터파기 철근배근

○ 2019. 2월 ~ 9월 : 5층 바닥 타설 완료

○ 2019. 10월 ~ 2020. 2월 : 마감공사

○ 2020. 3월 : 준공 및 BF 본인증

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

기능복합(읍내동행정복지센터포함)북구청소년문화의집건립

담당자

재무과 전혜성

(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 대주민 서비스 제공 및 청소년 활동의 적극적인 진흥과 건전한 육성 등

다양한 행정수요에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3월 ~ 2020. 12월

○ 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561

○ 규 모 : 지상 5층, 대지 1,666㎡(504평), 연면적 2,979㎡(901평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,224백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,224	364	720	7,140
국 비	3,000	60	376	2,564
시 도 비	2,064			2,064
시군구비	3,160	304	344	2,512
지 방 채
민간자본

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  13%)

○ 2017. 3.       : 신축계획 수립

○ 2017. 4.       : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2017. 5.       : 공유재산관리계획 승인

○ 2017. 5.       : 용역과제심의위원회 승인

○ 2017. 9.        : 시행계획 수립

○ 2018. 1. ~ 4.   : 설계공모 및 입상작 선정

○ 2018. 5.       : 기본 및 실시설계 용역

○ 2018. 10. ~ 2018. 12. : 장애물없는 생활환경(BF) 인증 수행

○ 2019.  1. ~ 2019. 2.  : 2차 문화재시굴조사

○ 2019.  3. ~ 2019. 4.  : 문화재정밀발굴조사

○ 2019.  5. ~ 2019. 6.  : 市 감사실 계약심사

○ 2019.  8.  19.       : 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12.  24.       : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옻골문화공원 조성사업

담당자

공원녹지과 남기용

(☎665-2865)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화공원을 조성함으로써 직‧간접 고용창출 및 지역주민들의 문화예술

함양과 구민화합, 야외 여가체험의 기회로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 구암동 6번지 일원

○ 규 모 : 1단계) 인조잔디구장(6,732㎡)

2단계) 관리사무실 신축 1동(500㎡),주차장 확장(38대⟶57대), 야외무대 2,494㎡

3단계) 피크닉장(5,597㎡), 자연체험장(756㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	1,650	1,000	2,350
국 비	350	350
시 도 비
시군구비	4,650	1,300	1,000	2,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2017. 6. 도시관리계획변경 결정 및 지형도면고시

○ 2017. 9. ~ 12. 인조잔디구장 조성

○ 2019. 9. ~ 2020. 4. 관리사무소(화장실) 신축

□ 향후계획

○ 2단계 사업 시행(주차장, 야외무대)

○ 3단계 사업 시행(피크닉장, 자연체험장)

사업명

칠곡3지구 문화예술거리(이태원길)

담당자

관광과 이원익

(☎665-4322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술

거리로 조성하여 침체된 지역 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로

○ 사업규모 : B=12m, L=720m

○ 사업기간 : 2017 ~ 2019년

(공사기간 :  2019. 1. 3. ~ 2019. 12. 10.)

○ 거 리 명 : 이태원길

주요사업내용

◦디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 경관가로조명

◦동천육교 정비, 문화커뮤니티센터, 휴게시설, 거리안내 사인

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	98	2,695	207
국 비(특교세)	1,000	48	952
구 비	2,000	50	1,743	207

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

- 2017.  6월 : 2017년 제1차 추경예산 편성(구비 10억원)

- 2017. 9. 29 : 행정안전부 특별교부세 10억 확보

- 2018. 4. 9 ~ 11. 5 : 기본 및 실시설계용역

- 2018. 10월 ~ 11월 : 주민 및 북구의회 등 설계용역 설명회

- 2018. 11월 ~ 12월 : 일상감사(계약심사) 및 입찰공고

- 2019.  6월 : 2019년 제2차 추경예산 편성(구비 10억원)

- 2019.  1월 ~ 2019. 12월 : 공사착공 및 준공

- 2019. 11월 ~ 2020. 2월 : 크리스마스거리 조성/운영

□ 향후계획

- 2020. 7월 ~ 10월 : 커뮤니티센터 운영, 공연․체험프로그램 등

- 2020년 하반기(예정) : 이태원길 오프닝 행사 개최

사업명

옥산로 테마거리 조성사업

담당자

도시행정과 정윤지

(☎665-2334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리구 근대산업 역사에 대한 스토리텔링과 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화 함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 04. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 옥산로 ∼ 호암로 일원

○ 규 모 : 테마거리 조성 1식(L=1.6km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,650	-	850	1,000	1,800
국 비
시 도 비	2,800			1,000	1,800
시군구비	850	-	850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업계획 수립 : 2016. 08. 11.

○ 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 시행 : 2018. 04. 30.

○ 주민설명회 개최 : 2019. 06. 25.

○ 토목·조경 공사 착공 : 2019. 12. 20. (공사기간 730일)

○ 전기 공사 착공 : 2020. 2. 12. (공사기간 690일)

□ 향후계획

○ 2021. 02. : 고성북로 10길 가로정비

○ 2021. 12. : 공사 준공(1차 공사 2020. 12월 준공)

사업명

금호강 바람소리길 축제

담당자

문화예술과 이효영

(☎665-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민화합 및 문화관광축제로 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. 28.(토) ~ 29.(일)  (매년 가을)

○ 위 치 : 금호강 산격대교 하단 둔치

○ 규 모 : 관람인원 5만명 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  1,955백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	1,955	1,085	290	290	290
국 비
시 도 비
시군구비	1,955	1,085	290	290	290
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 축제추진완료 (100%)

□ 향후계획

○ 구 대표축제의 문화관광축제 지정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

대구능금시장 아케이드 설치사업(3차)

담당자

민생경제과 김기현

(☎665-3182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구지역 청과 및 야채류 대표 도·소매시장인 대구능금시장에 아케이드를 설치하여 악천후에 구애받지 않는 편리하고 쾌적한 쇼핑환경을 제공함으로써 전통시장 매출 신장 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ∼ 2020.12.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 칠성남로41길 21

○ 규 모 : 아케이드(A=1053㎡) 설치 건축 및 부대공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	0	0	2,000	0
국 비	1,200	0	0	1,200	0
시 도 비	300	0	0	300	0
시군구비	300	0	0	300	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	200	0	0	200	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ‘18. 1. ∼  8.   사업관련 상인회 협의 등

○ ‘18. 9.          실시설계용역 착수

○ ‘19. 4. ∼  6.   일상감사(區) 및 계약심사(市)

○ ‘18.12.          아케이드(3차) 설치 공공디자인 심의(협의)

○ ‘19. 6.          실시설계용역 완료

○ ‘19. 2.          사업변경 요청(區) 및 승인(대구‧경북지방중기청)

○ ‘19. 8.          일상감사 및 계약심사(區) 완료

○ ‘19. 9.20.        공사 계약

○ ‘19. 9.23.        공사 착공

□ 향후계획

○ ‘20. 8.31.        공사 준공

□ 사업변경 내역

○ A=1,225㎡, L=240m에서 A=1,053㎡, L=199m로 변경

사업명

태전동 화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통과 손용우

(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 차고지 부족해소, 지역 화물업계 종사자 공공복리 증진 및 화물운수사업        발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 북구 태전동 48-2번지 외 50필지

○ 규 모 : 공영차고지 조성 A=34,125㎡, 주차면수 492면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	30,000	63	202	369	29,365
국 비	400	-	141	259	-
시 도 비	26,600	-	41	74	26,429
시군구비	3000	63	20	37	2,936

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 조성대상지 市 제출 : 2015. 5.

○ 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 : 2017. 7.

○ 화물자동차 공영차고지 조성 계획 : 2017. 8.

○ GB 및 도시관리계획 결정, 건축공사 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 4.

○ 토목·조경공사 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2019. 6. 20.

○ 국토부 GB관리계획 중앙심사 : 2019. 8. 21.

○ 제4차 대구권 개발제한구역관리계획 2차 변경(안) 관련부서 협의 및 주민의견

청취(대구시) : 2019. 9. 19. ~ 10. 11.

○ 사전재해영향성 검토, 소규모 환경영향평가 용역 착수 : 2019. 11.

○ 대구시 도시계획위원회 심의 : 2019.11.28.

○ 중앙관계기관 협의(GB관리계획 변경) : 2020.1. ~ 2.

□ 향후계획

○ 중앙도시계획위원회 심의(개발제한구역 관리계획 변경) : 2020. 8.

○ 도시관리계획 인가고시 : 2020. 10.  ○ 토지 감정 및 보상 : 2021. 1.

○ 공사 시행 : 2022. 1.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

관문동행정복지센터 금호분소 신축

담당자

재무과 전혜성

(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호지구 개발에 따른 대량의 인구유입으로 지구 내 금호분소 청사를

신축하여 주민편의와 양질의 행정서비스를 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10월 ~ 2022. 10월

○ 위 치 : 사수동 907

○ 규 모 : 지상 2층, 대지 1,313.3㎡(397평), 연면적 660㎡(200평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,420	146	677	678	1,919
국 비
시 도 비
시군구비	2,920	146	677	678	1,419
지 방 채	500				500
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  24%)

○ 부지매입 계약     : 2018. 10. 1.

○ 1·2차 중도금 지급 : 2019. 03. 08.

□ 향후계획

○ 부지매입 3차 중도금 및 잔금 : 2020. 1. 31.

○ 시행계획 수립 및 신축 추진  : 2020. 11월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

CCTV자가통신망 구축

담당자

정보통신과 이재호

(☎665-4482)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초연결 스마트시대에 부응하는 구민서비스용 광대역 통신 인프라 확충

○ 통신수요량 폭증에 따라 매년 증가하는 임대회선 요금 절감

□ 사업개요

○ 기 간 : ’19. 1. ~ ’21. 12.

○ 위 치 : 관내 CCTV 1,200여개소 연계 광케이블 통신망 구축

○ 규 모

- 광케이블 포설 : 180km, 통신장비 : 885개

- 네트워크 및 보안장비 : 7식, 센터운영장비 : 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,440백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,440	0	440	1,500	2,500
국 비	2,500	0	0	-	2,500
시 도 비	1,500	0	0	1,500	-
시군구비	440	0	440	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ CCTV 자가통신망 실시설계 용역 완료            :  ‘19. 8.

○ CCTV 자가통신망 네트워크장비 구매            :  ‘19. 11.

□ 향후계획

○ CCTV 자가통신망 구축 책임감리용역 시행(1, 2차 별도시행)

○ CCTV 자가통신망 구축사업 시행(1, 2차 별도시행)

□ 사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초		변 경		변경사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
공사비	2,800	· 광케이블 포설 : 120km · 네트워크장비 : 5식	4,440	· 광케이블 포설 : 180km · 네트워크장비 : 7식	실시설계 결과 반영

사업명

칠성종합시장 상권활성화사업

담당자

민생경제과 서성화

(☎665-2652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구도심 상권의 쇠퇴로 칠성종합시장 상권 내 전통시장, 골목상권 등 소상공인 생업기반이 약화됨에 따라 칠성종합시장 일원을 상권활성화 구역으로 지정하여 소상공인 및 상권의 자생력 확보, 시장의 지속적 성장을 도모하여 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ∼ 2023. 12. (5년간)

○ 위 치 : 대구광역시 북구 칠성동1가 276-1 일원

○ 규 모 : 칠성종합시장 일원(A=132,890㎡) 상권환경 개선, 구역별 특화추진,               경영선진화 및 상인 역량 강화 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000	0	1,855	2,243	3,902
국 비	4,000	0	927.5	1,121.5	1,951
시 도 비	1,600	0	371	448.6	780.4
시군구비	1,600	0	371	448.6	780.4
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	800	0	185.5	224.3	390.2
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 23%)

○ ‘18. 10.      : 상권활성화사업 市 투자심사 승인

○ ‘18. 12.      : 계획 수립에 관한 의회 의견 청취 및 주민공람

○ ‘19. 1. ∼ 3. : 상권관리기구 설립 및 세부추진계획 수립

○ ‘19. 4. ~     : 세부사업 계획에 의하여 연차별 상권활성화사업 추진

□ 향후계획

○ ‘19. 4. ∼ ‘23. : 세부사업 계획에 의하여 상권활성화사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

산격동 20번지선 도로건설

담당자

건설과 김현우

(☎665-2885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유통단지와 검단공단이 위치하여, 중소규모 기업체가 밀집되어 있으나,        공단 진출입로가 취약하여 차량통행 불편은 물론 상하수도, 도시가스 등       기반시설 미설치와 같은 기업활동 불편이 있어 도로건설을 통해 해결하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 북구 산격동 20번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8m L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,200	1,400	1,500	1,300	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘17. 10 : 실시설계 용역 시행

○ ’18.  3. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ‘18.  5. : 보상계획 열람공 및 1차 보상협의

○ ‘19. 10. : 1차 공사완료

○ ‘19. 11. : 2차 보상협의

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 공사 시행

사업명

운암지 생태문화공간 조성

담당자

공원녹지과 장원혁

(☎665-4304)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심지 내 부족한 수변 휴양공간을 확보하고, 특색있는 볼거리 제공 및

야간경관 개선을 통하여 안전하고 쾌적한 휴식을 즐길 수 있는 공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2월 ~ 2021. 6월(4년 2개월)

○ 위 치 : 북구 구암동 349번지 일원

○ 규 모 : 생태문화공간 조성 1식 A=15,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,200	1,950	50	1,100	100
국 비
시 도 비	800	800
시군구비	2,400	1,150	50	1,100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61%)

○ ‘17.  2월 ~ ’17. 12월 : 운암지 생태문화공간 조성사업 실시설계용역

○ ‘18.  1월 ~ ’19.  5월 : 운암지 생태문화공간 조성사업

○ ‘18. 10월 ~ ’19.  4월 : 운암지 시설물 설치사업

○ ‘19.  7월 ~ ’20.  5월 : 운암지 야간경관개선사업 기본 및 실시설계용역

○ ‘20.  5월 ~ ’20.  6월 : 운암지 노후시설물 정비공사 실시설계용역

□ 향후계획

○ ‘20.  8월 ~ ’21.  6월 : 운암지 야간경관개선 및 노후시설물 정비사업

□ 사업변경 내역

○ 2020년 예산 증액 : 당초 1,000백만원, 변경 1,200백만원)

(총사업비 : 3,000백만원 → 3,200백만원)

사업명

복현동 이룸고교 진입도로 건설

담당자

건설과 김민기

(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2021. 3월 장애학생 특성화고교인 이룸고교 개교에 맞추어 교내 진출입을       위한 진입도로를 개성하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 북구 복현동 300-9번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8~10m L=260m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,500		1,500	3,000	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘19.  5. : 실시설계 용역 시행

○ ’19 10. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ’19 11. : 보상계획열람 및 보상협의

□ 향후계획

○ ‘20. 6. : 지방토지수용위원회 수용재결 신청예정

○ 부족사업비 확보 후 공사 발주

사업명

피란민촌의 재탄생 어울림복현

담당자

도시재생과 박종민

(☎665-4276)

□ 사업목적 및 필요성

○ 복현1동 도시재생 뉴딜사업을 통한 주민 생활편의시설 증진 및 기초생활 인프라 공급, 노후불량건축물 재정비로 주거여건 개선하여 안전우려 불식

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)

○ 위 치 : 복현1동 484-34번지 일원(A=53,679㎡)

○ 규 모 : 어울림 가로정비 외 7건( 도시공사 추진사업 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 71,561백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계			1,335	17,178	53,048
국 비	4,750		1,149	2,641	960
시 도 비	3,325		40	1,493	1,792
시군구비	1,425		146	211	1,068
지 방 채	0		0
민간자본			0	7,319
기 타	0		0	5,514	49,228

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

마중물사업	복현어울림센터 건립	어울림가로정비	마을안심길 조성	복잡소 건립
추진단계	사업시행인가 완료 건축설계공모 진행중 보상 : `20. 11월 착공 : `21,상반기 내 준공 : `21. 12월	실시설계 발주 설계 : `20. 7월중 완료 착공 : `20. 8월 준공 : `20. 12월	어울림마당부지매입 스마트가로등설치 완료 설계 : `20. 9월 착공 : `20. 11월 준공 : `21. 11월	부지매입 : `20. 6월완료 설계 : `20. 10월 착공 : `20. 11월 준공 : `20. 11월
사업추진율	20%	30%	30%	30%
공기업참여 (대구도시공사)	쌈지기억공원	주거환경개선사업	공기업참여형 가로주택정비사업	주민역량강화사업 ( 마중물사업)
추진단계	`21. 2월설계용역착수 `21,10월 공사착공 `21.12월 공사준공	`20, 7 설계용역완료 `20. 7. 1, 사업시행인가 `20. 7.~ 보상 및 철거 `21. 10월 착공 `23. 9월 준공 (278세대 건설)	`19.1월 주민설명회 `19.7월 국토부승인 `20.9월 주민설명회 개최 예정	현장지원센터지원 도시재생마을대학 청년소셜리빙랩 복현유사 등 추진 주민공모사업진행
사업추진율	30%	30%	-	60%

□ 향후계획

○ 어울림가로정비 및 마을안심길 사업을 2020년 완료할 예정이며 금년도 공공건축물 신축 2개소(복현 어울림센터, 복잡소)에 대한 건축설계 공모가완료되어 공사착공과 2021년 준공을 목료로 예산편성을 요청한 상태이며

○ 대구도시공사에서 2020년 7월초 주거환경개선지구 사업시행인가를 받아 보상 ,지장물조사에 진행중이며, 공기업참여형가로주택정비사업의 원활한 추진을 위해 사업지구내 소유자와 설명회 개최 계획임

□ 사업변경 내역(대구광역시 북구)

○ 복잡소 조성 (도시재생 뉴딜사업 실행계획 변경)

구분	당 초	변 경
사업위치	복현동 573-11	복현동 484-87 외 4필지
사업면적	759㎡	904㎡
소 유 자	국유지(경북대학교)	사유지 (폐공가 3, 다세대 1)
사 업 비	4,083백만원	4,083백만원

사업명

조야동 마을단위 LPG소형저장탱크

보급사업

담당자

일자리정책과 이상율

(☎665-2083)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스가 공급되지 않는 조야동에 LPG 소형저장탱크와 배관망을 설치하여 액화석유가스 사용시 경제성, 안전성과 편리성을 향상하기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 12월 ～ 2020년 12월(1년 1개월)

○ 위 치 : 조야동 일원

○ 규 모 : 17개마을 494세대(사업 신청세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5100	-	-	2700	2400
국 비	2550			1350	1200
시 도 비	1020			540	480
시군구비	1020			540	480
지 방 채
민간자본	510			270	240
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 보급사업 및 소형저장탱크 설치부지 예산이 2019. 12월(3회추경) 확보됨에 따라 2019년에는 사업을 추진하지 못함.

□ 향후계획

○ 소형저장탱크 설치부지 매입                            : 2020년 5월

○ 한국LPG배관망사업단 업무위탁계약 체결                : 2020년 7월

○ 사업시행 및 준공                          : 2020년 7월～2021년 2월

□ 사업변경 내역

구 분	변경전	변경후	비고(변경사유)
사업기간	2년간(2019～2020년)	미정
1차사업(9개마을)	1년(2019년)	2년(2019～2021년2월)	사전컨설팅 및 사업비미확보
2차사업(8개마을)	1년(2020년)	2020. 9월 산자부신청	국회예산 심의과정에서 제외

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.