	금호강 오토캠핑장 조성
	담당 : 관광과 성명 김은경(☎665-2252)

Ⅰ		사업목적

□ 천혜의 자연환경을 갖추고 있는 금호강변 수변공간에 캠핑장 조성을 통해 다양한 볼거리 및 즐길거리를 제공하고, 향후 지역경제 활성화에 기여

Ⅱ		사업개요

□ 위    치 : 검단동 458-4번지 일원(금호강 1번 축구장 옆 )

□ 규    모 : L=237m, A= 9,655㎡

□ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 7. 22

□ 사 업 비 : 15억원(국비 5 / 시비 2.5 / 구비 3.5 / 특교세 4)

□ 사업내용 :

- 기반시설 : 부지조성, 상·하수도, 도로포장, 전기, 인터넷 등

- 주요시설 : 캠핑장(16면), 잔디식재, 관리동, 세척실, 화장실 샤워실 등

Ⅲ		추진상황

□ 2017.  1. 16. : 캠핑장 조성관련 계획수립

□ 2018.  2.  6. : 캠핑장 기본 및 실시설계 용역계약

□ 2018. 11. 28. : 캠핑장 하천점용 허가

□ 2018. 12. 31. : 캠핑장 운영 및 관리에 관한 조례 제정

□ 2019.  1. 31. ~ 7. 22 : 캠핑장 공사 착공 및 준공

□ 2019. 6. 20 ~ 8. 29 : 대구통합예약시스템 P/G 수정 용역 시행

□ 2019.  7.  1 : 캠핑장 기간제근로자 사역(5명)

□ 2019. 7. 16 ~ 8. 30 : 무료 공공와이파이 구축

□ 2019. 8. 19 : 캠핑장 하천점용공사 준공인가(부산 국토청)

□ 2019. 9. 20 : 캠핑장 개장 및 운영

Ⅳ		기대효과

□ 자연과 더불어 휴식과 체험, 삶의 풍요로움을 더할 수 있는 도심 속      주민 휴게공간의 제공으로 관광 북구의 이미지 제고

Ⅴ		현장사진