109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
기능복합(읍내동행정복지센터포함) 북구청소년 문화의 집 건립	8,224	1,219	4,712	2,259	0	2020	2017	100
관문동 행정복지센터 금호분소 신축	3,500	823	677	200	1,800	2022	2018	43
검단동 행정복지센터 신축	4,000	0	0	300	3,700	2023	2020	0
청사 내진보강사업	4,544	0	19	1,156	3,369	2025	2019	0.4
조야동 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업	5,100	0	2,700	2,400	0	2021	2021	60
칠성 종합시장 상권활성화	8,000	1,855	2,018.7	1970.3	2,156	2023년	2018년	48
칠성시장로 지하주차장 조성	9,533	0	0	502	9,031	2022년	2020년	15
행복북구 통합 가족센터 건립	4,300	0	121	904	3,275	2022	2019	30
2019 금호강 바람소리길 축제	1,775	1,085	0	290	400	계속	2021	100
무태조야동 복합문화시설건립	7,800	0	0	700	7,100	2023년	2020년	5
옥산로 테마거리 조성	5,650	850	1,300	2,700	800	2022	2019	50
산격동 20번지선 도로 건설	4,050	2,900	1,050	0	0	2021	2019	80
복현동 이룸고교 진입도로 건설	4,500	2,000	0	2,500	0	2022	2019	50
태전동 203-3번지선 도로건설	2,300	0	0	0	2,300	2023	2020	5
조야동 187번지선 도로건설	4,800	0	100	800	3,900	2023	2020	10
매천초교 주변 도로개설	2,860	1,900	0	0	960	2022	2020	30
태전동 화물자동차 공영차고지 조성	30,000	265	42	242	29,451	2022년	2017년	30
가산공원 지하공영 주차장 조성	3,600	0	87	35	3,478	2022년	2019년	30

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

기능복합(읍내동행정복지센터포함)북구청소년문화의집건립

담당자

재무과 김소형(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 양질의 대주민 서비스 제공 및 청소년 활동의 적극적인 진흥과 건전한 육성 등

다양한 행정수요에 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 3월 ~ 2020. 12월

○ 위 치 : 북구 칠곡중앙대로 561

○ 규 모 : 지상 5층, 대지 1,666㎡(504평), 연면적 2,979㎡(901평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,224백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,224	1,219	4,712	2,259
국 비	3,000	376	2,460	164
시 도 비	2,064		190	1,874
시군구비	3,160	843	2,062	221
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 3.       : 신축계획 수립

○ 2017. 4.       : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2017. 5.       : 공유재산관리계획 승인

○ 2017. 5.       : 용역과제심의위원회 승인

○ 2017. 9.        : 시행계획 수립

○ 2018. 1. ~ 4.   : 설계공모 및 입상작 선정

○ 2018. 5.       : 기본 및 실시설계 용역

○ 2018. 10. ~ 2018. 12. : 장애물없는 생활환경(BF) 인증 수행

○ 2019.  1. ~ 2019. 2.  : 2차 문화재시굴조사

○ 2019.  3. ~ 2019. 4.  : 문화재정밀발굴조사

○ 2019.  5. ~ 2019. 6.  : 市 감사실 계약심사

○ 2019.  8.  19.       : 착공

○ 2020. 12.  23.       : 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

관문동 행정복지센터 금호분소 신축

담당자

재무과 김소형(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호지구 개발에 따른 대량의 인구유입으로 지구 내 금호분소 청사를 신축하여 주민편의와 양질의 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 북구 사수동 907번지

○ 규 모 : 지상 2층, 대지 1,313.3㎡(397평), 연면적 660㎡(200평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,500	823	677	200	1,800
국 비
시 도 비
시군구비	3,500	823	677	200	1,800
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42.86%)

○ 2017. 10. 12.        : 신축기본계획 수립

○ 2017. 11. 20.        : 공유재산관리계획 심의 승인

○ 2018. 03. 22.        : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2018. 10. ~ 2020. 01. : 부지매입 완료(1,500백만원)

○ 2020. 11. 03.        : 시행계획 수립

○ 2020. 12. 14.        : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2021. 01. ~ 04.      : 설계 공모 및 입상작 선정

○ 2021. 05. ~ 11.     : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2021. 12.           : 공사 일상감사 및 계약심사

○ 2022. 01.           : 공사입찰 공고 적격심사, 계약

○ 2022. 02. ~ 12.     : 착공 및 준공(10개월간)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

검단동 행정복지센터 신축

담당자

재무과 김소형(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 검단동 행정복지센터 노후화에 따른 공공청사로서의 안전성 확보와 규모 협소에 따른 불편 해소 및 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10월 ~ 2023. 04월

○ 위 치 : 북구 검단동 1229-1 외 2개소

○ 규 모 : 지상 4층, 대지 1,648㎡(500평)정도, 연면적 990㎡(300평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000			300	3,700
국 비
시 도 비
시군구비	4,000			300	3,700
지 방 채
민간자본
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019. 10. 31.        : 신축기본계획 수립

○ 2019. 12. 17.        : 공유재산관리계획 심의 승인

○ 2020. 06. 10.        : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2020. 07. 27.        : 시행계획 수립

○ 2020. 09. 25.        : 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2020. 10. 22.        : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2020. 11. ~ 2021. 02. : 설계 공모 및 입상작 선정

○ 2021. 02.            : 공유재산심의 (인접부지 매입건)

○ 2021. 04. ~ 11.      : 기본 및 실시설계 용역

○ 2021. 06. ~ 07.      : 문화재 지표조사

□ 향후계획

○ 2021. 12.            : 공사 일상감사 및 계약심사

○ 2022. 01.            : 공사입찰 공고 적격심사, 계약

○ 2022. 02. ~ 2023. 04. : 착공 및 준공(14개월간)

구 분	변 경 전(2020년)	변 경 후(2021년)	비 고
사 업 비	4,000백만원	4,076백만원	76백만원↑
대지면적	1,450㎡(440평)정도	1,648㎡(500평)정도	198㎡(60평)↑
규 모	4층, 건축면적 290㎡, 연면적 990㎡		변동없음

□ 사업변경 내역

사업명

청사 내진보강사업

담당자

재무과 김소형(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년도 실시한 내진성능평가실시의 후속 조치로 내진보강공사가 필요한 청사에 적법한 내진공법을 적용하여 순차적으로 내진보강공사 실시

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 09월 ~ 2025. 12월

○ 위 치 : 구 본관, 침산2동 행정복지센터 외 6개소

○ 규 모 : 내진보강공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,544백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,544		19	1,156	3,369
국 비
시 도 비
시군구비	4,044		19	656	3,369
지 방 채
민간자본
기 타	500			500

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0.4%)

○ 2019. 09. 10.           : 내진보강공사 기본 계획 수립

○ 2019. 10. 28.           : 區 지방재정투자심사 승인

○ 침산2동 내진보강공사

- 2020. 9. ~ 10.        : 건축 구조 실시설계

- 2021. 2.              : 일상감사

- 2021. 3. 22. ~ 6. 31.  : 내진보강공사

○ 복현1동 내진보강공사

- 2020. 9. ~ 10.        : 건축 구조 실시설계

- 2021. 3. 22. ~ 5. 20.  : 내진보강공사

○ 태전2동 내진보강공사

- 2021. 2. 16. ~ 4. 21.  : 구조설계

- 2021. 5. 10. ~ 6. 28.  : 실시설계

- 2021. 8. ~ 12.        : 내진보강공사(4개월간)

□ 향후계획

○ 2022. : 복현2동, 태전1동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2023. : 관음동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2024. : 동천동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2025. : 구 본관 내진보강공사

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

조야동 마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업

담당자

일자리정책과 김강헌(☎665-2082)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스가 공급되지 않는 조야동에 LPG 소형저장탱크와 배관망을 설치하여 액화석유가스 사용시 경제성, 안전성과 편리성을 향상하기 위함.

□ 사업개요

○ 1차사업 추진개요

- 기 간 : 2020. 6. ~ 2021. 5.

- 위 치 : 조야동 북편마을 296세대

- 사업비 : 27억원(국13.5 시5.4 구5.4 자부담2.7)

- 내 용 : 소형저장탱크(2.45톤*2기*2곳), 겸용배관(2km), 가스보일러

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,100		2,700	2,400
국 비	2,550		1,350	1,200
시 도 비	1,020		540	480
시군구비	1,020		540	480
기 타	510		270(자부담)	240(자부담)

□ 추진상황(추진완료)

○ 저장탱크 및 세대별 가스배관 설치   : 2021. 4.  2.

○ 세대별 보일러 설치 완료 : 2021. 5. 20.

○ 가스공급 실시 : 2021. 5. 21.

□ 향후계획

○ 2차사업 추진

- 기 간 : 2021. 3. ~ 12.

- 위 치 : 조야동 남편 8개마을 174세대

- 사업비 : 24억원(국12 시4.8 구4.8 자부담2.4)

- 내 용 : 겸용배관(2km), 가스보일러, 가스누설경보기 등

사업명

칠성종합시장 상권활성화사업

담당자

민생경제과 지선형(☎665-2652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구도심 상권의 쇠퇴로 칠성종합시장 상권 내 전통시장, 골목상권 등

소상공인 생업기반이 약화된 칠성종합시장을 상업·업무·문화가 결합한

서비스 부가가치 창출의 핵심 거점 시장으로 육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2023년(5년간)

○ 위 치 : 칠성종합시장 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,000	1,855	2,018.7	1,970.3	2,156
국 비	4,000	927.5	1,121.5	873	1,078
시 도 비	1,799.2	370.75	448.6	548.65	431.2
시군구비	1,799.2	370.75	448.6	548.65	431.2
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	401.6	186	-	-	215.6
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 48%)

○ 2020년 기준 칠성종합시장 상권활성화 2차년도 사업 완료

○ 조형물 및 전자게시대 설치, 가로환경정비, 칼라조닝 및 디자인도색 등

□ 향후계획

○ 2023년까지 칠성종합시장 상권활성화사업 추진 예정

○ 청년집객테마시설 조성, 거리레스토랑 조성, 통합고객서비스센터 운영 등

□ 사업변경 내역

○ 2020~2021년 사업비 중 민자부담분은 코로나19로 인한 상인회의 자부담 능력 약화로 2021년 지방비로 편성

사업명

칠성시장로 지하주차장 조성

담당자

민생경제과 김기현(☎665-3182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장과 연계한 「칠성별빛광장」조성사업으로 인해 신천둔치 공영주차장면의 축소가 불가피함에 따라 칠성시장로 지하주차장을 조성하여 주차환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.~2022.12.

○ 위 치 : 칠성시장로(칠성전자주방시장, 삼성시장 하단) 하단(A=4,000m²)

○ 규 모 : 지하주차장 조성(110면 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,533백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,533			502	9,031
국 비	5,693			300	5,393
시 도 비	2,880			152	2,728
시군구비	960			50	910
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 15. 9. ~ 16. 9. 市신천개발 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

○ 16. 8.         市신천 프로젝트 시민토론회

○ 16.11.         市신천 생태·문화·관광 자원화 계획 보고

○ 16.12.         신천개발 기본계획 통보(→사업부서)

※ 칠성별빛광장 추진부서:市민생경제과, 북구 민생경제과

○ 17. 1.         신천개발협의회 구성

※ 4차례 협의회 개최(‘17.2.14./4.18./7.19./11.20)

○ 19. 1.         전통시장 및 상점가 활성화 지원사업 공고

(중소벤처기업부 공고 제2019-14호)

○ 19.12.         사업 선정

○ 20. 8.         市투자심사(결과 : 조건부 추진)

○ 20. 9.         국·시비 교부

사업명

칠성시장로 지하주차장 조성

담당자

민생경제과 김기현(☎665-3182)

○ 20.11.         투자심사 의견에 따른 사업규모 축소(200→110여면)

검토요청(市)

○ 21. 1.         공공건축 심의 완료 (區 건축주택과)

○ 21. 1.         [용역] 일상감사 (區) 완료 및 계약심사(市 건설산업과) 완료

○ 21. 1.         지방건설기술심의 [과업지시서](市 건설산업과) 완료

○ 21. 3.         가격입찰 전 사업수행능력(PQ) 평가 완료(23개 업체)

○ 21. 5. ~ 22. 2. 기본 및 실시설계 용역 시행

[(주)테마엔지니어링건축사무소]

□ 향후계획

○ 21. 6.         도시관리계획 중복변경

○ 21.10.         BF(Barrier Free) 예비 인증

○ 21.11.         [공사] 일상감사 (區) 및 계약심사(市)

○ 21.12. ~ 22.12. 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

사업내용	구분	사 업 규 모		사 유
		당 초	변 경
칠성시장로 지하주차장 조성	면적	7,000㎡	4,000㎡	□ 사업 신청시 건축물의 용도에 따른 적합한 공사비 기준 미적용 □ 현 예산 내에서는 건축물의 규모 및 주차대수 축소가 불가피함.
	주차대수	200대 정도	110대 정도

사업명

행복북구 통합 가족센터 건립

담당자

여성아동과 이성호(☎ 665-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 건강가정·다문화가족지원센터의 기능을 확대하여 다양한 가족에 대한       지역중심의 보편적 가족서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.~2022. 7.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 동천동 930-1

○ 규 모

- 대지면적 644.7㎡, 건축면적 386.3㎡, 연면적 1,666㎡

- 지하 1층~지상 5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,300		121	904	3,275
국 비	1,500		51	382	1,067
시 도 비	750		44	191	515
시군구비	2,050		26	331	1,693

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 9.    생활SOC 복합화 사업 선정 및 국비 가내시 통보

○ 2019. 10.   행복북구 통합 가족센터 건립 계획 수립

○ 2020. 2.    행복북구 통합 가족센터 건립 변경 계획 수립

○ 2020. 5.~9. 행복북구 통합 가족센터 건립공사 설계 공모

○ 2020. 10.~  행복북구 통합 가족센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2021. 8. 공사 발주

○ 2021. 8. 착공

○ 2021. 7. 준공

□ 사업변경 내역

	당초	변경	비고
사업규모	연면적 990㎡ (지상 4층)	연면적 1666㎡ (지하1층~지하5층)	연면적 676㎡ 증가
총사업비	3,500백만원	4,300백만원	8억 증가(구비)

사업명

2020 금호강 바람소리길 축제

담당자

문화예술과

이효영(☎665-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강이라는 생태자원을 배경으로 북구민의 축제한마당

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 가을중 2일

○ 위 치 : 산격대교 하단 문화광장 일원

○ 규 모 : 참가인원 5만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :       1,775백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,775	1,085	0	290	400
국 비
시 도 비
시군구비	1,775	1,085	0	290	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020년 코로나19 확산방지를 위해 축제 취소

□ 향후계획

○ 예비문화관광축제 지정 이후 첫 시행되는 제7회 축제의 성공적 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

무태조야동 복합문화시설건립

담당자

문화예술과

조순이(☎665-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 독서문화 활성화 및 어르신의 행복한 여가활동을 위한 복합       문화공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023.

○ 위 치 : 서변동 1747번지(서변근린공원 내)

○ 규 모 : 건축면적 580㎡, 연면적 2,600㎡(지상4층, 지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,800			700	7,100
국 비	2,640			200	2,440
시 도 비	1,980			150	1,830
시군구비	3,180			350	2,830
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○2021. 6. : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○2021. 7. : 설계 공모

□ 향후계획

○ 2021. 11. ~ 2022. 9. : 기본 및 실시설게 용역

○ 2022. 10. ~ 2023. 12. : 건립 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥산로 테마거리 조성

담당자

도시행정과 정윤지(☎665-2334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도 3호선 및 삼성창조캠퍼스 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로 및 호암로 일대를 명품거리로 조성.

○ 우리구 근대산업역사에 대한 스토리텔링과 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년(예정)

○ 위 치 : 옥산로~호암로 일원(북구청네거리~삼성창조캠퍼스)

○ 규 모 : L=1.6Km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,650백만원(지중화사업비 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,650	850	1,300	2,700	800
국 비
시 도 비	4,000	700	1,000	1,500	800
시군구비	650	150	300	200
지 방 채
민간자본	1,000			1,000
기 타

※ 지중화 사업비 : 약 2,000백만원(한전·통신 1,000 / 시비 500 / 구비 500)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50 %)

○ 2018.  4. 30. ~ 2019. 12. 4. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2019.  6. 25. : 주민설명회 개최

○ 2019. 12. 20. : 토목·조경 공사 착공(공사기간 2년)

○ 2020.  2. 12. : 전기 공사 착공(공사기간 2년)

□ 향후계획

○ 2022. 3. : 전체 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 4,900백만원 → 현재 5,650백만원

- 사유 : 투자심사 당시 가설계금액으로 사업비를 산정하였으나 지중화사업 실시설계 완료 후 사업비 증가됨

○ 사업기간 : 당초 2021일 12월 준공예정 → 현재 2022년 3월 준공예정

- 사유 : 코로나19 확산방지 및 장마로 인한 공사중지

사업명

산격동 20번지선 도로건설

(검단공단지역 접근망 개선)

담당자

건설과 김현우(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유통단지와 검단공단이 위치하여 중소규모 기업체가 밀집되어 있으나,

공단 진출입로가 취약하여 차량통행 및 기업활동 불편

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2021.

○ 위 치 : 산격동 20번지선

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,050	2,900	1,150
국 비
시 도 비
시군구비	4,050	2,900	1,150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘17. 10. : 실시설계 용역 시행

○ ’18.  3. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ‘18.  5. : 보상계획 열람공 및 1차 보상협의

○ ‘19. 10. : 1차 공사완료

○ ‘19. 11. : 2차 보상협의

□ 향후계획

○ ‘21. 7. : 2차 공사시행

사업명

복현동 이룸고교진입도로 건설

담당자

건설과 김현우(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2021. 3월 장애학생 특성화고교인 이룸고교 개교에 맞추어 교내 진출입을       위한 진입도로르 개설하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 복현동 300-9번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8~10m, L=260m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,500	2,000		2,500
국 비
시 도 비
시군구비	4,500	2,000		2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ ‘19.  5. : 실시설계 용역 시행

○ ’19. 10. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ’19. 11. : 보상계획열람 및 보상협의

□ 향후계획

○ ‘21. 7. ~ ’22. 7. : 공사 착공 및 준공

사업명

태전동 203-3번지선 도로건설

담당자

건설과 김현우(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 내 일부 미집행 구간으로 도로 및 하수관로가 정비되지 않아       우수기 주변지역 침수로 다수 민원이 발생하여 도로개설을 통하여 주민       생활여건을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2023.

○ 위 치 : 태전동 203—3번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300				2,300
국 비
시 도 비
시군구비	2,300				2,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 보상 및 공사 시행

사업명

조야동 187번지선 도로건설

담당자

건설과 김현우(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 지정으로 생활에 불편을 겪고 있는 주민에게 미개설된

도시계획도로를 건설하여 주민불편사항을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 조야동 187번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6m, L=691m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800		100	800	3,900
국 비
시 도 비
시군구비	4,800		100	800	3,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘19.  8. : 실시설계 용역 시행

○ ’20.  2. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ’20.  2. : 보상계획 열람 및 보상협의

○ ’20.  9. : 21년도 개발제한구역 주민지원사업 결정(800백만원)

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 추가 보상 및 공사 시행

사업명

매천초교 주변 도로개설

담당자

건설과 김현우(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후주택 밀집지역 내 도로개설을 통한 주민의 주거환경 개선 및        지역개발을 촉진하고, 매천초교 등하교 학생의 통학 안전을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 매천동 179번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~8m, L=320m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,860	1,900			960
국 비
시 도 비
시군구비	2,860	1,900			960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘19.  6. : 실시설계 용역 시행

○ ’20.  1. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ’20.  6. : 보상계획 열람 및 보상협의

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 추가 보상 및 공사 시행

사업명

태전동 화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통과 손용우(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 차고지 부족해소, 지역 화물업계 종사자 공공복리 증진 및 화물운수사업        발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 북구 태전동 43번지 외 49필지

○ 규 모 : 공영차고지 조성 A=33,588㎡, 주차면수 480면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,000	265	42	242	29,451
국 비	400	141	29	169	61
시 도 비	26,600	41	8	48	26,503
시군구비	3,000	83	4	25	2,887

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 : 2017. 7.

○ 화물자동차 공영차고지 조성 계획 : 2017. 8.

○ 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수 : 2019. 4. ~ 6.

○ 대구시 도시계획위원회 심의 : 2019.11.28.

○ 제23회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경) : 2020. 11. 19.

○ GB관리계획 변경 승인 통보(국토부→대구시) : 2020. 11. 25.

○ 대구광역시 도시계획위원회 심의(원안 가결) : 2021. 6. 17.

□ 향후계획

○ 도시관리계획 인가고시 : 2021. 11.

○ 토지 보상 : 2021. 11. ~

○ 공사 시행 : 2022. ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

가산공원 지하공영주차장 조성사업

담당자

교통과 손용우(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관음동 주택밀집 지역의 주차난 해소를 위해 가산공원 지하 공영주차장을       조성하고, 공원을 재정비하여 주민 편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 북구 관음동 1358-4번지

○ 규 모 : A=1,975㎡정도[지상(공원), 지하(주차장)], 주차면 53면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,600	0	87	35	3,478
국 비	1,800	0	43	19	1,738
시 도 비	900	0	22	8	870
시군구비	900	0	22	8	870

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 가산공원 지하공영주차장 조성계획 수립 : 2019.2.

○ 구 자체 지방재정 투자심사 : 2019.5.

○ 2020년도 생활SOC(주차환경개선지원) 사업 선정 : 2019.8.

○ 가산공원 지하공영주차장 조성사업 관련 용역 착수 : 2020. 2.

○ 제255회 대구광역시 북구의회 제1차 정례회 : 2020. 6. 12.

○ 제280회 대구시의회 임시회 : 2021. 2. 2.

○ 2021년 제1회 지구단위계획 공동위원회, 도시계획위원회 심의 : 2021. 2.

○ 2021년 제2회 대구광역시 공유재산심의회 심의 : 2021. 2.

○ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 작성 고시 : 2021. 4.

□ 향후계획

○ 도시관리계획 인가고시 : 2021. 11.

○ 공사 시행 : 2022. ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.