	자연을 담고 마음을 나누는 침산에 반하다
	담당 : 도시재생과 김병수(☎665-2622)

Ⅰ		사업목적

□ 침산공원과 연계한 Eco클러스터 구축 및 국유지를 활용한 행복주택 건립, 보행환경 개선을       위한 도로개설로 지역 활성화 및 정주여건 개선

Ⅱ		사업개요

□위치 : 북구 침산동 1660-4번지 일원(106,766㎡)

□사업비 : 225.9억원(’18∼’22)

□단위사업

- 자연과 어울린 “행복마을” : Eco클러스트 조성 및 운영, Eco주차장 조성,

유니버셜가로 조성, 어울거리 및 그린노을길 조성

- 어디서나 안전한 “행복마을” : 집수리사업, 행복나눔가로조성, 침산안심가로조성

- 함께하고 나누는 “공동체마을” : 복합커뮤니티센터건립, 행복나눔주택조성, 공동체마을쉼터조성,

Eco클러스터운영, 나눔공방운영, 도시재생대학운영,

나눔마을 건강교실, 현장지원센터운영, 주민공모사업

Ⅲ		추진상황

□ 추진실적(2017년 ~ 2020년)

- 2017. 12. 14. : ’17년도 도시재생 뉴딜 시범사업 선정

- 2018.  5.  8. : 도시재생 선도지역 지정

- 2018.  7. 13. : 사업실현가능성 및 타당성 통과

- 2018.  8. 10. : 도시재생활성화계획 고시

- 2019.  9. 30. : 도시재생활성화계획 변경 1차 고시

- 2020. 3. ~ 9. : 1차 집수리사업(19가구) 공사완료

- 2020. 11. 17. : 마을관리협동조합 창립

□추진계획

- 2021. 1.     : 도시재생활성화계획 변경(경미한 변경)

- 2021. 3.     : 공동체마을쉼터(오봉경로당 리모델링) 공사 준공

- 2021. 1. ~ 6. : 행복나눔가로 조성 공사

- 2021. 1. ~ 10. : 2차 집수리사업(21가구) 공사

- 2021. 1. ~ 12. : 어울거리 조성 공사

- 2021. 3. ~ 12. : Eco클러스터 조성사업 공사

- 2021. 5. ~ 11. : 유니버셜가로 조성 공사

- 2021. 5. ~ 11. : 침산안심가로 조성 공사

- 2021. 5. ~ 11. : 그린노을길 조성 공사

- 2021. 6. ~ 12. : Eco주차장 조성 공사

- 2021. 1. ~ 12. : 도시재생현장지원센터 프로그램사업 실시

- 2021. 1. ~ 2022. 12. : 행복나눔주택 조성 공사

- 2021. 8. ~ 2022. 10. : 복합커뮤니티센터 건립 공사

Ⅳ		기대효과

□ 사업기간 내 인구유입, 일자리창출, 마을주민 소득 증대 기대

□ 행복주택, 주차장 공급 등 주거환경 개선

□ CCTV, 유니버셜가로 조성, 소방도로 확충 등 안심마을 조성

□ 도시재생대학, 경제적활성화조직 컨설팅 및 교육을 통한 도시재생전문인력 양성

Ⅴ		위치도 및 사업계획도