109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
관문동 행정복지센터 금호분소 신축	4,300	1,500	16	2,784	0	2022	2018	43%
검단동 행정복지센터 신축	4,076	-	159	3,180	719	2023	2020	0%
청사 내진보강사업	4,544	19	473	775	1,494	2025	2019	0.4%
칠성 종합시장 상권활성화	8,000	3,874	1970	1,183	974	2023	2018	60%
칠성시장로 지하주차장 조성	9,533	-	-	5,033	4,500	2023	2020	10%
행복북구 통합 가족센터 건립	4,300	121	110	3,500	569	2023	2022	25%
우리동네 개울가 꿈놀이, 물놀이장조성	2,570	-	10	1,700	860	2023	2020	50%
2021금호강 바람소리길 축제	1,807	1,085	2	320	400	계속	2021	100%
무태조야동 복합문화시설 건립	7,800	0	35	6,665	1,100	2024	2020	30%
옥산로 테마거리 조성사업	6,190	1,359	2,800	2,031	0	2022	2019	95%
복현동 이룸고교 진입도로 건설	4,500	2,000	2,500	-	-	2022	2019	70%
태전동 203-3번지선 도로건설	2,300	-	-	-	2,300	2025	2020	5%
조야동 187번지선 도로건설	4,800	100	800	760	3,140	2025	2020	25%
매천초교 주변 도로개설	2,860	1,900	-	-	960	2022	2020	70%
읍내동 468-24번지선 도로건설	2,200	-	-	-	2,200	2025	2021	5%
피란민촌의 재탄생, 어울림마당 복현	9,500	3,733	1,292	2,201	2,274	2023	2019	65
금호강 사수지역 체육시설 조성공사	2,500	-	-	-	-	2024	2021	0
태전동 화물자동차 공영차고지 조성	41,000	307	563	15,747	24,383	2023년	2017,2021년	40%
가산공원 지하공영 주차장 조성	3,600	87	9	1,000	2,504	2023년	2019년	40%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2021년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

관문동 행정복지센터 금호분소 신축

담당자

재무과 이해진(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호지구 개발에 따른 대량의 인구유입으로 지구 내 금호분소 청사를 신축하여 주민편의와 양질의 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 북구 사수동 907번지

○ 규 모 : 지하1층/지상2층 (대지면적 1,313.3㎡, 연면적 831.78㎡(252평))

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,300	1500	16	2,784
시군구비	4,300	1500	16	2,784

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 추진중)

○ 2017. 10. 12.        : 신축기본계획 수립

○ 2017. 11. 20.        : 공유재산관리계획 심의 승인

○ 2018. 03. 22.        : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2018. 10. ~ 2020. 01. : 부지매입 완료(1,500백만원)

○ 2020. 11. 03.        : 시행계획 수립

○ 2020. 12. 14.        : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2021. 01. ~ 04.      : 설계 공모 및 입상작 선정

○ 2021. 05. 21.       : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 08. 24.         : 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청

○ 2022. 01. ~ 03.      : 설계의 안전성 검토

○ 2022. 02. 09.        : 설계용역 완료

○ 2022. 03. 04.        : 공사 일상감사 및 계약심사 결과 통보

○ 2022. 04. 05.        : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. 30.        : 공사준공

□ 사업변경 내역

구 분	변 경 전(2021년)	변 경 후(2022년)	비 고
사 업 비	3,500백만원	4,300백만원	800백만원↑
대지면적	대지면적 1,313.3㎡		변동없음
규 모	지상2층, 연면적 660㎡	지하1/지상2층, 연면적 831.78㎡	171.78㎡↑

사업명

검단동 행정복지센터 신축

담당자

재무과 이해진(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 검단동 행정복지센터 노후화에 따른 공공청사로서의 안전성 확보와 규모 협소에 따른 불편 해소 및 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10월 ~ 2023. 04월

○ 위 치 : 북구 검단동 1229-1 외 2개소

○ 규 모 : 지상 4층, 대지면적 1,710㎡(517평), 연면적 1,077.32㎡(325평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,076		159	3,180	719
시군구비	4,076		159	3,180	719

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사 추진중)

○ 2019. 10. 31.         : 신축기본계획 수립

○ 2019. 12. 17.         : 공유재산관리계획 심의 승인

○ 2020. 06. 10.         : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2020. 07. 27.         : 시행계획 수립

○ 2020. 09. 25.         : 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2020. 10. 22.         : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2020. 11. ~ 2021. 02.  : 설계 공모 및 입상작 선정

○ 2021. 02.             : 공유재산심의 (인접부지 매입건)

○ 2021. 04. ~ 11.       : 기본 및 실시설계 용역

○ 2021. 06. ~ 07.       : 문화재 지표조사

○ 2021.  7. 20.	: 인접부지 매입 (검단동 1229-3, 4번지)

○ 2021.  8.  2. ~ 8. 31.	: 문화재 시굴조사 용역

○ 2021. 10.  5. ~ 11. 3.	: 문화재 발굴조사 용역

○ 2021. 12. 20.	: 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 발급

○ 2022.  1.  4.	: 공사 일상감사 및 계약심사 요청

○ 2022.  1.  5.	: 설계의 안전성 검토 용역 착수

○ 2022.  1. 10.	: 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2022.  1. 21.	: 공사 일상감사 및 계약심사 결과 통보

○ 2022.  3. 11.	: 공사착공

□ 향후계획

○ 2023.  4.  4.	: 공사준공

구 분	변 경 전(2020년)	변 경 후(2021년)	비 고
사 업 비	4,000백만원	4,076백만원	76백만원↑
대지면적	1,450㎡(440평)	1,710㎡(517평)	260㎡(77평)↑
규 모	4층, 연면적 990㎡	4층, 연면적 1,077.32㎡	87.32㎡↑

□ 사업변경 내역

사업명

청사 내진보강사업

담당자

재무과 이해진(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년도 실시한 내진성능평가실시의 후속 조치로 내진보강공사가 필요한 청사에 적법한 내진공법을 적용하여 순차적으로 내진보강공사 실시

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 09월 ~ 2025. 12월

○ 위 치 : 구 본관, 침산2동 행정복지센터 외 6개소

○ 규 모 : 내진보강공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,544백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,544	19	473	775	1,494
시군구비	4,544	19	473	775	1,494

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 태전2동 내진보강공사 추진 완료)

○ 2019. 09. 10.           : 내진보강공사 기본 계획 수립

○ 2019. 10. 28.           : 區 지방재정투자심사 승인

○ 침산2동 내진보강공사

- 2020. 9. ~ 10.        : 건축 구조 실시설계

- 2021. 2.              : 일상감사

- 2021. 3. 22. ~ 6. 31.  : 내진보강공사

○ 복현1동 내진보강공사

- 2020. 9. ~ 10.        : 건축 구조 실시설계

- 2021. 3. 22. ~ 5. 20.  : 내진보강공사

○ 태전2동 내진보강공사

- 2021. 2. 16. ~ 4. 21.  : 구조설계

- 2021. 5. 10. ~ 6. 28.  : 실시설계

- 2021. 9. 1. ~ 22. 2. 11.  : 내진보강공사

□ 향후계획

○ 2022. : 복현2동, 태전1동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2023. : 관음동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2024. : 동천동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2025. : 구 본관 내진보강공사

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

칠성종합시장 상권활성화사업

담당자

민생경제과 류승국(☎665-2654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구도심 상권의 쇠퇴로 칠성종합시장 상권 내 전통시장, 골목상권 등

소상공인 생업기반이 약화된 칠성종합시장을 상업·업무·문화가 결합한

서비스 부가가치 창출의 핵심 거점 시장으로 육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2023년(5년간)

○ 위 치 : 칠성종합시장 일원

○ 규 모 : 132,890㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,000	3,873.7	1,970.3	1,182.5	973.5
국 비	4,000	2,049	873	591.25	486.75
시 도 비	1,799.2	819.35	548.65	236.5	194.7
시군구비	1,799.2	819.35	548.65	236.5	194.7
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	401.6	186	-	118.25	97.35
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2021년 기준 칠성종합시장 상권활성화 3차년도 사업 완료

○ 통합테마존 조성, 통합고객서비스센터 운영, 상권닥터 컨설팅단 운영, 7Star 서포터즈 운영, 상인커뮤니티 운영지원, 상품진열개선(VMD) 등

□ 향후계획

○ 2023년까지 칠성종합시장 상권활성화사업 추진 예정

○ 통합테마존 조성 및 운영, 상품진열개선(VMD), 통합고객서비스센터 운영 등

□ 사업변경 내역

○ 3개과업(청년집객테마시설, 완구문구거리, 그로서란트 조성)을 “통합테마존 조성”으로 변경

사업명

칠성시장로 지하주차장 조성

담당자

민생경제과 김기현(☎665-3182)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠성시장 이용객의 주차공간 확보 및 시장 내의 불법주정차 완화 목적

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 북구 칠성동2가 409-24번지 도로 하단

○ 규 모 : 지하1층(연면적 : 4000㎡, 주차대수 : 110대 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,553백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,533			5,033	4,500
국 비	5,693			2,993	2,700
시 도 비	2,880			1,530	1,350
시군구비	960			510	450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 市 투자심사 (2020. 8.)

○ 기본 및 실시설계 용역 (2021. 5. ~ 2022. 7.)

□ 향후계획

○ 도시관리계획 중복변경 결정 (2022. 7.)

○ 착공 (2022. 8.)

○ 준공 (2023.12.)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : 연면적 7,000㎡, 주차대수 200대 정도 ⇒ 연면적 4,000㎡, 주차대수 110대 정도

사업명

행복북구 통합 가족센터 건립

담당자

여성아동과 이성호(☎ 665-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 건강가정·다문화가족지원센터의 기능을 확대하여 다양한 가족에 대한       지역중심의 보편적 가족서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 2.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 동천동 930-1

○ 규 모

- 대지면적 644.7㎡, 건축면적 386.3㎡, 연면적 1,661.69㎡

- 지하 1층~지상 5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,300	121	110	3,618	451
국 비	1,500	51	47	1,200	102
시 도 비	750	26	24	515	85
시군구비	1,750	44	39	1,693	174
기타(특교세)	300			210	90

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘19. 10.           : 생활SOC복합화 사업 공모선정

○ ‘19. 12.           : 지방재정투자심사(대구시)

○ ‘20.  1. ∼ ‘20.  5. : 공공건축 사업계획 사전검토, 일상감사 및 계약심사

○ ‘20.  5. ∼ ‘20.  9. : 건축설계 공모 및 심사

○ ‘20. 10. ∼ ‘21. 11. : 기본 및 실시설계 용역

○ ‘22.  1. ∼ ‘23.  3. : 공사 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 2023. 3. 준공

□ 사업변경 내역

	당초	변경	비고
사업규모	연면적 990㎡ (지상 4층)	연면적 1661㎡ (지하1층~지하5층)	연면적 671㎡ 증가
총사업비	3,500백만원	4,300백만원	8억 증액

사업명

우리동네 개울가 꿈놀이,

물놀이장 조성

담당자

여성아동과 이성호(☎ 665-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이공원 노후화 및 동서변지구 일대의 물놀이시설 부족으로 친수시설 요구 증가

○ 미세먼지, 폭염 등 기후변화로 인한 실내놀이시설 필요성 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 서변동 1764번지 일원

○ 규 모 : 지하1층~지상1층 (연면적 약400㎡)

(실내) 공중그물놀이, 볼풀장, 구조물놀이대, 물놀이대 등

(실외) 물놀이터 조성, 에너지놀이터 조성, 피크닉장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,570백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,570		10	1,700	860
국 비
시 도 비
시군구비	2,570		10	1,700	860
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

(실내놀이터)

○ ‘22. 03. 02. ~ 03. 18. : 놀이시설 제안 입찰공고

○ ‘22. 03. 28.          : 제안서평가위원회 개최

○ ’22. 05.     ~ 12.    : 공사 시행

(실외놀이터)

○ ’21. 03.   ~   11.   : 실시설계 용역

○ ’21. 11.             : 공원조성계획 결정(변경), 일상감사 및 계약심사

○ ’22. 03.   ~   07.   : 공사 시행

□ 향후계획

○ ’22.  7. 20. ~     : 실외놀이터 운영

○ ’22. 11.     ~     : 실내놀이터 시범운영

사업명

2021 금호강 바람소리길 축제

담당자

문화예술과

이효영(☎665-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강이라는 생태자원을 배경으로 북구민의 축제한마당

□ 사업개요

○ 기 간 : 매년 가을중 2일

○ 위 치 : 산격대교 하단 문화광장 일원

○ 규 모 : 참가인원 5만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	집행액		향후 소요액
	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2	320	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 코로나19 확산방지를 위해 축제 취소

□ 향후계획

○ 예비문화관광축제 지정 이후 첫 시행되는 2022년 축제의 성공적 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

무태조야동 복합문화시설 건립

담당자

문화예술과

남영보(☎665-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 독서문화 활성화 및 어르신의 행복한 여가활동을 위한 복합       문화공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 서변동 1747번지(서변근린공원 내)

○ 규 모 : 건축면적 580㎡, 연면적 2,650㎡(지상4층, 지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,800	-	35	6,700	3,100
국 비	2,640	-	10	2,240	400
시 도 비	1,980	-	7	1,680	300
시군구비	5,180	-	18	2,780	2,400
지 방 채	-	-	-		-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021. 11. ~ 2022. 8. : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후계획

○ 2022. 9. : 공사 일상감사 및 계약심사

○ 2022. 10. ~ 2024. 2. : 건립 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

옥산로 테마거리 조성사업

담당자

도시행정과 정윤지(☎665-2334)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시철도 3호선 및 삼성창조캠퍼스 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로 및 호암로 일대를 명품거리로 조성.

○ 우리구 근대산업역사에 대한 스토리텔링과 공공디자인을 거리에 입혀 관광자원화함으로써 지역경제 활성화 및 도시브랜드 가치 향상.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 옥산로~호암로 일원(북구청네거리~삼성창조캠퍼스)

○ 규 모 : L=1.6Km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,190	1,359	2,800	2,031	0
시 도 비
시군구비	4,830	1,359	1,440	2,031	0
민간자본	1,360		1,360
기 타

※ 지중화 사업비 : 약 2,720백만원(한전·통신 1,360 / 시비 680 / 구비 680)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2018.  4. 30. ∼ 2019. 12. 4. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2019.  6. 25. : 주민설명회 개최

○ 2019. 12. 20. ~ 2021.  3. 19. : 토목·조경공사 1차분 시행

○ 2020.  2. 12. ~ 2021.  2.  3. : 전기공사 1차분 시행

○ 2021.  4. 23. : 토목·조경공사 2차분 착공

○ 2021.  5.  6. : 전기공사 2차분 착공

○ 2021.  5. 10. ~ 2022.  5. 20. : 고성북로10길 지중화사업 시행

○ 2021.  6.  2. : CCTV 구매설치 시행

□ 향후계획

○ 2022.  10. : 전체 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 4,900백만원 → 현재 6,190백만원

- 사유 : 투자심사 당시 가설계금액으로 사업비를 산정하였으나 지중화사업 실시설계 완료 후 사업비 증가됨

(당초)                                                    (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년 이전	2020년	2021년	비 고
계	4,900	850	3,550	500
시 비	3,812 (공사비 3,500 지중화 312)	700 (공사비)	2,612 (공사비 2,300 지중화 312)	500 (공사비)
구 비	463 (설계비 150 지중화 313)	150 (설계비)	313 (지중화)	-
기 타	625 (지중화)	-	625 (지중화)	-	공중선 사업자

(변경)                                                    (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2019년 이전	2020년	2021년	2022년	비 고
계	6,190	850	1,300	3,060	980
시 비	4,000 (공사비 3,320 지중화 680)	700 (공사비)	1,000 (공사비)	1,500 (공사비 1,000 지중화 500)	800 (공사비 620 지중화 180)
구 비	830 (설계비 150 지중화 680)	150 (설계비)	300 (지중화)	200 (지중화)	180 (지중화)
기 타	1,360 (지중화)	-	-	1,360 (지중화)	-	공중선 사업자

○ 사업기간 : 당초 2021년 12월 준공예정 → 현재 2022년 10월 준공

- 사유 : 코로나19 확산방지 및 한전 지중화사업 시행에 따른 공사중지

사업명

복현동 이룸고교진입도로 건설

담당자

건설과 김태진(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장애학생 특성화고교인 이룸고등학교 개교에 따른 진출로 확보를 위해 도로를 건설코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 :  2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 북구 복현동 300-9번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8~10m, L=260m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,500	2,000	2,500	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘19.  5. : 실시설계 용역 시행

○ ’19. 10. : 실시계획 열람공고 및 고시

○ ’19. 11. : 보상계획열람 및 보상협의

○ ‘21.  7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘23. 2. : 공사 준공

사업명

태전동 203-3번지선 도로건설

담당자

건설과 김태진(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 내 일부 미집행 구간으로 도로 및 하수관로가 정비되지 않아       우수기 주변지역 침수로 다수 민원이 발생하여 도로개설을 통하여 주민       생활여건을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2025.

○ 위 치 : 태전동 203—3번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	-	-	-	2,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 보상 및 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 예산 미확보에 따른 사업기간 변경(당초 ’22년까지 → 변경 ‘25년까지)

사업명

조야동 187번지선 도로건설

담당자

건설과 김태진(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 지정으로 생활에 불편을 겪고 있는 주민에게 미개설된 도시계획도로를 건설하여 주민불편사항을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 조야동 187번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6m, L=691m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,800	100	800	760	3,140
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ ‘21. 2. ~ ‘22. 9. : 보상협의(1차)

□ 향후계획

○ ‘22. 10. ~ ‘22. 12. : 1차 공사 시행

○ ’23. ~ : 부족사업비 확보 후 잔여구간 보상 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 예산 미확보에 따른 사업기간 변경(당초 ’22년까지 → 변경 ‘25년까지)

사업명

매천초교 주변 도로개설

담당자

건설과 김태진(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후주택 밀집지역 내 도로개설을 통한 주민의 주거환경 개선 및        지역개발을 촉진하고, 매천초교 등하교 학생의 통학 안전을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 매천동 179번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~8m, L=320m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,860	1,900	-	-	960
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ ‘20. 7. ~ ‘22. 9. : 보상협의 및 도시관리계획(변경) 결정

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 예산 미확보에 따른 사업기간 변경(당초 ’21년까지 → 변경 ‘23년까지)

사업명

읍내동 468-24번지선 도로건설

담당자

건설과 김태진(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후주택 밀집지역 내 도로개설을 통한 주민의 주거환경 개선 및 지역개발을 촉진코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 읍내동 468-24번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=10m, L=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,200				2,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

□ 향후계획

○ 부족사업비 확보 후 보상 및 공사시행

사업명

피란민촌의 재탄생 어울림마당 복현

담당자

도시재생과 장호경(☎665-4272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무허가 건축물 등 노후불량건축물의 밀집으로 주거환경이 극히 열악한

복현동 일원에 안전우려 무허가건축물 재정비, 주민자생경제 육성, 기초생활       인프라 공급 등으로 마을공동체 회복

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023 (5년간)

○ 위 치 : 복현1동 484-34번지 일원

○ 규 모 : 53,679㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,500	3,733	1,292	2,201	2,274
국 비	4,750	2,342	743	1,061	604
시 도 비	3,325	1,109	365	721	1,130
시군구비	1,425	282	184	419	540
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 어울림가로정비 조성 사업 추진중 : 80%(착공)

○ 마을안심길 조성 사업 추진중 : 80%(착공)

○ 복현어울림센터 조성 사업 추진중 : 30%(부지변경에 따른 협의)

○ 복잡소 조성 사업 추진중 : 60%(기본 및 실시설계 용역)

○ 주민역량사업 추진중 : 75%(계속사업)

□ 향후계획

○ 어울림가로정비 조성 사업 준공 : 2022. 4월

○ 마을안심길 조성 사업 준공 : 2022. 4월

○ 복현어울림센터 조성 사업

- 기본 및 실시설계 용역 : 2022. 1. ~ 6월

- 일상감사 및 시 계약심사 : 2022. 7. ~ 8월

- 공사 착공 및 준공 : 2022. 9. ~ 2023. 12월

○ 복잡소 조성 사업 공사 착공 및 준공 : 2022. 1 ~ 2023. 12월

□ 사업변경 내역

○ 복현1동 도시재생 실시계획 변경 국토교통부 승인 : 2021. 12월

구분	기존 계획	계획 변경
사업기간	2019~2021(3년간)	2019~2023(5년간)
사 업 비	9,500백만원	10,667백만원
사업규모	아래 세부사업 참고

○ 어울림가로정비 조성 사업

기존 계획	계획 변경
․12억원	․9.6억원
․청년 친화형 보행환경 조성(HW) 4억원	․청년 친화형 보행환경 조성(HW) 0.6억원
․경관개선 3개소(HW) 2.5억원	․경관개선 3개소(HW) 3.5억원
․공공조형물(HW) 0.5억원	․공공조형물(HW) 0.5억원
․전주 지중화(HW) 5억원[지자체별도사업] (지자체2.5+한전2.5)	․전주 지중화(HW) 5억원[지자체별도사업] (지자체2.5+한전2.5)

○ 마을안심길 조성 사업

기존 계획	계획 변경
․17.90억원	․14.80억원
․스마트가로등 설치 4억원	․스마트가로등 설치 4억원
․골목길 정비 3.8억원	․골목길 정비 0.7억원
․어울림 마당 10.10억원	․어울림 마당 10.10억원

○ 복현어울림센터 조성 사업

구분	기존 계획	계획 변경
사업위치	복현동 615-4외 3개 필지	복현동 484-87외 1개 필지
토지매입	대구도시공사 무상제공	복잡소 부지 일부 사용
사업규모	지상 4층	지상4층
사업방식	신축	신축
대지면적	800㎡	400㎡
연 면 적	800㎡	640㎡
예 산	38.29억원	20.29억원
공간구성	(1층)건강관리센터,마을협동조합 (2층)다목적 연습실, 사랑방 (3층)어울림배움터 (4층)현장지원센터	(1층)필로티주차장(연면적에서 제외) (2층)건강관리센터,마을협동조합(현장지원센터) (3층)다목적 연습실,사랑방 (4층)어울림배움터 ※현장지원센터는 마을협동조합 운영 전까지 한시적 운영

○ 복현어울림센터 조성 사업

구분	기존계획	계획 변경
사업위치	복현동 484-87외 4개 필지	복현동 484-88외 4개 필지
사업방식	신축	신축
대지면적	904㎡	808㎡
연 면 적	830㎡	750㎡
예 산	40.83억원	50.33억원
공간구성	(1층)상생협력공간(엄마밥집 등) (2층)문화콘텐츠플랫폼 (3층)Co-working 공간 (4층~5층)오피스공간	1층)상생협력공간(엄마밥집 등) (2층)문화콘텐츠플랫폼 (3층)Co-working 공간 (4층)오피스공간

사업명

금호강 사수지역 체육시설 조성공사

담당자

체육진흥과 이경진(☎665-3954)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들의 삶의 질 향상 및 생활체육 활성화 기반조성

○ 균형있는 공공체육 서비스 제공을 통한 구민의 여가활동에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2024. 2.

○ 위 치 : 북구 금호동 406번지 일원(금호대교~와룡대교)

○ 규 모 : 체육시설 1식(파크골프장 36홀, 야구장 1면, A=105,465㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600	2,374	2,374	11	1,215
국 비
시 도 비	2,500	1,274	1,274	11	1,215
시군구비	1,100	1,100	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2021. 08. : 수질오염총량 협의(市 취수원다변화추진단)

○ 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의(대구지방환경청)

○ 2022. 06. : 하천점용허가 신청(낙동강유역환경청)

□ 향후계획

○ 2022. 07. : 하천점용허가 완료(낙동강유역환경청)

○ 2022. 07. : 사전행정절차 이행

○ 2022. 08. : 공사 발주 및 착공

○ 2024. 02. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

태전동 화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통과 박무성(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 차고지 부족해소, 지역 화물업계 종사자 공공복리 증진 및 화물운수사업        발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2023. 12월

○ 위 치 : 북구 태전동 43번지 외 48필지

○ 규 모 : 공영차고지 조성 A=33,287㎡, 주차면수 477면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	41,000	307	563	15,747	24,383
국 비	400	171	229	-	-
시 도 비	36,500	49	273	15,413	20,765
시군구비	4,100	87	61	334	3,618

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 타당성 조사 및 기본계획 용역 완료 : 2017. 7.

○ 화물자동차 공영차고지 조성 계획 : 2017. 8.

○ 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수 : 2019. 4. ~ 6.

○ GB관리계획 변경 승인 통보(국토부→대구시) : 2020. 11. 25.

○ 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시 : 2021. 6. 30.

○ 토지 등 감정평가 실시 : 2022. 1.

○ 사업인정에 관한 중앙토지수용위원회 심의(동의) : 2022. 5.

○ 실시계획 및 도시관리계획 변경결정 열람공고 : 2022. 6. 10. ~ 6. 30.

□ 향후계획

○ 실시계획 작성 고시 : 2022. 7.

○ 공사 시행 : 2023. 1.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월(당초), 2019. 1월 ~ 2023. 12월(변경)

○ 총사업비 : 30,000백만원(당초) → 41,000백만원(변경)

사업명

가산공원 지하공영주차장 조성사업

담당자

교통과 박무성(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관음동 주택밀집 지역의 주차난 해소를 위해 가산공원 지하 공영주차장을       조성하고, 공원을 재정비하여 주민 편의를 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1월 ~ 2023. 12월

○ 위 치 : 북구 관음동 1358-4번지

○ 규 모 : A=1,975㎡정도[지상(공원), 지하(주차장)], 주차면 53면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,600	87	9	1,000	2,504
국 비	1,800	43	5	500	1,252
시 도 비	900	22	2	250	626
시군구비	900	22	2	250	626

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 가산공원 지하공영주차장 조성계획 수립 : 2019.2.

○ 구 자체 지방재정 투자심사 : 2019.5.

○ 2020년도 생활SOC(주차환경개선지원) 사업 선정 : 2019.8.

○ 가산공원 지하공영주차장 조성사업 관련 용역 착수 : 2020. 2.

○ 제280회 대구시의회 임시회 : 2021. 2. 2.

○ 2021년 제1회 지구단위계획 공동위원회, 도시계획위원회 심의 : 2021. 2.

○ 2021년 제2회 대구광역시 공유재산심의회 심의 : 2021. 2.

○ 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 작성 고시 : 2021. 4.

○ BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 : 2021. 6. ~ 8.

○ 市 경관심의 : 2021. 12.

○ 실시계획 열람공고 및 실시계획 작성고시 : 2022. 5.

□ 향후계획

○ 일상감사 및 계약심사 : 2022. 7.

○ 공사 시행 : 2022. 8. ~ 2023. 4.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.