	팔거천 재해예방사업
	담당자 : 건설과 유정혁(☎665-2614)

Ⅰ		사업목적

□ 강북지역 도심을 통과하는 팔거천의 치수·이수·환경기능 증진 및 홍수예방과 더불어 주민들에게 청정한 하천공간 제공 및 쾌적한 도시 환경을 조성코자 함.

Ⅱ		사업개요

□ 위    치: 대구광역시 북구 읍내동 ~ 태전동(동천교~매남교)

□ 사업기간: 2015.1월 ~ 2022.12월

□ 사업내용: 하천정비 L=3.6km

□ 사 업 비: 24,877백만원(국비50%, 시비25%, 구비25%)

※ 2020년부터 지방이양사업으로 시비와 구비로 사업 진행

Ⅲ		추진상황

□ 고향의 강 사업선정 기본계획 수립(국토부): ’11. 6.

□ 실시설계용역 착수: ’15. 5.

□ 주민설명회 개최(1차): ’16. 5.

□ 실시설계(안) 부산지방국토관리청 협의완료: ’16. 6.

□ 주민설명회 개최(2차): ’16. 9.

□ 설계경제성 검토 등 행정절차 이행: ’16. 12. ~ ’17. 8.

□ 공사착공: ’17. 10.

□ 1차 공사 완료: ’17. 10. ~ ’18. 8.

□ 2차 공사 완료: ’18. 5. ~ ’19. 4.

□ 3차 공사 완료: ’19. 4. ~ ’20. 1.

□ 4차 공사 완료: ’20. 1. ~ ’21. 1.

□ 5차 공사 완료: ’21. 1. ~ ’22. 3.

□ 6차 공사 시공 중: ’22. 4. ~ ’22. 12.

Ⅳ		기대효과

□ 치수·이수·환경기능 증진 및 홍수예방, 청정한 하천공간 제공

Ⅴ		위치도(조감도) 및 현장사진 등 관련사진