	청년문화와 기술의 융합놀이터, 경북대 혁신타운
	담당 : 도시재생과 배준호(☎665-4275)

Ⅰ		사업목적

□ 대학이 가진 인적·기술적·물적자원을 활용하여 청년일자리 창출, 쇠퇴한 상권 활성화,         지역민의 삶의 질 향상 및 스마트한 도시환경 조성

Ⅱ		사업개요

□ 위  치 : 북구 산격동 1370-1번지 일원(205,060㎡)

□ 사업비 : 290억원(’19∼’23) * 재정보조290(국비 145, 지방비 145)

□ 단위사업

- 지역활력회복 : 어울림러닝센터 조성, 상생협력상가 조성, 대학예술문화존 조성,

대학예술키움 프로젝트

- 청년일자리창출 : 코워킹공간 조성, 스마트스타트업 인큐베이팅

- 공동체회복 : 복합커뮤니티센터 조성, 공동체활동 및 역량 강화, 현장지원센터 운영

- 스마트도시환경 : 스마트대학로 조성, 스마트 컬쳐스퀘어 조성,

스마트 생활편의서비스, 스마트 주차공간 공유

- 골목상권살리기 및 보행환경개선

Ⅲ		추진상황

□추진실적(2019년∼2021년)

- 2019. 10월 : 1차 실현·타당성 평가

- 2019. 12월 : 도시재생 특별위원회 활성화계획 조건부 승인

- 2020.  1월 : 도시재생 활성화계획 고시(2020.1.3. 북구 고시 제2020-2호)

- 2020.  3월 : 현장지원센터 운영 착수

- 2020.  3월 : 대학예술문화존 부지 매입 완료

- 2020.  3 ~  6월 : 청년 온라인 도시재생대학 등 프로그램 사업 3개 운영

- 2020.  7월 : 어울림러닝센터 부지 매입 완료

- 2020.  2 ~  6월 : 스마트타운 조성 기본구상 연구용역 완료

- 2020.  4 ~  8월 : 대학문화예술존 실시설계

- 2020.  7 ~ 10월 : 복합커뮤니티센터, 어울림러닝센터 건축설계 공모 추진

- 2020.  8 ~ 12월 : 대학문화예술키움 사업비 교부 및 공모 추진

- 2020.  8 ~ 11월 : 스마트타운 실시설계 용역 추진

- 2020. 10월 : 도시재생 선도지역 변경 고시 (변경내용 : 199,048→205,060㎡)

- 2020. 11월 : 도시재생특별위원회 실타평가

- 2020. 12월 : 활성화계획 변경 및 고시

- 2020. 12월 : 코워킹공간 부지 매입

- 2021.  1 ~  2월 : 코워킹공간 신축 및 리모델링 실시설계 용역

- 2021.  1 ~ 10월 : 대학예술문화존 리모델링 조성사업

- 2021.  1 ~ 12월 : 현장지원센터 운영 및 공동체활성화 사업

- 2021.  1 ~ 12월 : 대학문화예술키움 프로젝트 추진

- 2021.  4 ~ 12월 : 스마트스타트업 인큐베이팅 사업

□추진계획

- 2021.  5 ~ 2022. 10월 : 산격3동 복합커뮤니티센터 기본 및 실시설계 용역

- 2021.  6 ~ 2022. 9월 : 스마트타운 조성사업

- 2022.  1 ~ 12월 : 현장지원센터 운영 및 공동체활성화 사업

- 2022.  1 ~ 12월 : 대학문화예술키움 프로젝트 추진

- 2022.  1 ~ 12월 : 스마트스타트업 인큐베이팅 사업

- 2022.  3 ~ 12월 : 어울림러닝센터 실시설계 용역

- 2022.  6 ~  7월 : 코워킹공간 신축 실시설계 용역

- 2022.  9 ~ 2023. 8월 : 코워킹공간 신축공사

Ⅳ		기대효과

□ 청년창업지원 등 청년 일자리창출을 통한 인구유입 및 소득 증대 기대

□ 대학창작예술존 조성 등 특색있는 지역문화 형성으로 지역활력 회복

□ 청년주거안정을 위한 기숙사 조성, 경북대 북문 앞 스마트 스트리트 조성, 스마트               무인택배함, 쓰레기 분리수거함 등 설치로 스마트한 도시환경 조성

Ⅴ		위치도 및 사업계획도