109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 북구에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
관문동 행정복지센터 금호분소 신축	4,300	1,516	1,131	1,653	0	2023	2018	70%
검단동 행정복지센터 신축	4,076	159	1,520	2,397	0	2023	2020	13%
청사 내진보강사업	4,544	492	842	1,220	1,990	2024	2019	30%
칠성 종합시장 상권활성화	8,000	5,844	1,182.5	973.5	0	2023	2018	80%
칠성종합시장 복합커뮤니티센터이전조성사업	3,250	-	3,020	230	-	2023	2022	100%
칠성시장로 지하주차장 조성	9,533	-	488	4,500	4,500	2024	2020	15%
행복북구 통합 가족센터 건립	6,162	287	2,378	3,497	-	2023	2022	65%
우리동네 개울가 꿈놀이, 물놀이장조성	2,770	10	1,022	1,738	0	2023	2020	90%
금호강 바람소리길 축제	1,281	2	339	470	470	2023	2019	100%
무태조야동 복합 문화시설 건립	9,000	35	391	8,574	0	2024	2020	35%
떡볶이 페스티벌	900	50	50	300	500	2023	2022	100%
청소년 체험의 숲 조성	2,000	30	13	-	1,957	2024	2021	10%
구수산 스포츠센터 건립	23,700	2,600	0	1,000	20,100	2026	2022	5%
금호강 사수지역 체육시설 조성	2,500	2,500	200	1,100	-	2024	2023 (재심사)	10%
태전동 203-3번지선 도로건설	2,300	-	-	2,300	-	2025	2020	5%
조야동 187번지선 도로건설	4,800	900	760	500	2,640	2025	2020	30%
매천초교 주변 도로건설	2,860	1,900	-	-	-	2022	2020	100%
읍내동 468-24번지선 도로건설	2,500	-	-	2,500	-	2025	2021	5%
태전동 화물자동차 공영차고지 조성	41,000	870	18,945	8,330	12,855	2024	2017,2021	50%
도남지구 공영 주차장 조성	2,285	-	500	682	1,103	2025	2022	20%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2022년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

관문동 행정복지센터 금호분소 신축

담당자

재무과 이해진(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호지구 개발에 따른 대량의 인구유입으로 지구 내 금호분소 청사를 신축       하여 주민편의와 양질의 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. ~ 2023. 5.

○ 위 치 : 사수동 907번지

○ 규 모 : 지하1층/지상2층 (대지면적 1,313.3㎡, 연면적 813.78㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,300	1,516	1,131	1,653	0
시군구비	4,300	1,516	1,131	1,653	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2017. 10. 12.        : 신축기본계획 수립

○ 2017. 11. 20.        : 공유재산관리계획 심의 승인

○ 2018. 03. 22.        : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2018. 10. ~ 2020. 01. : 부지매입 완료

○ 2020. 11. 03.        : 시행계획 수립

○ 2020. 12. 14.        : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2021. 01. ~ 04.      : 설계 공모 및 입상작 선정

○ 2021. 05. 21.       : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021.  08. 24.         : 장애물 없는 생활환경 예비인증 신청

○ 2022. 01. ~ 03.      : 설계의 안전성 검토

○ 2022. 02. 09.        : 설계용역 완료

○ 2022. 03. 04.        : 공사 일상감사 및 계약심사 결과 통보

○ 2022. 04. 05.        : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023. 03. 30.       : 공사준공

□ 사업변경 내역

구 분	변 경 전(2021년)	변 경 후(2022년)	비 고
사업기간	2017. 10. ~ 2022. 12.	2017. 10. ~ 2023. 03.

사업명

검단동 행정복지센터 신축

담당자

재무과 이해진(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 검단동 행정복지센터 노후화에 따른 공공청사로서의 안전성 확보와 규모       협소에 따른 불편 해소 및 행정서비스를 제공하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10. ~ 2023. 05.

○ 위 치 : 검단동 1229-1 외 2필지

○ 규 모 : 지상 4층 (대지면적 1,710㎡, 연면적 1,077.32㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,076백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,076	159	1,520	2,397	0
시군구비	4,076	159	1,520	2,397	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 13%)

○ 2019. 10. 31.         : 신축기본계획 수립

○ 2019. 12. 17.         : 공유재산관리계획 심의 승인

○ 2020. 06. 10.         : 市 지방재정투자심사 승인

○ 2020. 07. 27.         : 시행계획 수립

○ 2020. 09. 25.         : 공공건축 사업계획 사전검토

○ 2020. 10. 22.         : 설계용역 일상감사 및 계약심사

○ 2020. 11. ~ 2021. 02.  : 설계 공모 및 입상작 선정

○ 2021. 02.             : 공유재산심의 (인접부지 매입건)

○ 2021. 04. ~ 11.       : 기본 및 실시설계 용역

○ 2021. 06. ~ 07.       : 문화재 지표조사

○ 2021.  7. 20.	: 인접부지 매입 (검단동 1229-3, 4번지)

○ 2021.  8.  2. ~ 8. 31.	: 문화재 시굴조사 용역

○ 2021. 10.  5. ~ 11. 3.	: 문화재 발굴조사 용역

○ 2021. 12. 20.	: 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 발급

○ 2022.  1.  4.	: 공사 일상감사 및 계약심사 요청

○ 2022.  1.  5.	: 설계의 안전성 검토 용역 착수

○ 2022.  1. 10.	: 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2022.  1. 21.	: 공사 일상감사 및 계약심사 결과 통보

○ 2022.  3. 11.	: 공사착공

□ 향후계획

○ 2023.  5.  4.	: 공사준공

사업명

청사 내진보강사업

담당자

재무과 이해진(☎665-4476)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2018년도 실시한 내진성능평가실시의 후속 조치로 내진보강공사가 필요한       청사에 적법한 내진공법을 적용하여 순차적으로 내진보강공사 실시

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 09. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 구 본관, 침산2동 행정복지센터 외 4개소

○ 규 모 : 내진보강공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,544백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,544	492	842	1,220	1,990
시군구비	4,544	492	842	1,220	1,990

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 09. 10.           : 내진보강공사 기본 계획 수립

○ 2019. 10. 28.           : 區 지방재정투자심사 승인

○ 침산2동 내진보강공사

- 2020. 9. ~ 10.        : 건축, 구조 실시설계

- 2021. 2.              : 일상감사

- 2021. 3. 22. ~ 6. 31.  : 내진보강공사

○ 복현1동 내진보강공사

- 2020. 9. ~ 10.        : 건축, 구조 실시설계

- 2021. 3. 22. ~ 5. 20.  : 내진보강공사

○ 태전2동 내진보강공사

- 2021. 2. 16. ~ 4. 21.  : 구조설계

- 2021. 5. 10. ~ 6. 28.  : 실시설계

- 2021. 8. ~ 22. 2. 11.  : 내진보강공사

○ 복현2동 내진보강공사

- 2022. 1. 14. ~ 3. 24.  : 구조설계

- 2022. 3. 29. ~ 5. 27.  : 실시설계

- 2022. 7. 4.  ~11. 30.  : 내진보강공사

□ 향후계획

○ 2023년 : 동천동 행정복지센터 내진보강공사

○ 2024년 : 구 본관 내진보강공사

□ 사업변경 내역

구 분	변 경 전(2021년)	변 경 후(2022년)	비 고
사업기간	2019. 9. ~ 2025. 12.	2019. 9. ~ 2024. 12.
사업대상	구본관,행정복지센터 7개소	구본관,행정복지센터 5개소	태전1동, 관음동 제외

사업명

칠성종합시장 상권활성화사업

담당자

민생경제과 류승국(☎665-2654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구도심 상권의 쇠퇴로 칠성종합시장 상권 내 전통시장, 골목상권 등

소상공인 생업기반이 약화된 칠성종합시장을 상업·업무·문화가 결합한

서비스 부가가치 창출의 핵심 거점 시장으로 육성하기 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2023년(5년간)

○ 위 치 : 칠성종합시장 일원

○ 규 모 : 132,890㎡

○ 사업주체 : 대구전통시장진흥재단(상권관리기구)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	8,000	5,844	1,182.5	973.5
국 비	4,000	2,922	591.25	486.75
시 도 비	1,907	1,368	236.5	302.5
시군구비	1,907	1,368	354.75	184.25
지 방 채	-		-	-
민간자본	186	186	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2022년 기준 칠성종합시장 상권활성화 4차년도 사업 완료

○ 통합테마존 조성, 통합고객서비스센터 운영, 상권닥터 컨설팅단 운영, 7Star 서포터즈 운영, 상인커뮤니티 운영지원, 상품진열개선(VMD) 등

□ 향후계획(2023년)

○ 2023년까지 칠성종합시장 상권활성화사업 추진 예정

○ 사업종료 후 시설물 등 사업성과물 區로 이관 후 사후관리 지속 예정

□ 사업변경 내역

○ 2020~2023년 사업비 중 민자부담분 코로나19로 인한 상인회 재정악화로 지방비(시,구)로 편성

○ 3개과업(청년집객테마시설, 완구문구거리, 그로서란트 조성)을 “통합테마존 조성”으로 변경

사업명

칠성종합시장 복합커뮤니티센터 이전조성사업

담당자

민생경제과 류승국(☎665-2654)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2016년도 전통시장 시설현대화사업으로 조성한 칠성종합시장 복합커뮤니티센터 부지의 임대차 계약의 만료가 임박함에 따라 새로 대체 부지에 복합커뮤니티센터를 조성하여 시장 상인과 고객 간 소통의 장을 마련하고 상인회 자생을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 1월 ~ 12월(공사비 정산은 2023년)

○ 위 치 : 대구광역시 북구 칠성동1가 151-2번지 7,8층

○ 규 모 : 연면적 938.14㎡(각 층 469.07㎡)

○ 내 용 : 대체부지 2개층 건물 매입 후 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,250백만원(전세보증금 3,200, 자체편성 50)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	3,250		3,020	230
국 비
시 도 비	3,200		3,000	200
시군구비	50		20	30
지 방 채
민간자본
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020.  7월 : 前 복합커뮤니티센터 소유주 임대차 계약 갱신 거부

○ 2021. 11월 : 중기 지방재정계획 반영

○ 2021. 12. 31. : 복합커뮤니티센터 이전계획 방침 수립

○ 2022.  3. 14. : 區 공유재산심의회 심의․의결

○ 2022.  4.  4. : 區 투자심사 통과

○ 2022.  4. 15. : 소유주 전세보증금 일부 반환(20억)

○ 2022.  4. 25. : 공유재산 관리계획안 區 의회 승인

○ 2022.  4월말 : 전세보증금 일부 반환금 市 반납 및 재교부

○ 2022.  5월초 : 대체부지 건물 감정평가 실시

○ 2022.  5. 20. : 건물 매매계약 체결

○ 2022. 6.  7. : 건물 일부(8층) 등기완료

○ 2022. 6. 30. : 전세보증금 잔금 반환 완료

○ 2022. 7.  7. : 전세보증금 잔금 市 반납 및 재교부

사업명	칠성종합시장 복합커뮤니티센터 이전조성사업	담당자	민생경제과 류승국(☎665-2654)
○ 2022. 7. 13. : 前 복합커뮤니티센터 전세권설정등기 해지 ○ 2022. 7월말 : 잔여 건물(7층) 등기 완료 ○ 2022. 8월 ~ 10월 : 건물 공간구성 협의 ○ 2022. 11월 : 복합커뮤니티센터 원가계산 용역 ○ 2022. 11월 ~ 12월 : 민간위탁 수탁자 선정 공개모집, 건물 리모델링 공사 ○ 2022. 12. 08. : 민간위탁 적격자심의위원회 개최 및 수탁자 선정 ○ 2022. 12. 27. : 복합커뮤니티센터 위수탁 계약 체결 □ 향후계획 ○ 리모델링 공사비 정산 후 대금 지출 ○ 수탁자로 선정된 칠성종합시장 연합회가 복합커뮤니티센터 관리 □ 사업변경 내역 ○ 구비로 편성한 사업비 중 리모델링 공사비 부족으로 30백만원 시설비로 전용(시스템 냉난방기 설치)

사업명

칠성시장로 지하주차장 조성

담당자

민생경제과 이가영(☎665-3184)

□ 사업목적 및 필요성

○ 칠성시장 이용객의 주차공간 확보 및 시장 내의 불법주정차 완화 목적

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 북구 칠성동2가 409-24번지 도로 하단

○ 규 모 : 지하1층(연면적 : 4000㎡, 주차대수 : 110대 정도)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,553백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,533		488	4,500	4,500
국 비	5,693		268	2,700	2,700
시 도 비	2,880		165	1,350	1,350
시군구비	960		55	450	450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 市 투자심사 (2020. 8.)

○ 기본 및 실시설계 용역 (2021. 5. ~ 2022. 12.)

○ 최종안 외 배치대안 市 관련부서 협의 (2022. 12. ~ 2023. 1.) ※협의불가

□ 향후계획

○ 전자주방시장 인근 부지를 활용한 사업추진 검토(사유지 매수협의 등)

사업명

행복북구 통합 가족센터 건립

담당자

여성아동과이성호

(☎665-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 건강가정·다문화가족지원센터의 기능을 확대하여 다양한 가족에 대한       지역중심의 보편적 가족서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 7.

○ 위 치 : 대구광역시 북구 대천로 77(동천동 930-1)

○ 규 모 : 지하1층, 지상5층, 연면적 1,661.69㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,162백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,162	287	2,378	3,497
국 비	1,500	126	1,000	374
시 도 비	750	63	302	385
시군구비	3,912	98	1,076	2,738
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ ‘19. 10.           : 생활SOC복합화 사업 공모선정

○ ‘19. 12.           : 지방재정투자심사(대구시)

○ ‘20.  1. ∼ ‘20.  5. : 공공건축 사업계획 사전검토, 일상감사 및 계약심사

○ ‘20.  5. ∼ ‘20.  9. : 건축설계 공모 및 심사

○ ‘20. 10. ∼ ‘21. 11. : 기본 및 실시설계 용역

○ ‘22.  1.           : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 7. 준공

□ 사업변경 내역

	당초	변경	비고
사업규모	연면적 990㎡ (지상 4층)	연면적 1661㎡ (지하1층~지하5층)	연면적 671㎡ 증가
총사업비	3,500백만원	6,162백만원	1,800백만원 증액

사업명

우리동네 개울가 꿈놀이,

물놀이장 조성

담당자

여성아동과 조은영(☎665-3083)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어린이공원 노후화 및 동서변지구 일대의 물놀이시설 부족으로 친수시설 요구 증가

○ 미세먼지, 폭염 등 기후변화로 인한 실내놀이시설 필요성 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 7.

○ 위 치 : 서변동 1764번지 일원

○ 규 모 : 지하1층~지상1층 (연면적 약399㎡)

(실내) 공중그물놀이, 볼풀장, 대형미끄럼틀 등

(실외) 물놀이터 조성, 에너지놀이터 조성, 피크닉장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,770백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,770	10	1,022	1,738	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,770	10	1,022	1,738	0
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

(실내놀이터)

○ ‘22. 03. 02. ~ 03. 18. : 놀이시설 제안 입찰공고

○ ‘22. 03. 28.          : 제안서평가위원회 개최

○ ’22. 05.              : 기본 및 실시설계

○ ’22. 08.              : 구조정밀안전진단용역

○ ’23. 01. ~ 05.         : 리모델링 공사 시행

○ ’23. 05. ~ 06.        : 놀이시설 안전인증 및 설치검사 시행

○ ’23. 06.              : 놀이시설 설계 및 제작·설치 용역 준공

(실외놀이터)

○ ’21. 03.   ~   11.   : 실시설계 용역

○ ’21. 11.             : 공원조성계획 결정(변경), 일상감사 및 계약심사

○ ’22. 03.   ~   07.   : 공사 시행

○ ’22. 07. 20.         : 실외놀이터 운영

□ 향후계획

○ ’23. 07. 11. ~     : 실내놀이터 시범운영

□ 사업변경 내역(해당시)

	당초	변경	비고
총사업비	2,570백만원	2,770백만원	2억 증액

사업명

2022 금호강 바람소리길 축제

담당자

문화예술과 이미경(☎665-2172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강이라는 생태자원을 배경으로 북구민의 축제한마당

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. 24. ~ 9. 25.

○ 위 치 : 산격대교 하단 문화광장 일원

○ 규 모 : 참가인원 5만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,281백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,281	2	339	470	470
국 비
시 도 비	20		20
시군구비	1,261	2	319	470	470
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개최완료

□ 향후계획

○ 2023. 9월 중 : 축제 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

무태조야동 복합문화시설 건립

담당자

문화예술과 이희균(☎665-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민의 독서문화 활성화 및 어르신의 행복한 여가활동을 위한 복합       문화공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2024.

○ 위 치 : 서변동 1747번지(서변근린공원 내)

○ 내 용 : 도서관과 노인복지관 복합시설 건립

○ 규 모 : 건축면적 517.2㎡, 연면적 2,467.21㎡(지상4층, 지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000	35	391	8,574	-
국 비	2,240	10	112	2,118	-
시 도 비	2,380	7	84	2,289	-
시군구비	4,380	18	195	4,167	-
지 방 채	-	-	-		-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2021. 11. ~ 2022. 12. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2023.  1. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2024.  9. : 준공

○ 2024. 12. : 개관 및 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

제3회 떡볶이 페스티벌

담당자

문화예술과 이효영(☎665-2793)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역경제 활성화

□ 사업개요 및 개최결과

○ 행사기간 : 2023. 6. 17.(토) ~ 18.(일)

○ 장    소 : DGB대구은행 파크 (고성로 191)

○ 내    용 : 떡볶이 판매, 체험 및 무대 프로그램 등

○ 참가인원 : 8만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	900	50	50	300	500
국 비
시 도 비	100			100	0
시군구비	800	50	50	200	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 개최완료

□ 향후계획

○ 예산증액, 국비지원 등을 통해 글로벌 축제로 성장

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

청소년 체험의 숲 조성

담당자

공원녹지과 김재수(☎665-4304)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경쟁 사회에 노출되어 많은 학습활동으로 심신이 약해져 있는 청소년들에게

도심 숲속에서 모험을 즐길 수 있는 체험 공간을 제공하여, 체력을 증진

시키고 호연지기를 길러 인재 양성의 발판을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년  1월 ～ 2024년  12월(5년)

○ 위 치 : 대구광역시 북구 산격동 산9-1(대불공원)

○ 규 모 : 청소년 체험의 숲 조성 4,700㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	30	13	-	1,957
국 비
시 도 비
시군구비	2,000	30	13	-	1,957
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 2. ~ 12. : 청소년 체험의 숲 기본구상 및 실시설계 용역

○ 2021. 1. ~ 5. : 대불근린공원 조성계획 변경 용역

○ 2021. 5.  : 區 지방재정투자사업 심사

□ 향후계획

○ 2024. 1. ~ 2024. 12. : 청소년체험의 숲 조성사업 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 도시철도 4호선 엑스코선에 따른 공원 조성계획 변경 협의 지연으로

사업 기간 연장 (당초 2020 ~ 2023 ‣ 변경 2020 ~ 2024)

사업명

구수산 스포츠센터 건립공사

담당자

체육진흥과 표세진(☎665-3955)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강북지역에 부재한 공공체육시설을 건립하여 지역의 균형있는 발전을 도모하고 근린생활형 체육시설 보급으로 주민의 건강증진 및 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 6. ~ 2026. 8.

○ 위    치 : 북구 읍내동 964번지 일원(구수산공원 내)

○ 규    모 : 지하1층~지상4층(부지면적 : 3,080㎡,연면적 : 8,483㎡)

○ 주요시설 : 수영장, 헬스장, 종합경기장 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,700	2,600	-	1,000	20,100
국 비	6,660	330	-	300	6,030
시 도 비
시군구비	15,540	770	-	700	14,070
지 방 채
민간자본
기 타	1,500	1,500	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021.  6. : 기본계획 수립

○ 2021. 10. : 대구광역시 공유재산심의회(부지 무상사용 결정)

○ 2022.  3. : 지방재정투자 심사의뢰(중앙) 통과

○ 2022. 11. ~ 2023. 2. : 건축 설계공모

□ 향후계획

○ 2023.  3. ~ 2024.  5. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2024.  6. ~ 2026.  8. : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

금호강 사수지역 체육시설 조성공사

담당자

체육진흥과 표세진(☎665-3955)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금호강 하천부지가 복원지구에서 친수지구로 변경됨에 따라 누구나 즐길 수 있는 체육시설에 대한 수요와 관심이 증가되어 이를 해소하고자 함

○ 구민 누구나 즐길 수 있는 체육시설에 대한 관심과 수요에 부응하고자 파크골프장 등 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2024. 10.

○ 위 치 : 북구 금호동 609-19번지 일원(와룡대교~금호대교)

○ 규 모 : 파크골프장 36홀, 기타 부대시설 조성 (A=105,465㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	2,500	200	1,100	-
국 비
시 도 비	2,500	1,400	200	1,100	-
시군구비	1,100	1,100	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의

○ 2022.  7. : 하천점용허가

○ 2022. 10. : 착공

○ 2023.  1. : 공사 중지

□ 향후계획

○ 2024. 10. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

태전동 203-3번지선 도로건설

담당자

건설과 정윤지(☎665-2885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거밀집지역 내 일부 미집행 구간으로 도로 및 하수관로가 정비되지 않아       우수기 주변지역 침수로 다수 민원이 발생하여 도로개설을 통하여 주민       생활여건을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2025.

○ 위 치 : 태전동 203—3번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=8m, L=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	-	-	2,300	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

□ 향후계획

○ ‘23.  8. ~ : 보상 및 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

조야동 187번지선 도로건설

담당자

건설과 배성혜(☎665-2882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개발제한구역 지정으로 생활에 불편을 겪고 있는 주민에게 미개설된 도시계획도로를 건설하여 주민불편사항을 해소하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 조야동 187번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6m, L=691m(1차 : 160m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	4,800	900	760	500	2,640
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ‘19.  8. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ ‘21.  1. ~ ‘22. 12. : 보상협의(1차)

○ ‘23.  1. ~ ‘23. 8. : 건축물 철거 공사 추진(L=160m)

□ 향후계획

○ ‘23. 9. ~ : 도로 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

매천초교 주변 도로개설

담당자

건설과 정윤지(☎665-2885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후주택 밀집지역 내 도로개설을 통한 주민의 주거환경 개선 및        지역개발을 촉진하고, 매천초교 등하교 학생의 통학 안전을 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 매천동 179번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=6~8m, L=320m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	1,900	1,900	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

○ ‘20. 7. ~ ‘22. 9. : 보상협의 및 도시관리계획(변경) 결정

○ 2023.  1. ~ 3. : 보상(매천초등학교 지장물) 협의

○ 2023.  1. ~ 3. : 건축물 철거 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 보상 및 건물 철거 후 도로개설은 주위 아파트 사업 시행자가 진행하는 것으로 협의 완료

사업명

읍내동 468-24번지선 도로건설

담당자

건설과 정윤지(☎665-2885)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 노후주택 밀집지역 내 도로개설을 통한 주민의 주거환경 개선 및 지역개발을 촉진코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 읍내동 468-24번지 일원

○ 규 모 : 도로건설 B=10m, L=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	2,500	-	-	2,500	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ ‘19.  7. : 실시설계 용역 시행

○ ‘20.  6. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시

□ 향후계획

○ ‘23.  8. ~ : 보상 및 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

태전동 화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통과 서유정(☎665-3046)

박무성(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 화물자동차 차고지 부족해소, 지역 화물업계 종사자 공공복리 증진 및 화물운수사업        발전에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2024. 12월

○ 위 치 : 대구광역시 북구 태전동 43번지 일원

○ 규 모 : 공영차고지 조성 A=33,287㎡, 주차면수 477면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  41,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	41,000	870	18,945	8,330	12,855
국 비	400	400	-	-	-
시 비	36,500	322	17,574	6,841	11,763
구 비	4,100	148	1,371	1,489	1,092

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  50 %)

◦ 2017. 7.	:	타당성조사 및 기본계획 용역완료
◦ 2019. 11.	:	대구시 도시계획위원회 심의(결과 : 조건부가결)
◦ 2020. 11.	:	제23회 중앙도시계획위원회 심의(원안가결) GB관리계획 변경 승인 통보(국토부)
◦ 2021. 6.	:	대구시 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시
◦ 2021. 8. 23.	:	지방재정 중앙투자심사 (결과 : 조건부가결)
◦ 2022. 4. ~ 5	:	중앙토지수용위원회 공익성 협의
◦ 2022. 9. 20.	:	도시계획시설(자동차정류장) 사업실시계획 인가고시 도시관리계획 변경결정 지형도면 고시
◦ 2022. 11. 10.	:	도시계획시설(자동차정류장) 사업실시계획 인가고시 도시관리계획변경 지형도면 고시(변경)
◦ 2023. 1.	:	대구시 신기술 특허공법(자주식 철골 주차장)선정
◦ 2023. 3.	:	문화재지표조사
◦ 2023. 3.	:	지방토지수용위원회 수용재결
◦ 2023. 5.	:	수용개시 및 사유지(20필지) 소유권 이전
◦ 2023. 6.	:	설계경제성평가(VE)

사업명

태전동 화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통과 서유정(☎665-3046)

박무성(☎665-3163)

□ 향후계획

◦ 2023. 7. ~ 8.	:	문화재 표본조사 실시, 건설기술 심의
◦ 2023. 9.	:	일상감사 및 계약심사 공사발주
◦ 2023. 11.	:	중앙토지수용위원회 이의재결
◦ 2023. 12.	:	국유지 매수
◦ 2024. 12.	:	공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월(당초), 2019. 1월 ~ 2023. 12월(변경)

○ 총사업비 : 30,000백만원(당초) → 41,000백만원(변경)

사업명

도남지구 공영주차장 조성사업

담당자

교통과 김은정(☎665-3014)

교통과 박무성(☎665-3163)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도남택지개발지구 완공 후 주차공간 부족이 예상되는 바, 한국토지주택공사           토지를 매입하여 주차장을 조성함으로써 이로 인한 주민불편을 사전에 예방하고        쾌적한 주차환경을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ∼ 2025. 6.

○ 위 치 : 북구 도남동 879(대구도남 9-1구역)

○ 규 모 : 공영차고지 조성 A=1,839.5㎡, 주차면수 53면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,285백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,285	-	500	682	1,103
국 비
시 도 비	1,142.5	-	250	150	742.5
시군구비	1,142.5	-	250	532	360.5
지 방 채
민간자본
기 타			(토지매입비)	(토지매입 및 설계용역비)	(공사비)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 도남지구 공영주차장 조성계획 수립 : 2021.  7. 19.

○ 공유재산관리계획안 수립 및 공유재산심의회 심의 : 2022.  9.

○ 공유재산관리계획안 의회 승인 : 2022. 10.

○ 토지매매계약 체결(한국토지주택공사) : 2022. 12. 23.

○ 주차장용지 토지매입 계약 보증금 지출 : 2022. 12. 28.

○ 주차장용지 토지매입 1차 중도금 지출 : 2023.  2. 24.

○ 확정측량 완료에 따른 면적정산 실시(2023.6.30.기준) : 2023.  6. 13.

□ 향후계획

○ 주차장용지 토지매입 2차 중도금 및 면적정산금 지출 : 2023. 10.

○ 주차장용지 토지매입 3차 중도금 및 잔금 지출 : 2024.  4. ∼ 10.

○ 실시설계용역 : 2024.  6. ∼ 2024.  12.

○ 일상감사 및 계약심사 : 2024. 11. ∼ 2024. 12.

○ 주차장 조성공사 시행 : 2025. 2.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 12월(당초) → 2022. 1월 ~ 2025. 6월(변경)

○ 사업규모 : A=1,837㎡(당초) → A=1,839.5㎡,(변경)[도남지구 확정측량 완료]

10-2. 지방채 발행사업

우리 북구에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 북구에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.