	피란민촌의 재탄생, 어울림 마을 福현
	담당 : 도시재생과 장호경(☎665-4272)

Ⅰ		사업목적

□ 무허가 건축물 등 노후불량건축물의 밀집으로 주거환경이 극히 열악한 복현1동 일원에 안전 우려 무허가건축물 재정비, 주민자생경제 육성, 기초생활인프라 공급 등으로 마을공동체 회복

Ⅱ		사업개요

□ 위    치 : 복현동 484-34번지 일원 (사업면적 53,679㎡)

□ 사 업 비 : 95억원(국비 47.5, 시비 33.25, 구비 14.25)

□ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)

□ 사업내용

- 마중물 사업 : 어울림 가로 정비 사업, 마을 안심길 조성, 복현 어울림센터 조성 사업, 복잡소 조성 사업, 주민역량강화사업

- 자체 사업 : 상생협력상가(한옥카페), 공동이용시설(주차장)

Ⅲ		추진상황

□ 추진실적(2019년∼2022년)

- 2019. 7월 : 도시재생 실타평가 승인

- 2019. 12월 : 마을 안심길 조성 부지 매입

- 2020. 6월 : 복잡소 부지 매입

- 2020. 6월 ~ 2021. 3월 : 복현1동 도시재생 거점시설 건축 설계공모 추진

- 2021. 6월 : 대구도시개발공사 업무혁약 체결

- 2021. 12월 ~ 2022. 4월 : 어울림 가로 정비 사업, 마을 안심길 조성 사업 완료

- 2022. 1월 ~ 2023. 12월 : 복잡소 조성 사업 추진

- 2022. 11월 ~ 2023. 12월 : 복현 어울림센터 조성 사업 추진

□ 추진계획

- 2022. 1월 ~ 2023. 12월  : 복잡소 조성사업 추진

- 2022. 11월 ~ 2023. 12월 : 복현 어울림센터 조성사업 추진

- 2023. 9월 ~ 2023. 12월  : 공동이용시설(주차장) 조성사업 추진

Ⅳ		기대효과

□ 방치된 공한지 경관개선을 통한 쾌적한 주거환경 개선 및 주민 휴게 공간 제공

□ 주민들의 커뮤니티 활동이 일상화되고 세대 간 연결망이 다양화 되어 공동체의 역동성 제고

□ 대학가와 인접한 창업지원 거점시설, 상생협력공간 조성을 통해 청년-주민 상생협력의 성공적인 비즈니스 모델 창출

Ⅴ		위치도 및 사업계획도